정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	묘도동 도독마을 관광자원 개발사업
② 추진배경	조명연합수군 테마공원과 연계하여 도독마을을 대상으로 역사, 문화 및 주변 자연경관과 조화를 이루는 관광루트 조성을 통한 관광객 유치
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 묘도동 도독마을일원 ○ 사 업 량 : 전망대, 조망쉼터, 둘레길 조성 등 ○ 사 업 비 : 1,900백만 원(도비 950, 시비 950)
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자	행정5급 김상욱 시설6급 구제태 시설7급 안병현
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘21.∼‘26.
<그간 주요 추진내용>
○ 2021년 균특회계 관광자원개발(전환) 대상사업 사업계획서 제출 요청 ※ 전라남도 관광과-11891호		‘20.11.17.	이광동 과장 최석남 팀장 양지훈 주무관 <관련자> 강정희 도의원
○ 2021년 균특회계 관광자원개발(전환) 대상사업 사업계획서 제출 ※ 관광과-19947호		‘20.11.19.	정재호 과장 윤대근 팀장 고영란 주무관
○ 2021년 균특회계 관광자원개발(전환)사업 예산편성 현황 제출 ※ 관광과-1285호		‘21. 1.25.	정재호 과장 윤대근 팀장 고영란 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」 일상감사 요청 ※ 관광과-18424		‘22.10.5.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장

○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-8362	‘22.10.12.	이충현 과장 이재태 팀장 김한수 차장
○ '묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계 용역' 시행 ※ 관광과-19282	‘22.10.17.	나병곤 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 『묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역』계약심사 요청 ※ 관광과-19369	‘22.10.18.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ ｢묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계 용역｣ 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-49935	‘22.10.20.	한진숙 과장 신숙이 팀장 오영수 주무관
○ '묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계 용역' 계약 의뢰 ※ 관광과-19837	‘22.10.24.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」입찰 공고 ※ 회계과-50607	‘22.10.25.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-54035	‘22.11.14.	김태횡 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」선금급 지급 결정 통보 ※ 회계과-58084	‘22.12.5.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」일시정지 검토 보고 ※ 관광과-11686	‘23.6.12.	정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장

○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」일시정지 검토 보고 ※ 관광과-11694	‘23.6.13.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 실시설계용역」일시정지 통보 ※ 회계과-27509	‘23.6.13.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 사면안전성 검토용역」시행 ※ 관광과-5557	‘24.03.18.	신영자 과장 우희원 팀장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 사면안전성 검토용역」계약 의뢰 ※ 관광과-5593	‘24.03.18.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 사면안전성 검토용역」계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-15164	‘24.03.27.	강행숙 과장 우희원 팀장 이지향 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 사면안전성 검토용역」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-26934	‘24.05.24.	고영백 팀장 우희원 팀장 이지향 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 」시행 ※ 관광과-10764	‘25.05.22.	정기명 시장 최정기 부시장 정재호 국장 김상욱 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 계약심사 요청(묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사) ※ 관광과-12045	‘25.06.09.	김상욱 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사」계약심사 결과 회신 ※ 전라남도 회계과-28538	‘25.06.11.	김상욱 과장 구제태 팀장 안병현 주무관

○ 『묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)』계약 의뢰(긴급) ※ 관광과-12492	‘25.06.13.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)」 입찰 공고 ※ 회계과-30129	‘25.06.17.	나병곤 국장 김종필 과장 양동안 팀장 김대건 주무관
○ 여수시 관급자재선정심의위원회 심의 안건 제출(도독마을 통신공사) ※ 관광과-13177	‘25.06.20.	김상욱 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-35195	‘25.07.09.	김종필 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○ 착공계 제출[묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)] ※ 관광과-15113	‘25.07.14.	김상욱 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(1차분)」 선금 지급 결정 알림 ※ 회계과-37640	‘25.07.22.	나병곤 국장 김종필 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 전기공사」 선금 지급 결정 알림 ※ 회계과-40358	‘25.08.06.	김종필 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○ 묘도동 도독마을 조명연합수군 테마관광공원 일원 CCTV 설치에 따른 행정예고 ※ 관광과-18632	‘25.08.27.	김상욱 과장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(1차분)」 설계변경 검토보고 ※ 관광과-19199	‘25.09.03.	김상욱 과장 김종필 과장 김기현 팀장 구제태 팀장 한재진 주무관

○ ｢묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(1차분)｣ 변경계약 의뢰 ※ 관광과-19259	‘25.09.04.	신정임 팀장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 묘도동 도독마을 관광자원 개발공사(조경) 관급자재(합성목재) 검사기관 변경 검토 ※ 관광과-19261	‘25.09.04.	신정임 팀장 김기현 팀장 박동훈 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(조경)」관급자재(합성목재) 검사기관 변경 의뢰 ※ 관광과-19323	‘25.09.04.	신정임 팀장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(1차분)」 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-45210	‘25.09.10.	김종필 과장 김기현 팀장 김대건 주무관
○ 『묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)』현장대리인 변경 승인 알림 ※ 관광과-20092	‘25.09.15.	김상욱 과장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 『묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사 건설재해예방 기술지도용역』 외 1건 계약 의뢰 ※ 관광과-20278	‘25.09.16.	김상욱 과장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업」2025.09월 일용노무비 청구서 송부 ※ 관광과-20772	‘25.09.22.	김상욱 과장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 『묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사 건설재해예방 기술지도용역』 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-47093	‘25.09.22.	김종필 과장 정일권 팀장 김대현 주무관
○ 착수계 제출[묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사 건설재해예방 기술지도 용역] ※ 관광과-20897	‘25.09.23.	김상욱 과장 구제태 팀장 한재진 주무관

○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전기) - LED경관조명기구」납품대상 업체 알림 ※ 회계과-48147	‘25.09.29.	김종필 과장 정일권 팀장 이정은 주무관
○ 묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(조경) 관급자재(합성목재) 납품서류 제출 ※ 관광과-22350	‘25.10.15.	신정임 팀장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ ｢묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(총괄 및 1차분)｣ 변경계약 의뢰 및 체결 ※ 관광과-26647, 회계과-61649	‘25.10.15.	신정임 팀장 구제태 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(1차분)」준공검사조서 제출 ※ 관광과-171 관광과-582 (2026.01.09. 시행)	2026.01.09.	신정임 팀장 김한수 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사(2차분)」 시행 및 계약체결 ※ 관광과-2242, 회계과-5586	2026.02.05.	정일권 과장 김한수 팀장 한재진 주무관
○ 「묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 조경공사」 일시정지 요청 ※ 관광과-565 회계과-2912	2026.07.09.	정일권 과장 김한수 팀장