정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금오도 비렁길 활성화 사업
② 추진배경	우리지역의 주요 섬관광 자원인 금오도 비렁길 탐방로에 출렁다리를 설치하여 섬섬여수에 맞는 관광 자원 개발
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 남면 금오도 비렁길 4~5코스 내 ○ 사 업 량 : 출렁다리, 전망대 조성 등 ○ 사 업 비 : 3,000백만 원(도비 1,500, 시비 1,500)
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자	행정5급 신영자 시설6급 구제태 시설9급 서준영
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘20.∼‘24.
<그간 주요 추진내용>
○ 금오도지구 섬관광 활성화방안 연구용역 완료 ※ 섬자원개발과-2675호		‘18.4.2.	심근하 과장 노기섭 팀장 박해순 주무관
○ 2020년 균특회계 전환사업 예산반영 결과 통보 ※ 기획예산과-18825호		‘19.10.25.	나병곤 과장 이강 팀장 정민호 주무관
○ 2020년 균특회계 전환사업 예산요구서 제출 ※ 관광과-20724호		‘19.10.30.	정재호 과장 최종춘 팀장 고영란 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 시행 ※ 관광과-2099호		‘20.2.6.	서은수 부시장 김용필 국장 정재호 과장 최종춘 팀장 이민호 주무관
○ 실시설계용역 계약심사 결과 통보 ※ 회계과-6912호		‘20.2.10.	박은규 과장 한숙영 팀장 서병국 주무관
○ 실시설계용역 계약체결 ※ 회계과-13077호		‘20.3.10.	양기원 국장 박은규 과장 오병구 팀장 이미경 주무관
○ 다도해해상국립공원계획 변경신청서 제출 ※ 관광과-6100호		‘21. 4.19.	정재호 과장 윤대근 팀장 신지원 주무관
○ 특허 사용협약 체결 ※ 관광과-6773호		‘21. 4.27.	김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 신지원 주무관

○ 기본 및 실시설계용역 감독공무원 변경 지정 통보 ※ 회계과-36858호	‘21. 7. 9.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 공유수면 점용․사용 협의 신청 ※ 관광과-15646호	‘21.10. 1.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 출렁다리 사업 관련 산지전용허가 협의 신청 ※ 관광과-18023호	‘21.11. 8.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 출렁다리 사업 경관심의위원회 심의 요청 ※ 관광과-18096호	‘21.11. 9.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 출렁다리 사업 관련 산지일시사용신고 협의 신청 ※ 관광과-18642호	‘21.11.16.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 공유수면 점용ㆍ사용 승인 알림 ※ 해양항만레저과-13048호	‘21.11.24.	정용길 과장 정이인 주무관
○ 금오도 비렁길 출렁다리 설치관련 문화재지표조사 협의요청 ※ 관광과-19410호	‘21.11.25.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 출렁다리 설치관련 문화재지표조사 협의요청 회신 ※ 관광과-28803호	‘21.12. 1.	고영준 과장 신아름 주무관
○ 산지전용허가 협의 ※ 도시계획과-28926호	‘21.12. 9.	김문환 과장 황규석 팀장 김미래 주무관

○ 산지일시사용신고 수리 알림 ※ 도시계획과-29478호	‘21.12.15.	조정만 팀장 황규석 팀장 김미래 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 설계변경 검토보고 ※ 관광과-21428호	‘21.12.22.	김학섭 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 설계변경 계약 의뢰 ※ 관광과-21446호	‘21.12.23.	박형열 과장 윤대근 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 설계변경 계약 사항 통보 ※ 회계과-64856호	‘21.12.23.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 기간연장 검토보고 ※ 관광과-1758호	‘22.01.28.	나병곤 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 기간연장 및 변경 계약 의뢰 ※ 관광과-1765호	‘22.01.28.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 변경계약 사항 통보 ※ 관광과-4796호	‘22.02.03.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (비렁길 4코스) 공원사업시행협의 회신 ※ 다도해해상사무소-1399호	‘22.03.21.	김철도 소장 정주영 과장 강영환 주무관

○ 금오도 비렁길 활성화사업 출렁다리 설치공사 집행계획 ※ 관광과-6239호	‘22.04.12.	박현식 부시장 나병곤 국장 신숙이 과장 오병구 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 일상감사 요청 ※ 관광과-6582호	‘22.04.18.	이범송 팀장 임기형 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-3548호	‘22.04.25.	이충현 과장 배도선 팀장 김한수 차장
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 관광과-7869호	‘22.05.06.	나병곤 국장 김춘수 과장 전대결 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 관광과-7882호	‘22.05.06.	박형열 과장 이범송 팀장 전대결 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 통보 ※ 회계과-21780호	‘22.05.06.	조계윤 과장 김진욱 팀장 류형준 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 일상감사에 따른 처리결과 제출 ※ 관광과-7956호	‘22.05.09.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 공원 사업 시행 협의 동의 안내 ※ 관광과-8066호	‘22.05.10.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관

○ 금오도 비렁길 활성화사업 계약심사 의뢰 ※ 관광과-8833호	‘22.05.20.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 계약심사 결과 알림 ※ 전라남도 회계과-25827호	‘22.06.03.	이길용 과장 김재인 팀장 박제홍 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 계약의뢰 ※ 관광과-11478호	‘22.06.29.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 검토보고 ※ 관광과-11664호	‘22.06.30.	나병곤 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 요청 ※ 관광과-11718호	‘22.07.01.	박형열 과장 임기형 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 변경계약 사항 통보 ※ 회계과-33146호	‘22.07.05.	조계윤 과장 신정임 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 기본 및 실시설계용역 준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-33147호	‘22.07.05.	조계윤 과장 신정임 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 강판자재 구입 수의견적 제출 안내 공고 ※ 회계과-33725호	‘22.07.08.	신숙이 팀장 오병구 팀장 김여원 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 입찰 공고 ※ 회계과-36018호	‘22.07.21.	김지선 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-39511호	‘22.08.22.	김지선 국장 장혜숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (1차분) 계약체결 사항 통보 (정정) ※ 회계과-40575호	‘22.08.23.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 주민참여감독 위촉 통보 ※ 회계과-40909호	‘22.08.25.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 강판자재 구입 입찰 공고 알림 ※ 회계과-43052호	‘22.09.07.	한진숙 과장 김진욱 팀장 이주희 주무관
○ 공유수면 점사용·사용 실시계획 승인 신청 ※ 관광과-19372호	‘22.10.18.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업(총괄 및 1차분) 선금급 지급 결정 통보 ※ 회계과-49486호	‘22.10.18.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 공유수면 점사용·사용 실시계획승인 알림 ※ 해양항만레저과-11729호	‘22.10.28.	이근철 과장 정정희 팀장 김민성 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 강판자재 구입 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-51821호	‘22.11.01.	한진숙 과장 김진욱 팀장 이주희 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 추진을 위한 관급자재 선정 심의위원회 심의 의뢰 ※ 관광과-21527호	‘22.11.11.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (1차분) 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 관광과-22756호	‘22.11.28.	정기명 시장 박현식 부시장 나병곤 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 이동일 과장 이 강 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄분 및 1차분) 변경계약 의뢰 ※ 관광과-23151호	‘22.11.11.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄분 및 1차분) 변경계약 사항 통보 ※ 회계과-58421호	‘22.12.06.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 관급자재(케이블) 계약의뢰 ※ 관광과-53650호	‘22.12.09.	박형열 과장 조정선 팀장 정준호 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (1차)-케이블타이 선금지급 결청통보 ※ 회계과-60313호	‘22.12.15.	김지선 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이주희 주무관
○ 2023년 상반기 인사발령에 따른 감독공무원 변경 요청 ※ 관광과-235호	‘23.01.12.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 2023년 상반기 인사발령에 따른 감독공무원 변경 ※ 회계과-655호	‘23.01.12.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 1차분 실정보고에 따른 설계변경 검토보고(2차) ※ 관광과-2379호	‘23.02.13.	김종기 부시장 정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄 및 1차분) 현장대리인 변경 검토 요청 ※ 회계과-5314호	‘23.02.13.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄분 및 1차분) 변경계약 의뢰 ※ 관광과-2533호	‘23.02.15.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄 및 1차분) 현장대리인 변경 검토 보고 ※ 관광과-2534호	‘23.02.15.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄 및 1차분) 현장대리인 변경 검토 회신 ※ 관광과-2554호	‘23.02.15.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (총괄 및 1차분) 변경계약 사항 통보 ※ 회계과-5716호	‘23.02.15.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (1차분) 준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-6490호	‘23.02.21.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (2차분) 시행 ※ 관광과-3742호	‘23.03.05.	김종기 부시장 정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (2차분) 계약의뢰 ※ 관광과-3777호	‘23.03.06.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-8786호	‘23.03.07.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급 계약 검토 요청 ※ 회계과-9421호	‘23.03.09.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급계약 검토 결과 회신 ※ 관광과-4319호	‘23.03.13.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급 계약 검토 요청(정정) ※ 회계과-13639호	‘23.04.03.	한진숙 과장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급계약 검토 결과 회신(정정) ※ 관광과-6445호	‘23.04.06.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 (2차분) 선금급 지급 결정 통보 ※ 회계과-14180호	‘23.04.05.	한광민 국장 봉영권 팀장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급 계약 검토 요청 ※ 회계과-14530호	‘23.04.06.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급계약 검토 결과 회신 ※ 관광과-6720호	‘23.04.10.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 다도해해상국립공원 내 공원사업시행 허가기간 연장요청(금오도 비렁길 활성화사업) ※ 관광과-12897호	‘23.06.27.	신영자 과장 나경숙 팀장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 다도해해상국립공원 내 공원사업시행 허가기간 연장요청(금오도 비렁길 활성화사업) ※ 관광과-12897호	‘23.06.28.	신영자 과장 나경숙 팀장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 – 케이블 제작설치(타이케이블) 중앙조달 수수료 집행 ※ 관광과-14327호	‘23.07.13.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업(비렁길4코스) 사업기간 연장 공원사업시행협의 회신 ※ 대도해해상사무소-4836호	‘23.07.14.	김철도 소장 오창영 과장 강영환 계장
○ 금오도 비렁길 활성화사업(2차) 기성검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-37184호	`23.07.26.	한진숙 과장 최철웅 팀장 장규현 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업(2차분) 기성검사조서 제출 ※ 관광과-15617호	`23.07.31.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업(2차분) 1회 기성대가 확정 알림 ※ 회계과-39011호	`23.08.07.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 장규현 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급사 현장대리인 변경 검토 요청 ※ 회계과-39391호	`23.08.09.	한진숙 과장 최철웅 팀장 장규현 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급사 현장대리인 변경 검토 보고 ※ 관광과-16412호	`23.08.09.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 하도급사 현장대리인 변경 검토 회신 ※ 관광과-16610호	`23.08.10.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 시공단계의 건설사업관리계획 변경 제출 (금오도 비렁길 활성화사업) ※ 관광과-18054호	`23.09.04.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 – 인명구조함 납품서류 송부 ※ 관광과-19927호	`23.09.26.	구제태 팀장 서준영 주무관
○ 지출재원변경요청 (금오도 비렁길 활성화사업) ※ 관광과-25071호	`23.12.08.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 – 보행매트 납품서류 송부 ※ 관광과-26388호	`23.12.26.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 관광과-547호	`24.01.08.	김종기 부시장 정재호 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」설계변경 계약심사 의뢰 ※ 관광과-600호	`24.01.11.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」설계변경 계약심사 보완 요청 ※ 감사담당관-474호	`24.01.15.	정웅정 담당관 이재태 팀장 오차영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(설계변경)」계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-1214호	`24.02.01.	정웅정 담당관 이재태 팀장 오차영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」실정보고에 따른 공사기간 연장 검토보고 ※ 관광과-2713호	`24.02.05.	정재호 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」설계변경 계약의뢰 ※ 관광과-2877호	`24.02.07.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(총괄 및 2차분)」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-6880호	`24.02.08.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 이정란 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」실정보고에 따른 공사기간 연장 검토보고 ※ 관광과-4278호	`24.02.28.	정재호 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업」변경계약 의뢰 ※ 관광과-4287호	`24.02.28.	김정아 팀장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(총괄 및 2차분)」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-9981호	`24.02.29.	김병완 국장 강행숙 팀장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 민ㆍ관합동 기동감찰 조치계획서 제출 ※ 관광과-4876호	`24.03.08.	김정아 팀장 구제태 팀장 서준영 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 관광과-5146호	`24.03.12.	신영자 과장 김남영 팀장 우희원 팀장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(총괄 및 2차분)」설계변경 계약의뢰 ※ 관광과-5168호	`24.03.12.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(총괄 및 2차분)」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-12498호	`24.03.14.	김병완 국장 고영백 팀장 우희원 팀장 이정란 주무관
○ 금오도 비렁길 활성화사업 민ㆍ관합동 기동감찰 조치결과 제출 ※ 관광과-5485호	`24.03.15.	신영자 과장 구제태 팀장 서준영 주무관
○「금오도 비렁길 활성화사업(2차분)」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-12818호	`24.03.18.	김남영 팀장 우희원 팀장 이정란 주무관