정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농어촌 미급수지역(소라면 봉두리 봉두마을) 지방상수도 확충사업
② 추진배경	농어촌 지방상수도가 공급되지 않은 지역에 깨끗한 수돗물 공급 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 소라면 봉두리 1246-6번지 일원 ○ 사 업 량 : 상수관로 L=5.9㎞ ○ 사 업 비 : 1,527백만 원(도비 1,206 / 시비 321)
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자	시설8급 조민철 시설9급 이진학
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘21.∼‘22.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진계획 ※ 상수도과-3986호		‘19. 3. 4.	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 주무관
○ 실시설계 용역 시행 ※ 상수도과-5810호		‘19. 3. 28.	김정남 단장 이영철 과장 명호남 팀장 유재영 주무관
○ 실시설계 용역 완료 ※ 상수도과-20718호		‘19. 11. 8.	조진우 주무관
○ 상수도분야 보조사업 예산 확정 ※ 전남 물환경과-1601호		‘21. 1. 21.	-
○ 집행계획 ※ 상수도과-2332호		‘21. 2. 2.	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관

○ 일상감사 요청 ※ 상수도과-3415호	‘21. 2. 18.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-1594호	‘21. 2. 23.	-
○ 일상감사 조치결과 제출 ※ 상수도과-4527호	‘21. 3. 5.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 전라남도 계약심사 사전 협의 ※ 상수도과-5602호	‘21. 3. 9.	정일석 팀장 조민철 주무관
○ GIS DB 구축 용역 집행 계획 ※ 상수도과-5614호	‘21. 3. 17.	서은수 부시장 김지선 단장 오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ GIS DB 구축 용역 계약심사 요청 (공사, 폐기물) ※ 상수도과-5831호	‘21. 3. 23.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 전라남도 계약심사 요청 ※ 상수도과-7065호	‘21. 4. 8.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 전라남도 계약심사 결과 알림 (공사) ※ 전라남도 회계과-17544호	‘21. 4. 16.	-
○ 계약의뢰 ※ 상수도과-8284호	‘21. 4. 26.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 수도행정과-5425호	‘21. 5. 25.	-
○ 현장대리인 변경 검토보고 ※ 상수도과-12234호	‘21. 6. 25.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관

○ 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-6902호	‘21. 6. 28.	-
○ 공사일시중지 요청	‘21. 11. 1.	오정환 과장 정일석 팀장 조민철 주무관
○ 공사일시중지 통보	‘21. 11. 2.
○ 1회 기성금 지급	‘21. 12. 3.	조민철 주무관
○ 공사일시중지 해지 및 변경계약 의뢰	‘22. 5. 17.	주영근 과장 정일석 팀장 이진학 주무관
○ 공사일시중지 해지 및 변경계약 통보	‘22. 5. 17.
○ 공기연장 검토 보고	‘22. 8. 4.	한광민 단장 주영근 과장 서범규 팀장 이진학 주무관
○ 공기연장 요청	‘22. 8. 8.	주영근 과장 서범규 팀장 이진학 주무관
○ 변경계약 사항 통보 ※ 수도행정과-9479호	‘22. 8. 16.
○ 기성금(2회) 지급	‘22. 9. 7.	이진학 주무관
○ 준공(사업완료)	‘22. 11. 30.	이진학 주무관