정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동백노인복지관 건립사업
② 추진배경	◦ 원도심권 노인여가활동 공간 부족에 따른 노인복지관 건립으로 어르신들의 활기차고 건강한 노후생활 도모
③ 사업개요	◦ 위 치 : 여수시 관문동 855번지 ◦ 사업규모 : 연면적 2,138.74㎡(지상5층) / 부지 2,257㎡ ◦ 주요시설 : 사무실, 식당, 물리치료실, 다목적실, 프로그램실 등 ◦ 총사업비 : 14,693백만원(시비)
④ 사업부서	여수시 노인장애인과		⑤ 담당자		사회복지5급 정종인 시설6급 최정일 시설8급 임이슬
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간		’19. 2. ~ ’26. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 ※ 노인장애인과-5967호		’19. 2.∼ 5.		서정신 과장 황경미 팀장 김현욱 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건립 계획(방침결정) ※ 노인장애인과-33582호		’19. 8. 12.		권오봉 시장 고재영 부시장 이정화 국장 류갑선 과장 정성숙 팀장 신미연 주무관
○ 지방재정투자심사 등 행정절차 이행		’19. 10.		류갑선 과장 정성숙 팀장 신미연 주무관
○ 주민설명회 개최(1차) ※ 노인장애인과-3277호		’20. 1. 30.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 주민 면담 및 독려		’20. 2.∼ 5.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 주민설명회 개최(2차) ※ 노인장애인과-26460호		’20. 6. 26.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 부지실태조사 실시 1차 ※ 노인장애인과-42530호		’20. 9. 14.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 부지실태조사 실시2차 ※ 노인장애인과-45265호		’20. 10. 14.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 실태조사지속독려		’20. 11. 11.~		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건축기획 계획수립 ※ 노인장애인과-57841호		’20. 12. 15.		박은규 국장 류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건축기획 계약의뢰 ※ 노인장애인과-58126호		’20. 12. 16.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 공공건축 사업계획서 사전검토 신청 ※ 노인장애인과-11990호		’21. 3. 2.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 보상계획열람공고 ※ 노인장애인과-13009호		’21. 3. 5.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 보상계획열람공고에 따른 의견서(이의신청서) 회신 ※ 노인장애인과-18224, 18240호		’21. 4. 1.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 편입토지 감정평가 실시		’21. 5. 6. ∼ 5. 7.		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 감정평가 결과 및 손실보상 계획 수립 ※ 노인장애인과-30047호(’21. 6. 11.) ○ 협의보상 추진		’21. 6. ∼		류갑선 과장 정성숙 팀장 박혜정 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건축 설계공모 ※ 노인장애인과-46718호(’21. 9. 17.)		’21. 9. 17. ∼ 11. 29.		서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건축기획 용역 완료 ※ 노인장애인과-49801호(’21. 10. 12.)		’21. 10. 12.		조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건립사업 건축 설계공모 당선작 선정 ※ 노인장애인과-60613호(’21. 12. 9.)		’21. 12. 9.		서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건립사업 기본 및 실시설계용역 실시 ※ 노인장애인과-62141호(’21. 12. 17.)		’21. 12. 28. ∼		서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건립사업 편인 토지(물건) 등에 대한 손실보상협의 요청(5차 / 김*신 외 9인(개소)) ※ 노인장애인과-2314호(’22. 1. 13.)		’22. 1. 13.		조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최 ※ 노인장애인과-2361호(’22. 1. 13.)		’22. 1. 18.		서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 2022년 원도심권 노인복지관건립사업 편입토지(물건 등) 손실보상비 집행 계획 수립 ※ 노인장애인과-4851호(’22. 1. 25.)		’22. 1. 25.		서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이아현 주무관
○ 원도심권 노인복지관 건립사업 추진부서 변경 및 업무이관 검토보고 ※ 노인장애인과-10623호(’22. 2. 24.)		’22. 2. 24.		권오봉 시장 박현식 부시장 서정신 국장 조영화 과장 서은주 팀장 이승욱 주무관
○ 「여수시 원도심권 노인복지관 건립사업」 추진 업무 이관(공사준공시까지 허가민원과 이관) ※ 노인장애인과-11208호(’22. 2. 28.)		’22. 3. 2.		조영화 과장 서은주 팀장 이승욱 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가 주민의견 청취 공고 ※ 허가민원과-37319호(’22. 5. 27.)		’22. 5. 27.		김동호 과장 기 권 팀장 최두용 주무관
○ ｢원도심권 노인복지관 건립사업 기본 및 실시설계용역｣기성대가(1회) 확정 통보 *159,470,000원		’22. 5. 31.		김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 여미향 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 일시정지 *토지수용재결 등 행정절차 이행에 따른 용역 일시정지 ※ 허가민원과-40714호(’22. 6. 13.)		’22. 6. 14.		김동호 과장 기 권 팀장 최두용 주무관
○ 실시계획인가 고시 ※ 도시계획과-17382호(’22. 8. 9.)		’22. 8. 11.		김문환 과장 임기형 팀장 김현식 주무관
○ ｢원도심권노인복지관 건립사업｣ 편입토지(지장물) 등에 대한 실태조사 결과보고 ※ 허가민원과-62936호(’22. 9. 8.)		’22. 9. 8.		김동호 과장 기 권 팀장 김아람 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 허가민원과-63151호(’22. 9. 13.)		’22. 9. 13.		김동호 과장 기 권 팀장 김아람 주무관
○ 원도심권노인복지관 건립사업 편입토지 등에 대한 (재)감정평가 의뢰 ※ 허가민원과-70276호(’22. 10. 13.)		’22. 10. 13.		김동호 과장 기 권 팀장 김아람 주무관
○ 재평가 결과 및 보상 계획 ※ 허가민원과-81975호(’22. 11. 28.)		’22. 11. 28.		정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 김동호 과장 기 권 팀장 김아람 주무관
○ 보상협의 요청 ※ 허가민원과-82238호(’22. 11. 29.)		’22. 11. 29.		김동호 과장 기 권 팀장 김아람 주무관
○ 보상협의 ※ 노인장애인과-12116호(’23. 3. 9.)		’23. 3. 9.		조영화 과장 기 권 팀장 김혁준 주무관
○ 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 노인장애인과-21839(’23. 4. 27.)		’23. 4. 27.		조영화 과장 기 권 팀장 김혁준 주무관
○ 지장물 철거공사 시행 ※ 노인장애인과-25534(’23. 5. 19.)		‘23. 5. 19.		김종기 부시장 김태횡 국장 조영화 과장 기 권 팀장 김혁준 주무관
○ 지방토지수용위원회 재결서 정본 송부 ※ 전라남도 지역계획과-9913(’23. 7. 6.)		’23. 7. 6.		유호규 국장 문인기 과장 최영택 팀장 김신표 주무관
○ 사업 대상지 공탁 및 보상비 지급 ※ 노인장애인과-36437(’23. 7. 24.)		’23. 7. 24. ~8. 8.		김종기 부시장 김태횡 국장 류갑선 과장 기 권 팀장 오상돈 주무관
○ 실시계획(변경)인가 고시 ※ 도시계획과-31039호(’23. 12. 26.)		’23. 12. 26.		이영호 과장 임기형 팀장 정동현 주무관
○ 지장물 철거공사 준공 ※ 노인장애인과-6545호(’24. 1. 31.)		’24. 1. 26.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 ※ 노인장애인과-19068호(’24. 4. 8.)		’24. 4. 8.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 건설사업관리계획 수립 제출 ※ 노인장애인과-2114호(’24. 7. 18.)		’24. 7. 18.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 2024년 제3회 기술자문위원회 자문결과 알림 ※ 건설과-3028호(’24. 8. 20.)		’24. 8. 20.		박 경 팀장 김승주 팀장 박가영 차장
○ 2024년도 제4차 계약심의위원회 심의결과 알림 ※ 회계과-46324호(’24. 8. 29.)		’24. 8. 29.		강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○ 공용건축물 건축협의 요청 (동문동-원도심권 노인복지관) ※ 노인장애인과-14228호(’24. 9. 27.)		’24. 9. 27.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 2024년도 제6차 지방재정계획심의위원회 개최 결과 알림 ※ 기획예산과-6042호(’24. 10. 14.)		’24. 10. 14.		신영자 과장 서은주 팀장 이주희 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도 예비인증 교부 알림 ※ 한국장애인개발원장 BF인증팀-10408호(’24. 10. 28.)		’24. 10. 28.		안성준 부장 이영환 팀장 김윤정 대리
○ 일상감사 의견 조치 결과 제출 ※ 노인장애인과-19549호(’24. 10. 31.)		’24. 10. 31.		이귀자 팀장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 일시정지 해지 및 2차 계약 시행 ※ 노인장애인과-20258호(’24. 11. 5.)		’24. 11. 5.		최정기 부시장 류갑선 국장 이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-11610호(’24. 11. 6.)		’24. 11. 6.		정웅정 감사담당관 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 「원도심권 노인복지관 건립사업」 신축공사 총괄 및 1차분 계약 검토보고 ※ 노인장애인과-21209호(’24. 11. 11.)		’24. 11. 11.		정기명 시장 김병완 국장 류갑선 국장 이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 「여수시 원도심권 노인복지관」 명칭 공모 결과 및 최종 확정 ※ 노인장애인과-21413호(’24. 11. 11.)		’24. 11. 11.		정기명 시장 류갑선 국장 이영민 과장 이귀자 팀장 원미진 주무관
○ 전기 감리 용역 시행 ※ 노인장애인과-22847호(’24. 11. 19.)		’24. 11. 19.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 건설재해예방 기술지도 용역(전기,통신,소방) 시행 ※ 노인장애인과-22791호(’24. 11. 19.)		’24. 11. 19.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 설계의도 구현 용역 시행 ※ 노인장애인과-22877호(’24. 11. 20.)		’24. 11. 20.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 건설재해예방 기술지도 용역(건설) 시행 ※ 노인장애인과-23222호(’24. 11. 21.)		’24. 11. 21.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 착수일자 지정 요청(249728B-00) ※ 조달청 건설기술계약과-13391호(’24. 12. 17.)		’24. 12. 17.		신은미 서기관 김현태 주무관
○ 건설사업관리 용역(감독권한 대행 등) 착수일자 제출 ※ 노인장애인과-28480호(’24. 12. 18.)		’24. 12. 18.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 가설건축물 축조신고 수리 알림 ※ 허가과-22379호(’24. 12. 18.)		’24. 12. 18.		김인옥 과장 고영백 팀장 이서호 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 완료계 제출 ※ 노인장애인과-29697호(’24. 12. 24.)		’24. 12. 24.		이영민 과장 최정일 팀장 오상돈 주무관
○ 설계안전검토보고서 검토의견 회신 ※ 국토안전관리원 건설품질관리실-19680호(’24. 12. 30.)		’24. 12. 30.		김성준 실장직무대리 이윤향 차장 이주영 직원
○ 공사 및 용역 일시정지 요청 ※ 노인장애인과-6028호(’25. 1. 31.)		’25. 1. 31.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 건설사업관리 용역 일시정지 해지 요청 ※ 노인장애인과-21190호(’25. 4. 18.)		’25. 4. 18.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 공사 및 용역 사업명 변경 요청 ※ 노인장애인과-21585호(’25. 4. 21.)		’25. 4. 21.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 설계의도 구현 용역 계약 재의뢰 ※ 노인장애인과-21634호(’25. 4. 21.)		’25. 4. 21.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 건설사업관리 용역(1차분) 완료계 제출 ※ 노인장애인과-22620호(’25. 4. 25.)		’25. 4. 25.		이귀자 팀장 최석윤 팀장 임이슬 주무관
○ 공사 및 용역 일시정지 해지 및 변경계약 요청 ※ 노인장애인과-23300호(’25. 4. 30.)		’25. 4. 30.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 건설폐기물 처리 용역 시행 ※ 노인장애인과-24070호(’25. 5. 7.)		’25. 5. 7.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 가연성폐기물 처리 용역 시행 ※ 노인장애인과-24124호(’25. 5. 7.)		’25. 5. 7.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 품질시험계획서 승인 알림 ※ 노인장애인과-28217호(’25. 6. 2.)		’25. 6. 2.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 공용건축물 착공신고 수리 알림 ※ 허가과-20250호(’25. 6. 11.)		’25. 6. 11.		신정환 팀장 유은아 주무관
○ 동백노인복지관 신축공사(건축,기계,토목) 하도급 계약사항 검토의견 회신 ※ 노인장애인과-31179호(’25. 6. 18.)		’25. 6. 18.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 동백노인복지관 건립 사업 BF 등 본인증 용역 시행 ※ 노인장애인과-32105호(’25. 6. 24.)		’25. 6. 24.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 도시계획시설(사회복지시설) 실시계획(변경)인가 신청(동백노인복지관 건립사업) ※ 노인장애인과-32887호(’25. 6. 27.)		’25. 6. 27.		정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 도시계획시설(사회복지시설) 사업 실시계획(변경)인가 알림(동백노인복지관) ※ 도시계획과-17114호(’25. 8. 11.)		’25. 8. 11.		명호남 과장 문정환 팀장 김규민 주무관
○ 「동백노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)」 설계변경 검토보고 ※ 노인장애인과-43329호(’25. 8. 22.)		’25. 8. 22.		김정오 국장 김종필 과장 정일권 팀장 정종인 과장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 「동백노인복지관 신축공사(건축,기계,토목)(1차분 및 총괄분)」 변경계약 요청 ※ 노인장애인과-43478호(’25. 8. 22.)		’25. 8. 22.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 동백노인복지관 신축공사(관급자재) 변경계약 검토보고 ※ 노인장애인과-43993호(’25. 8. 26.)		’25. 8. 26.		이귀자 팀장 엄정직 팀장 정일권 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관
○ 동백노인복지관 신축공사(관급자재) 변경계약 요청 ※ 노인장애인과-44081호(’25. 8. 27.)		’25. 8. 27.		이귀자 팀장 최정일 팀장 임이슬 주무관