정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	웅천 원형마리나 해상계류장 설치공사 (완료)
② 추진배경	해양레저 인프라 시설을 조성하여 이순신 마리나, 웅천 거점형 마리나와 연계하여 해양관광 휴양도시로서 여수시의 이미지 제고
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 웅천동 1885번지 전면 해상 일원 ○ 사 업 량 : 해상계류시설 30척 ○ 사 업 비 : 3,200백만 원
④ 사업부서	여수시 해양항만레저과		⑤ 담당자	행정5급 정용길 시설6급 서주용
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘19. 1.∼‘21. 7.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 등 1건 시행 ※ 해양항만레저과-105호		‘19.01.04.	송석주 국 장 오영록 과 장 명호남 팀 장 박 성 주무관
○ 실시설계 착수 보고		‘19.02.10.	송석주 국 장 오영록 과 장 명호남 팀 장 박 성 주무관
○ 실시설계 등 1건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-1986호		‘19.03.04.	오영록 과 장 최금환 팀 장 정준호 주무관
○ 실시설계 용역 중간보고		‘19.05.28.	권오봉 시 장 고재영 부시장 송석주 국 장 오영록 과 장 최금환 팀 장 정준호 주무관
○ 실시설계 등 1건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-6529호		‘19.07.10.	오영록 과 장 최금환 팀 장 김희곤 주무관
○ 실시설계 등 1건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-318호		‘20.01.10.	오영록 과 장 최금환 팀 장 서주용 차 장
○ 기술자문위원 확인서 제출 ※ 해양항만레저과-2283호		‘20.03.12.	오영록 과 장 최금환 팀 장 서주용 차 장
○ 웅천 원형마리나 계류장 설치공사 시행 ※ 해양항만레저과-7793호		‘20.07.30.	권오봉 시 장 서은수 부시장 장인호 국 장 정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 공사 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-52090호		‘20.09.16.	-
○ 전기 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-52649호		‘20.09.18.	-
○ 실시설계용역 준공 ※ 회계과-52999호		‘20.09.22.	-
○ 공유수면 점용․사용 승인 고시 ※ 해양항만레저과-11549호		‘20.11.12.	-
○ 해역이용협의용역 준공 ※ 회계과-63097호		‘20.11.18.	-
○ 공사 일시정지 해지 ※ 해양항만레저과-2969호		‘21.03.23.	장인호 국 장 정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 공사 실정보고 검토 ※ 해양항만레저과-3555호		‘21.04.07.	서은수 부시장 장인호 국 장 정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 공사 변경계약 의뢰 ※ 해양항만레저과-3627호		‘21.04.08.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 전기 시설부담금 납부 ※ 해양항만레저과-3797호		‘21.04.13.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 공사 기성검사 공무원 지정통보 ※ 회계과-274739호		‘21.05.26.	-
○ 전기공사 일시정지해지 및 변경계약 의뢰 ※ 해양항만레저과-5915호		‘21.06.01.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 기간연장 및 변경계약 의뢰 ※ 해양항만레저과-7150호		‘21.06.30.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 공사 준공검사 공무원 지정 ※ 회계과-40954호		‘21.08.05.	-