정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소호2지구 연안정비사업
② 추진배경	○ 바다와 도시를 이어주는 여백의 공간과 바다를 체험하고 배울 수 있는 친수공간을 조성하여 새로운 볼거리와 편안한 휴식 공간 제공 ○ 지역 내 부족한 여가 공간과 오픈 스페이스를 확보하여 지역주민의 삶의 질 향상 및 관광객 유치에 기여
③ 사업개요	○ 위 치: 여수시 소호동 1181-1번지 지선 공유수면 ○ 사 업 량: 해안산책로(데크로드) L=1,369m 등 ○ 사 업 비: 11,746백만원(국비 5,573, 도비 997, 시비 5,176)
④ 사업부서	해양수산국 해양정책과		⑤ 담당자	행정5급 문장곤 시설6급 박채원
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	’20. 1.∼’27. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 제3차 연안정비 기본계획 반영 ※ 전라남도 해운항만과-14476호(2019.12.13.)		’19.12.13.	-
○ 2021년도 연안정비사업 보조금 교부 신청 ※ 해양항만레저과-12837호(2020.01.20.)		’20. 1.20.	오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관
○ 실시설계용역 시행 ※ 해양항만레저과-870호(2020.01.28.)		’20. 1.28.	권오봉 시 장 서은수 부시장 이한곤 국 장 오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관
○ 실시설계용역 전라남도 계약심사 ※ 해양항만레저과-1721호(2020.02.25.)		’20. 2.25.	오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관
○ 실시설계용역 사업수행능력(PQ) 평가 추진 ※ 해양항만레저과-1760호(2020.02.25.)		’20. 2.25.	이한곤 국 장 오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관
○ 실시설계용역 사업수행능력(PQ) 평가 완료 ※ 해양항만레저과-2997호(2020.03.31.)		’20. 3.31.	이한곤 국 장 오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관

○ 실시설계용역 착수 ※ 해양항만레저과-4734호(2020.05.12.)	’20. 5.12.	오영록 과 장 곽춘호 팀 장 황보호 주무관
○ 일반해역이용협의 용역 시행 ※ 해양항만레저과-9667호(2020.09.17.)	’20. 9.17.	장인호 국 장 정용길 과 장 서종선 팀 장 황보호 주무관
○ 일반해역이용협의 용역 착수 ※ 해양항만레저과-10626호(2020.10.15.)	’20.10.15.	정용길 과 장 서종선 팀 장 황보호 주무관
○ 실시설계용역 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-309호(2021.01.08.)	’21. 1. 8.	정용길 과 장 서종선 팀 장 전동국 주무관
○ 일반해역이용협의 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-304호(2021.01.08.)	’21. 1. 8.	정용길 과 장 서종선 팀 장 전동국 주무관
○ 실시설계용역 중간보고 ※ 해양항만레저과-2467호(2021.03.10.)	’21. 3. 8.	권오봉 시 장 장인호 국 장 정용길 과 장 서종선 팀 장 전동국 주무관
○ 경관심의 ※ 해양항만레저과-7009호(2021.06.28.)	’21. 6.28.	정용길 과 장 서종선 팀 장 전동국 주무관
○ 기술자문 심의 ※ 해양항만레저과-8292호(2021.07.23.)	’21. 7.23.	정용길 과 장 문치곤 팀 장 전동국 주무관
○ 실시설계용역 최종보고 ※ 해양항만레저과-9433호(2021.08.19.)	’21. 8.13.	권오봉 시 장 김병완 국 장 정용길 과 장 문치곤 팀 장 전동국 주무관
○ 일상감사 조치결과 회신 ※ 해양항만레저과-11266호(2021.10.06.)	’21.10. 6.	정용길 과 장 문치곤 팀 장 전동국 주무관
○ 실시설계용역 완료 ※ 해양항만레저과-13952호(2021.12.15.)	’21.12.15.	정용길 과 장 전동국 주무관
○ 일반해역이용협의 요청 ※ 해양항만레저과-2998호(2022.03.28.)	’22. 3.28.	조계완 과 장 정정희 팀 장 전동국 주무관

○ 일반해역이용협의 보완 ※ 해양항만레저과-6008호(2022.06.14.)	’22. 6.14.	조계완 과 장 정정희 팀 장 전동국 주무관
○ 공유수면 점・사용 승인 ※ 해양항만레저과-10004호(2022.09.15.)	’22. 9.15.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 공유수면 점・사용 실시계획 승인 ※ 해양항만레저과-10282호(2022.09.22.)	’22. 9.22.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 주민간담회 개최 ※ 해양항만레저과-11363호(2022.10.21.)	’22.10.21.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 계약심사 요청 ※ 해양항만레저과-11842호(2022.10.21.)	’22.10.21.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 일반해역이용협의 준공 ※ 해양항만레저과-12080호(2022.11.07.)	’22.11. 7.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 소호지구 연안정비사업 (총괄 및 1차분) 시행 ※ 해양항만레저과-13468호(2022.12.05.)	’22.12. 5.	정기명 시 장 김용필 국 장 이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 계약심의위원회 심의 ※ 해양항만레저과-13922호(2022.12.26.)	’22.12.26.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 해양항만레저과-13925호(2022.12.26.)	’22.12.26.	이근철 과 장 정정희 팀 장 김영주 주무관
○ 총괄 및 1차분 착공 ※ 해양정책과-3111호2023.03.28.)	’23. 3.28.	윤국한 과 장 조정선 팀 장 김영주 주무관
○ 1차분 선금 지급 결정 통보 ※ 해양정책과-4813호(2023.05.03.)	’23. 5. 3.	윤국한 과 장 조정선 팀 장 김영주 주무관
○ 국유지 사용 협의 요청 (도로시설관리과) ※ 해양정책과-5914호(2023.05.30.)	’23. 5.30.	윤국한 과 장 조정선 팀 장 김영주 주무관

○ 맨손어업보상 추진계획 수립 ※ 해양정책과-9994호(2023.08.21.)	’23. 8.21	정기명 시 장 김종기 부시장 정재호 국 장 윤국한 과 장 박재천 팀 장 김영주 주무관
○ 소호2지구 연안정비사업 일시정지 ※ 해양정책과-10746호(2023.08.30.)	’23. 8.30.	윤국한 과 장 김용채 팀 장 김영주 주무관
○ 맨손어업 보상 감정평가 결과보고 ※ 해양정책과-6777호(2024.06.13.)	’24. 6.13.	정기명 시 장 김종기 부시장 정재호 국 장 윤국한 과 장 박재천 팀 장 김영주 주무관
○ 맨손어업 보상비 집행	’24. 7.10.~	윤국한 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 신청 검토결과 보고 ※ 해양정책과-2303호(2024.08.19.)	’24. 8.19.	최정기 부시장 김상태 국 장 윤국한 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 예산 성립전 사용 검토보고 ※ 해양정책과-3283호(2024.09.06.)	’24. 9. 6.	정기명 시 장 최정기 부시장 김상태 국 장 윤국한 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 1차분 관급자재 추가 구매 검토보고 ※ 해양정책과-4392호(2024.10.07.)	’24.10. 7.	정기명 시 장 최정기 부시장 김상태 국 장 윤국한 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 공사 일시정지 해제 ※ 해양정책과-637호(2025.01.08.)	’25. 1. 8.	윤국한 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관

○ 총괄 및 1차분 설계변경(1회) ※ 해양정책과-1711호(2025.02.17.)	’25. 2.17.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 맨손어업 보상 완료 ※ 해양정책과-2545호(2025.03.06.)	’25. 3.12.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 안전점검 수행기관 지정계획 방침결정 ※ 해양정책과-2985호(2025.03.19.)	’25. 3.19.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 안전점검 수행기관 세부평가 결과 보고 ※ 해양정책과-3429호(2025.03.28.)	’25. 3.28.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 안전점검 수행기관 지정 ※ 해양정책과-3981호(2025.04.09.)	’25. 4. 9.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 농지의 타용도일시사용협의 요청 ※ 해양정책과-4644호(2025.04.23.)	’25. 4.23.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 안전관리자 변경 검토보고 ※ 해양정책과-5000호(2025.05.01.)	’25. 5. 1.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 하도급관리계획서(변경) 승인 요청에 따른 검토보고 ※ 해양정책과-5421호(2025.05.14.)	’25. 5.14.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 폐기물처리용역 시행 ※ 해양정책과-6501호(2025.06.10.)	’25. 6.10.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 하도급계약 적정성 및 직접시공 계획서 변경 검토보고 ※ 해양정책과-6755호(2025.06.16.)	’25. 6.16.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 공유수면 간이해양이용협의용역 시행 검토(안) ※ 해양정책과-6811호(2025.06.16.)	’25. 6.16.	정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 1차분 기성청구서 제출 ※ 해양정책과-7131호(2025.06.20.)	’25. 6.20.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관

○ 2차분 집행계획(안) ※ 해양정책과-7328호(2025.06.25.)	’25. 6.25.	정기명 시 장 최정기 부시장 정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 2차분 착공계 제출 ※ 해양정책과-7379호(2025.06.25.)	’25. 6.25.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 1차분 기성(개산급)검사조서 제출 ※ 해양정책과-7734호(2025.07.01.)	’25. 7.01.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 전망광장 설치 관련 민원 처리계획(안) ※ 해양정책과-7808호(2025.07.02.)	’25. 7.02.	정기명 시 장 최정기 부시장 정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 간이해양이용협의용역 착수계 제출 ※ 해양정책과-7814호(2025.07.02.)	’25. 7.02.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 폐기물처리용역 착수계 제출 ※ 해양정책과-7881호(2025.07.03.)	’25. 7.02.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 황보호 주무관
○ 1차분 기간연장 요청에 대한 검토보고 ※ 해양정책과-8421호(2025.07.14.)	’25. 7.14.	정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 항로표지 설치․관리 등 조치 계획 제출 ※ 해양정책과-8572호(2025.07.16.)	’25. 7.16.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 1차분 하도급 변경계약에 따른 적정성 검토보고 ※ 해양정책과-9541호(2025.08.04.)	’25. 8. 4.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 간이해양이용협의 요청 ※ 해양정책과-9918호(2025.08.11.)	’25. 8.11.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관

○ 공사용 항로표지 설치공사 집행 계획 ※ 해양정책과-10169호(2025.08.18.)	’25. 8.18.	정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 공사용 사설항로표지 설치공사 계약심사 요청 ※ 해양정책과-10169호(2025.08.18.)	’25. 8.19.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 품질시험계획(변경) 검토보고 ※ 해양정책과-10292호(2025.08.20.)	’25. 8.20.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 자재(고장력볼트) 공급원 승인 요청에 따른 검토보고 ※ 해양정책과-10377호(2025.08.21.)	’25. 8.21.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 공사용 가도 및 임시적치장 공유 수면 점용․사용 협의 신청 ※ 해양정책과-10955호(2025.09.02.)	’25. 9. 2.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 하도급계약 관련 가능여부 검토 요청에 대한 회신 ※ 해양정책과-11037호(2025.09.04.)	’25. 9. 4.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 간이해양이용협의용역 준공검사 조서 제출 ※ 해양정책과-11096호(2025.09.04.)	’25. 9. 4.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 폐기물처리용역 기간연장 요청에 따른 검토보고 ※ 해양정책과-11166호(2025.09.08.)	’25. 9. 8.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 해양환경영향조사용역 집행계획(안) ※ 해양정책과-11261호(2025.09.09.)	’25. 9. 9.	정덕영 국 장 문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 해양환경조사용역 일상감사 및 계약심사 요청 ※ 해양정책과-11309호(2025.09.10.)	’25. 9.10.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 하도급관리계획 변경(2회)에 따른 적정성 검토보고 ※ 해양정책과-11515호(2025.09.16.)	’25. 9.16.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 사설항로표지 설치공사 건설재해 예방 기술지도용역 ※ 해양정책과-11723호(2025.09.19.)	’25. 9.19.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관

○ 사설항로표지 설치공사 착공계 제출 ※ 해양정책과-11944호(2025.09.24.)	’25. 9.24.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 공유수면 점용․사용 승인 알림 (공사용 가도 및 임시적치장 설치) ※ 해양정책과-12042호(2025.09.26.)	’25. 9.26.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관
○ 사설항로표지 설치공사 실정보고에 따른 검토보고 ※ 해양정책과-12378호(2025.10.10.)	’25.10.10.	문장곤 과 장 최종춘 팀 장 박채원 주무관