정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼산면사무소 신축공사(완료)
② 추진배경	준공후 38년 경과된 노후 건축물로 건축물 구조안정성 확보 및 시민에게 편리한 주차공간과 접근성이 좋은 시민중심의 청사제공을 위해 신축 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 128-1,125-5 ○ 규 모 : 연면적 1,140㎡, 지상3층 ○ 사 업 비 : 3,884백만원(부지 280, 공사비 등3,604)
④ 사업부서	여수시 회계과		⑤ 담당자	담당자 : 시설9급 이아람 부서장 : 행정5급 조계윤
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	‘20. 4. ~‘21. 2.
<그간 주요 추진내용>
○ 삼산면사무소 부지매입검토보고 ※ 회계과 - 47968호		‘17. 9. 15.	주철현 시장 최종선 부시장 이노철 국장 김용우 과장 이재곤 팀장 박종석 주무관
○ 공유재산심의회 심의 및 의결 – 신축부지 매입관련 ※ 회계과 - 50848호		‘17. 9. 29.	김용우 과장 이재곤 팀장 박종석 주무관
○ 삼산면사무소 부지매입 계획 ※ 회계과 - 6302호		‘18. 2. 7.	송병구 국장 장두한 과장 정미순 팀장 박종석 주무관
○ 삼산면사무소 신축부지 매입에 따른 감정평가 의뢰 ※ 회계과 - 8644호		‘18. 2. 26.	장두한 과장 정미순 팀장 박종석 주무관
○ 삼산면사무소 매입부지 보상계획 ※ 회계과 - 16270호		‘18. 4. 4.	주철현 시장 최종선 부시장 송병구 국장 장두한 과장 고영준 팀장 이재곤 팀장 박종석 주무관

○ 삼산면사무소 매입부지 보상협의 계획 ※ 회계과 - 16909호	‘18. 4. 9.	송병구 국장 장두한 과장 장지문 팀장 정미순 팀장 박종석 주무관
○ 삼산면사무소 청사 신축부지 추가매입 요청에 따른 검토보고 ※ 회계과 - 20469호	‘18. 5. 4.	송병구 국장 장두한 과장 정미순 팀장 박종석 주무관
○ 공유재산심의회 심의 및 의결 – 삼산면사무소 신축공사 ※ 회계과 - 1465호	‘19. 1. 15.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축 추진계획 보고 ※ 회계과 - 1480호	‘19. 1. 17.	권오봉 시장 고재영 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정성숙 팀장 이 강 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계용역 시행 ※ 회계과 - 20469호	‘19. 7. 10.	고재영 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정성숙 팀장 이 강 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 40270호	‘19. 8. 7. (‘19. 9. 9. 착수)	오병구 팀장(대결) 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사에 따른 도시계획시설(변경)결정용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 43345호	‘19. 8. 27. (‘19. 9. 3. 착수)	한숙영 팀장(대결) 손하진 팀장(대결) 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축 주민설명회에 따른 진입로,주차장 확보 및 건물배치 등 검토보고 ※ 회계과 - 51363호	‘19. 8. 27.	고재영 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정성숙 팀장 이 강 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관

○ 삼산면사무소 신축관련 도시관리계획 결정(변경)신청 ※ 회계과 - 55093호	‘19. 10. 30.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 임시사무실 임차계획 ※ 회계과 - 61475호	‘19. 11. 29.	박은규 과장 김현미 팀장 이권재 주무관
○ 삼산면사무소 신축사업 기본 및 실시설계용역 최종 결과보고 ※ 회계과 - 62585호	‘19. 12. 2.	권오봉 시장 고재영 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정성숙 팀장 이 강 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 경관·건축 심의의뢰 ※ 회계과 - 63460호	‘19. 12. 9.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사에 따른 기술자문 의뢰 ※ 회계과 - 3579호	‘20. 1. 21.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 임시사무실 리모델링 공사(건축 외 2)계약의뢰 ※ 회계과 - 2970호	‘20. 1. 21.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 기본 및 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 회계과 - 5534호	‘20. 2. 3.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축에 따른 이사용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 7649호	‘20. 2. 13.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 최준용 주무관
○ 삼산면사무소 임시사무실 컨테이너(창고)임대 계약의뢰 ※ 회계과 - 9143호	‘20. 2. 20.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이권재 주무관

○ 삼산면사무소 신축공사 계약심사 요청 ※ 회계과 - 10008호	‘20. 2. 25.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 관급자재 선정심의 요청 ※ 회계과 - 13536호	‘20. 3. 11.	박은규 과장 김현미 팀장 이권재 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 시행 ※ 회계과 - 15856호	‘20. 3. 19.	권오봉 시장 서은수 부시장 양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 감리 용역 시행 ※ 회계과 - 15592호	‘20. 3. 19.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 실정보고(1차)에 따른 검토보고 ※ 회계과 - 23114호	‘20. 4. 21.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 하도급 계약 검토보고 ※ 회계과 - 32829호	‘20. 6. 4	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 실정보고에 따른 설계변경(1차) 검토보고 ※ 회계과 - 34598호	‘20. 6. 11	서은수 부시장 양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 설계변경(1차) 계약의뢰 ※ 회계과 - 34598호	‘20. 6. 12.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 기성대가(1회) 확정통보 ※ 회계과 - 36342호	‘20. 6. 19	양기원 국장 박은규 과장 오병구 팀장 조민아 차장
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 기성대가(2회) 확정통보 ※ 회계과 - 54307호	‘20. 9. 28.	김용필 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 김동승 주무관

○ 삼산면사무소 신축공사 설계변경 의뢰 ※ 회계과 - 59415호	‘20. 10. 29.	조계윤 과장 김희영 팀장 손하진 팀장 이아람 주무관
○ 도시계획도로 선형변경에 따른 삼산면사무소 신축공사 추진계획보고 ※ 회계과 - 59561호	‘20. 10. 29.	권오봉 시장 서은수 부시장 양기원 국장 김용필 국장 조계윤 과장 김희영 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 기성대가(3회) 확정통보 ※ 회계과 - 68905호	‘20. 12. 21.	김용필 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 김동승 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사(건축·기계) 기성대가(4회) 확정통보 ※ 회계과 - 71491호	‘20. 12. 28.	김용필 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 김동승 주무관
○ 삼산면사무소 신축공사 설계변경 의뢰 ※ 회계과 - 3532호	‘21. 1 25.	조계윤 과장 김희영 팀장 오병구 팀장 이아람 주무관
○ 삼산면사무소 신축에 따른 삼산면사무소 임시사용 및 입주계획 ※ 회계과 - 4884호	‘21. 2 1.	권오봉 시장 서은수 부시장 양기원 국장 김용필 국장 조계윤 과장 김희영 팀장 이아람 주무관