정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지자체 ITS 구축 지원 사업
② 추진배경	○ 주요 교차로의 교통량 관리 및 분석 시스템을 구축하여 시간대별, 요일별 최적의 맞춤형 교통신호체계 운영으로 원활한 교통흐름과 안전한 교통환경 제공 ○ 2020년 국토교통부 공모사업 선정
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 2020년 지능형교통체계(ITS) 구축사업 ○ 사 업 비 : 2,500백만원(국비 60%, 지방비 40%) ○ 사업대상 : 여수시 주요구간 47㎞ ○ 사업내용 : 스마트교차로 관리시스템 35개소, 스마트 보행안전 시스템 4개소, 교통신호 분석시스템 1식 등
④ 사업부서	여수시 교통과		⑤ 담당자	방송통신6급 박병록 행정5급 공주식
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘20. 6. ~ ‘21. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 2020년 지자체 ITS 국고보조사업 사업계획서 제출(국토교통부) ※ 교통과-67919호(‘19. 9. 3.)		‘19. 9. 3.	고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 류규청 주무관
○ 국고보조금 교부신청서 제출 ※ 교통과-13400호(‘20. 2. 17.)		‘20. 2. 17.	고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 류규청 주무관
○ ITS 구축사업 추진계획 수립 ※ 교통과-52730호(‘20. 6. 17.)		‘20. 6. 17.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 건설교통국장 고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 류규청 주무관
○ ITS 구축사업 계약의뢰 ※ 교통과-54110호(‘20. 6. 26.) ※ 교통과-65996호(‘20. 7. 24.) ※ 교통과-65997호(‘20. 7. 27.) ※ 교통과-70892호(‘20. 8. 18.)		‘20. 6. 26.	고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 안보현 차장
○ ITS 구축사업 계약체결 - 감리용역 ※ 회계과-54556호(‘20. 9. 29.) - S/W구매, 물품구매 ※ 회계과-54710호(‘20. 10. 5.) ※ 회계과-54775호(‘20. 10. 5.) - 구축사업(협상) ※ 회계과-65319호(‘20. 12. 1.) - 물품추가구매 ※ 회계과-66572호(‘20. 12. 8.)		‘20. 9. 29. ∼ ‘20. 12. 8.	고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 안보현 차장
○ ITS 구축 구매(3건) 납품 - S/W구매, 물품구매 ※ 회계과-70709호(‘20. 12. 24.) ※ 회계과-173호(‘21. 1. 4.) - 물품추가구매 ※ 회계과-71483호(‘20. 12. 28.)		‘20. 12. 24. ∼ ‘21. 1. 4.	고영준 교통과장 최양준 교통정보팀장 안보현 차장
○ ITS 구축사업 계약체결 - 감리용역(변경계약, 증45일) ※ 회계과-12439호(‘21. 3. 17.)		‘20. 10. 6. ∼ ‘21. 6. 17.	공주식 교통과장 최양준 교통정보팀장 박병록 차장
○ ITS 구축사업 계약체결 - 하도급(부분) 계약 (스마트교차로시스템 현장설치 구축) ※ 회계과-11168호(‘21. 3. 11.)		‘21. 2. 1. ∼ ‘21. 5. 24.	공주식 교통과장 최양준 교통정보팀장 박병록 차장
○ ITS 구축사업 준공 - 지능형교통체계 구축사업(175일) ※ 회계과-26932호(‘21. 5. 25.)		‘21. 2. 1. ∼ ‘21. 5. 24.	공주식 교통과장 최양준 교통정보팀장 박병록 차장
○ ITS 구축사업 감리용역 준공 - 지능형교통체계 감리용역(253일) ※ 회계과-32043호(‘21. 6. 17.)		‘20. 10. 6. ∼ ‘21. 6. 17.	공주식 교통과장 최양준 교통정보팀장 박병록 차장