정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성산공원 리모델링 사업
② 추진배경	공원이용 활성화를 위한 수변공간 활용 등 기존 공원 부지를 최대한 활용하여 시민 각계각층의 휴식을 위한 복합공간으로 리모델링하여 시민의 삶의 질 향상과 지역간 균형발전을 도모하고자 함.
③ 사업개요	○ 사업목적 : 성산공원 리모델링 ○ 위 치 : 화장동 949번지(성산공원) ○ 사 업 비 : 6,850백만원 ○ 사업내용 : 공원 리모델링 A=70,845㎡ - 수변공간 활용 시설(데크, 분수 등), 쿨링포그 설치 검토 - 노후 운동시설 및 편의시설 정비, 야외수변무대 설치, 바닥 포장재 교체 - 어린이 놀이시설 반영 및 조경 식재 보완 등
④ 사업부서	여수시 공원과		⑤ 담당자		녹지7급 차범찬 시설7급 김승일 행정5급 김종원
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘20. 6. ~‘22. 10.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진방침 ※ 공원과-2674호		‘19. 3. 12.		문태선 국장 남성채 과장 최석원 팀장 박진석 주무관
○ 성산공원 조성계획변경 및 실시 설계 용역 계약의뢰 ※ 공원과-3406호		‘19. 3. 19.		남성채 과장 최석원 팀장 박진석 주무관
○ 성산공원 조성계획변경 및 실시 설계 용역 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-17674호 ○ 실시설계용역 착수		‘19. 4. 16.		남성채 과장 최석원 팀장 박진석 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 공원과 - 9397호 ※ 공원과 – 11802호 ※ 공원과 - 12594호		‘19. 7. 25. ‘19. 9. 17. ‘19. 10. 2.		조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 기술자문 심의 요청 ※ 공원과 - 1788호		‘20. 2. 10.		조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관

○ 성산공원 리모델링 사업 계약심의위원회 심의 요청 ※ 공원과-5144호	‘20. 4. 10.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 일상감사 요청 ※ 공원과-6741호	‘20. 5. 11.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 계약심사 요청 ※ 공원과-7530호	‘20. 5. 25.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 계약의뢰(긴급) ※ 공원과-7798호	‘20. 5.29.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 폐기물 처리 용역 계약심사 요청 ※ 공원과-7998호	‘20. 6. 2.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 폐기물 처리 용역 계약의뢰(긴급) ※ 공원과-8470호	‘20. 6.10.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 계약체결 ※ 공원과-9343호 ○ 성산공원 리모델링 사업 착수	‘20. 6.26.	조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 폐기물 처리 용역 계약체결 ※ 공원과-10121호 ○ 성산공원 리모델링 사업 폐기물 처리 용역 착수	‘20. 7.10.	서채훈 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 시공 촉구 및 현장대리인 등청 요구 ※ 공원과-12450호	‘20. 8.26.	서채훈 과장 최석원 팀장 조상우 차장
○ 성산공원 리모델링 주차장 추가확보 검토 ※ 공원과-13773호	‘20. 9.20.	서채훈 과장 최석원 팀장 조상우 차장

○ 성산공원 리모델링 사업 하도급 계약 검토 요청 ※ 공원과-16119호	‘20. 11. 4.	서채훈 과장 황인중 팀장 조상우 차장
○ 건설공사의 하도급계약통보 (총괄 1차분-토목+조경) ※ 공원과-16131호	‘20. 11. 4.	서채훈 과장 황인중 팀장 조상우 차장
○ 성산공원 리모델링 사업 실정보고 검토 ○ 성산공원 리모델링 사업 실정보고 승인 통보 ※ 공원과-16550호	‘20. 11.11.	서채훈 과장 황인중 팀장 조상우 차장
○ 성산공원 리모델링 공사 폐기물 처리용역 선금급 지급 결정 통보 ※ 공원과-16570호	‘20. 11.12.	서채훈 과장 황인중 팀장 조상우 차장
○ 성산공원 리모델링 공사(총괄분 및 1차분) 감독공무원 변경 ※ 공원과 - 532호	‘21. 1. 8.	서채훈 과장 황인중 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(총괄분 및 1차분) 현장대리인 변경 검토결과 송부 ※ 공원과 - 1020호	‘21. 1. 25.	서채훈 과장 황인중 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(2차분) 시행 ※ 공원과 - 2424호	‘21. 2. 23.	권오봉 시장 서은수 부시장 신윤옥 국장 서채훈 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 황인중 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(2차분) 계약 의뢰 ※ 공원과 - 2483호	‘21. 2. 24.	서채훈 과장 황인중 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과 - 9467호	‘21. 3. 2.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(총괄 및 1차분) 변경 계약 의뢰 ※ 공원과 - 3572호	‘21. 3. 17.	서채훈 과장 황인중 팀장 정을룡 주무관

○ 성산공원 리모델링 공사(총괄 및 1차분) 설계변경 계약사항 통보 ※ 회계과 - 12818호	‘21. 3. 18.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(총괄 및 1차분) 변경 계약 의뢰 ※ 공원과 - 4084호	‘21. 3. 26.	서채훈 과장 황인중 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(총괄 및 1차분) 설계변경 계약사항 통보 ※ 회계과 - 15117호	‘21. 3. 30.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사(1차분) 검수(검사) 공무원 지정 알림 ※ 회계과 - 27375호	‘21. 5. 26.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사 폐기물처리용역 기간연장 계약사항 알림 ※ 회계과 - 35852호	‘21. 7. 5.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업 관급 자재(탄성포장) 변경 검토보고 ※ 공원과 - 10124호	‘21. 7. 27.	신윤옥 국장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업(2차분) 관급자재(탄성포장) 구매 요청 ※ 공원과 - 10194호	‘21. 7. 28.	김종원 과장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사 폐기물(폐합성수지)처리 용역 계약심사 결과 알림 ※ 회계과 - 40091호	‘21. 7. 29.	조계윤 과장 백현철 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사 폐기물(폐합성수지)처리 용역 계약의뢰 ※ 공원과 - 10276호	‘21. 7. 30.	김종원 과장 위영량 팀장 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링 공사 폐기물(폐합성수지)처리 용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과 - 42005호	‘21. 8. 12.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(2차분)-탄성포장재구입 2단계 경쟁 평가결과 알림 ※ 회계과 – 42453호	‘21. 8. 17.	조계윤 과장 오병구 팀장 김여원 주무관

○ 성산공원 리모델링공사 추진 관련 주민설명회 개최 결보고 ※ 공원과 - 11162호	‘21. 8. 18.	김종원 과장 위영량 팀장 정을룡 주무관 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링사업 관급자재(배수관) 변경 검토보고 ※ 공원과 - 11301호	‘21. 8. 20.	김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 정을룡주무관
○ 성산공원 리모델링사업(2차분) 관급자재(배수관) 구매요청 ※ 공원과 - 11307호	‘21. 8. 20.	김종원 과장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 전기공사 일시정지 검토보고 ※ 공원과 - 11516호	‘21. 8. 24.	신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박 철 차장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링 전기공사 일시정지 통보 ※ 회계과 – 43793호	‘21. 8. 25.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄 및 2차분) 변경 계약 의뢰 ※ 공원과 - 11968호	‘21. 9. 2.	김종원 과장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄 및 2차분) -토목 조경 설계변경 계약사항 통보 ※ 회계과 – 45199호	‘21. 9. 2.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(2차분) 검사(검수) 공무원 지정 알림 ※ 회계과 – 45645호	‘21. 9. 7.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄) 공사기간 연장 검토보고 ※ 공원과 - 12944호	‘21. 9. 24.	신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 차범찬 주무관 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링공사 폐기물처리 용역 기간연장 검토보고 ※ 공원과 - 13044호	‘21. 9. 27.	신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링공사 폐기물처리 용역 기간연장 계약사항 알림 ※ 회계과 – 48430호	‘21. 9. 28.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄분)-토목+조경 기간연장 계약사항 통보	‘21. 9. 29.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 시행 ※ 공원과 – 14093호	‘21.10.16.	권오봉 시장 박현식 부시장 신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 차범찬 주무관 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 계약 체결 의뢰 ※ 공원과 – 14125호	‘21.10.18.	김종원 과장 위영량 팀장 정을룡 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과 – 51941호	‘21.10.20	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 시행 ※ 공원과 – 3011호	‘22.03.02.	권오봉 시장 박현식 부시장 신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 김승일 주무관 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과 – 9814호	‘22.03.04.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 일시정지 검토보고 ※ 공원과 – 3915호	‘22.03.18.	신윤옥 단장 김종원 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 위영량 팀장 김승일 주무관 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 일시정지 통보 ※ 회계과 – 1221호	‘22.03.21.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(토목,조경) 실정보고에 따른 검토보고 ※ 공원과 – 6839호	‘22.05.13.	박현식 부시장 신윤옥 단장 김종원 과장 신숙이 팀장 오병구 팀장 위영량 팀장 김승일 주무관 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링 사업(설계변경) 계약심사 결과 회신 ※ 회계과 – 24768호	‘22.05.24.	조계윤 과장 신숙이 팀장 권지훈 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄,3차분,4차분) 변경 계약 의뢰 ※ 공원과 – 7427호	‘22.05.25.	김종원 과장 위영량 팀장 김승일 주무관 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄,3차분,4차분) 변경계약 사항 통보 ※ 회계과 – 25996호	‘22.05.30.	윤경희 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(3차분) 준공 검사공무원 지정 통보 ※ 회계과 – 26539호	‘22.06.02.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 1회기성준공검사공무원 지정 통보 ※ 회계과 – 30050호	‘22.06.20.	조계윤 과장 오병구 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 1회기성대가 확정 알림 ※ 회계과 – 30784호	‘22.06.23.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 2회기성준공검사공무원 지정 통보 ※ 회계과 – 39199호	‘22.08.12.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 2회기성대가 확정 알림 ※ 회계과 – 40046호	‘22.08.19.	김지선 국장 신숙이 팀장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄 및 4차분) 일시정지 통보 ※ 회계과 – 41733호	‘22.08.30.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄 및 4차분) 변경 계약 의뢰 ※ 공원과 – 14426호	‘22.10.14.	김종원 과장 위영량 팀장 차범찬 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(총괄 및 4차분) 변경계약 사항 통보 ※ 회계과 – 49210호	‘22.10.17.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 성산공원 리모델링사업(4차분) 준공검사 공무원 지정 알림 ※ 회계과 – 51426호	‘22.10.28.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관