[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만흥매립장 주변영향지역 환경상 영향조사 용역(완료)
② 추진배경	만흥매립장 설치ㆍ운영으로 인하여 주변영향지역에 미치는 환경상 영향조사를 실시함으로써, 2001년도 이후 환경영향의 변화 분석 및 주변영향지역의 주민지원사업 기초자료로 활용, 공보 등에 공고·열람하기 위함
③ 사업개요	○ 용 역 명 : 만흥매립장 주변영향지역 환경상 영향조사 용역 ○ 용역기간 : 2019. 7. 9 ~ 2020. 9. 30. ○ 용 역 비 : 284백만원 ○ 용역기관 : 전남대학교 산학협력단 여수산학협력본부 ○ 용역주기 : 3년 ○ 용역내용 - 대기질, 악취, 하천수, 지하수, 소음, 시각경관 등 조사 - 매립시설로 인한 주변지역에 미치는 환경영향 분석 등
④ 사업부서	생활자원사업소		⑤ 담당자	남 정 국
⑥ 선정기준	5천만 원 이상의 연구 용역		⑦ 사업기간	‘19. 7. ~ ‘21. 12.
<그간 주요 추진내용> ○ 환경상 영향조사 용역 계획 수립 : ‘19. 3. ○ 환경상 영향조사 용역 계약 의뢰 : ‘19. 6. ○ 환경상 영향조사 용역 계약 : ‘19. 7. ○ 환경상 영향조사 용역 변경 계약(금액 변경) : ‘19. 9. ○ 환경상 영향조사 용역 변경 계약(기간 연장) : ‘20. 5. ○ 환경상 영향조사 용역 일시정지 : ‘20. 9. 18. ~ - 주변영향지역 주민지원 협의체 미구성에 따른 추진 불가 ○ 환경상 영향조사 용역 일시정지 해제 : ‘21. 12. 21. ○ 환경상 영향조사 용역 완료 : ‘21. 12. 31.
○ 방침 결정(계획 수립) ※ 생활자원사업소-5076(‘19.06.05.)		‘19. 6. 5.	권오봉 시장 고재영 부시장 이정화 환경복지국장 오정환 생활자원사업소장 박중열 관리팀장 강선아 차장
○ 최종보고회 결과보고 ※ 생활자원사업소-11968호(‘20.09.11.)		‘21. 12. 28.	서정신 환경복지국장 심근하 생활자원사업소장 박은희 관리팀장 남정국 주무관