정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	종합 실험·연구동 신축 (완료)2020-39
② 추진배경	◦친환경고품질 먹거리 관심도 상향에 따른 과학영농 지원 시스템 구축 ◦비효율적 시설 운영 및 업무공간 부족 문제점 해결을 위한 통합 실험·연구 전용시설 신축으로 과학영농서비스 유용성 개선 및 확대
③ 사업개요	◦ 기 간 : 2020. 7. ~ 2022. 12. ◦ 소요예산 : 4,158백만원(균특48% 2,000, 시비52% 2,158) ◦ 장 소 : 여수시농업기술센터 내 ◦ 규 모 : 부지 700㎡, 건물연면적 986㎡(건축면적 401㎡, 3층) ◦ 사업내용 : 기존 노후 실험실(이전) 및 신설 연구실 통합을 위한 종합 실험·연구동 신축 및 기존 시설 리모델링 활용
④ 사업부서	미래농업과		⑤ 담당자	미래농업과장 최윤정 주무관 김동영
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	2020. 7. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 종합 실험·연구동 신축 방침결정 ※ 미래농업과-1889호(‘20.02.28.)		‘20.02.28.	권오봉 시 장 서은수 부시장 장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 종합 실험·연구동 신축공사 기본실시설계비 확보 ※ 제1회 추가경정예산 : 158백만원		‘20.06.17.	-
○ 제2차 지방재정계획 심의위원회 (도)투자심사 이행 ※ 전라남도청 예산담당관-6999(‘20.06.25.)		‘20.06.25.	<관련자> 강상구 예산담당관 서회정 재정관리팀장 정문호 지방시설주사
○ 공공건축 사업계획 사전검토 이행 ※ 건축도시공간연구소 건축 연구단(‘20.09.15.)		‘20.09.15.	윤희순 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김대희 지방시설주사 김정현 지방시설서기보

○ 설계공모 일상감사 이행 ※ 감사담당관-7696(‘20.10.08.)	‘20.10.08.	윤희순 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김대희 지방시설주사 김정현 지방시설서기보
○ 공유재산심의회 심의 ※ 회계과-58946(‘20.10.27.)	‘20.10.27.	윤희순 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 공유재산 관리계획 의결(시의회) ※ 기획예산과-20278(‘20.11.19.)	‘20.11.17.	<관련자> 나병곤 기획예산과장 장명 의회법무팀장 최진영 주무관
○ 중기지방재정계획 반영	‘20.11.20.	<관련자> 나병곤 기획예산과장 이강 예산팀장 강지윤 주무관
○ 기본·실시설계 재계약심사 이행 ※ 회계과-66842(‘20.12.08.)	‘20.12.08.	윤희순 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김정현 지방시설서기보
○‘21년도 균특(확정내시, 600백만원) 예산 확정 알림 ※ 전라남도농업기술원 농촌지원과-7800 (‘20.12.22.)	‘20.12.22.	<관련자> 박홍재 농업기술원장 정찬수 기술지원국장 김희열 농촌지원과장 박관수 기획홍보팀장 유정선 주무관
○ 제10회 여수시건축위원회 조건부 의결 이행계획 승인 통보 ※ 허가민원과-140(‘21.01.04.)	‘21.01.04.	<관련자> 박창배 허가민원과장 김인옥 건축행정팀장 신정환 주무관
○ 건축설계공모 공고 ※ 미래농업과-163(‘21.01.06.)	‘21.01.06.	윤희순 미래농업과장 김화순 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 건축설계공모 현장설명회 개최 ※ 미래농업과-535(‘21.01.18.)	‘21.01.15.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김정현 지방시설서기
○ 종합 실험·연구동 신축 방침결정(2차) ※ 미래농업과-1026호(‘21.02.01.)	‘21.02.01.	권오봉 시 장 서은수 부시장 윤혜옥 농업기술센터소장 윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관

○ 건축설계공모 심사위원회 개최 ※ 미래농업과-2498(‘21.03.19.)	‘21.03.19.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 건축설계공모 심사위원회 심사결과 당선작 선정 ※ 미래농업과-2760(‘21.03.29.)	‘21.03.29.	윤혜옥 농업기술센터소장 윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 건축설계 용역계약 의뢰 ※ 미래농업과-2868(‘21.03.31.)	‘21.03.31.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 건축설계 용역계약 체결 ※ 농업정책과-14639(‘21.04.05.)	‘21.04.05.	윤혜옥 농업기술센터소장 이훈기 농업정책과장 강대선 농정팀장 심정은 주무관
○ 건축설계 용역 착수계 접수 ※ 미래농업과-3280(‘21.04.12.)	‘21.04.12.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김대희 공공시설팀장 김주희 주무관
○ 건축설계 용역 착수보고회 개최 ※ 미래농업과-3174(‘21.04.08.)	‘21.04.13.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 김대희 공공시설팀장 김주희 주무관
○ 센터 내 유리온실 철거공사 계약 체결 - 종합 실험·연구동 신축부지 (700㎡)확보 ※ 농업정책과-25649(‘21.06.25.)	‘21.06.25.	이훈기 농업정책과장 강대선 농정팀장 심정은 주무관
○ 건축설계 용역 중간보고회 개최 ※ 미래농업과-6111(‘21.07.13.)	‘21.06.25.	윤희순 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관
○ 종합 실험·연구동 건축설계 용역기간 연장 요청서 접수 ※ 미래농업과-6388(‘21.07.20.)	‘21.07.20.	강승대 주무관 <관련자> 이아람 지방시설서기

○ 종합 실험·연구동 건립공사 시 일상 감사 이행 ※ 미래농업과-8478(‘21.10.05.)	‘21.10.05.	범인숙 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 박민정 주무관
○ 종합 실험·연구동 건립공사 (건축) 도 계약 심사 이행 ※ 전라남도 회계과-49768(‘21.11.03.)	‘21.11.03.	<관련자> 김성훈 회계과장 김재인 계약심사팀장 김태양 주무관 기 권 주무관 김호진 주무관
○ 종합 실험·연구동 건립공사 (전기) 도 계약 심사 이행 ※ 전라남도 회계과-49448(‘21.11.02.)	‘21.11.02.	<관련자> 김성훈 회계과장 김재인 계약심사팀장 김지훈 주무관
○ 종합 실험·연구동 건립공사 시행 ※ 미래농업과-9634(‘21.11.15.)	‘21.11.15.	권오봉 시 장 박현식 부시장 장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 백동선 농정팀장
○ 종합 실험·연구동 건립공사 착공식 개최 ※ 미래농업과-10115(‘21.12.01.)	‘21.12.01.	장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 백동선 농정팀장
○ 종합 실험·연구동 건립공사 사고이월 검토보고 ※ 미래농업과-10760(‘21.12.21.)	‘21.12.21.	박현식 부시장 장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 김치훈 자원개발팀장 강승대 주무관 <관련자> 이동일 기획예산과장 이강 예산팀장 백동선 농정팀장
○ 농업기술센터 종합 실험ㆍ연구동 건립공사(건축ㆍ토목ㆍ기계) 설계변경 검토 보고 ※ 미래농업과-2849(‘22.04.04.)	‘22.04.04.	장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 오정열 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 최두용 주무관 추연준 주무관 기권 공공시설팀장 백동선 농정팀장 윤희순 농업정책과장 김동호 허가민원과장

○ 농업기술센터 종합 실험·연구동 건립공사 (건축·토목·기계) 설계변경(기간연장) 검토 보고 ※ 미래농업과-3203(‘22.04.13.)	‘22.04.13.	장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 오정열 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 최두용 주무관 추연준 주무관 기권 공공시설팀장 백동선 농정팀장 윤희순 농업정책과장 김동호 허가민원과장
○ 농업기술센터 종합 실험·연구동 건립공사 (건축ㆍ토목ㆍ기계) 2차분 시행 ※ 미래농업과-4072(‘22.05.11.)	‘22.05.11.	박현식 부시장 장인호 농업기술센터소장 범인숙 미래농업과장 오정열 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 백동선 농정팀장 윤희순 농업정책과장
○ 농업기술센터 종합 실험ㆍ연구동 건립공사(건축ㆍ토목ㆍ기계) 물가 변동 계약금액 조정 검토 보고 ※ 미래농업과-8161(‘22.10.04.)	‘22.10.04.	박현식 부시장 장인호 농업기술센터소장 최윤정 미래농업과장 전혜란 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 백동선 농정팀장 이훈기 농업정책과장
○ 농업기술센터 종합 실험·연구동 건립공사(전기ㆍ통신) 설계변경 검토 보고 ※ 미래농업과-8310(‘22.10.11.)	‘22.10.11.	장인호 농업기술센터소장 최윤정 미래농업과장 전혜란 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 김아람 주무관 이영곤 주무관 기 권 시설팀장 백동선 농정팀장
○ 농업기술센터 종합 실험ㆍ연구동 건립공사(건축ㆍ토목ㆍ기계)(2차분) 설계변경 검토 보고 ※ 미래농업과-8886(‘22.11.01.)	‘22.11.01.	박현식 부시장 장인호 농업기술센터소장 최윤정 미래농업과장 전혜란 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 최두용 주무관 추연준 주무관 기 권 시설팀장 백동선 농정팀장 김동호 허가민원과장 이훈기 농업정책과장

○ 농업기술센터 종합 실험ㆍ연구동 건립공사(건설폐기물처리 용역) 설계변경 검토 보고 ※ 미래농업과-8875(‘22.10.31.)	‘22.10.31.	최윤정 미래농업과장 전혜란 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 박미리 주무관 기권 공공시설팀장 백동선 농정팀장
○ 농업기술센터 종합 실험ㆍ연구동 건립공사(특수가스라인) 설계변경 검토 보고 ※ 미래농업과-10123(‘22.12.13.)	‘22.12.13.	장인호 농업기술센터소장 최윤정 미래농업과장 전혜란 자원개발팀장 김동영 주무관 <관련자> 추연준 주무관 기권 공공시설팀장 백동선 농정팀장