정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	조ㆍ명연합수군 테마 관광자원 개발사업
② 추진배경	명나라수군 도독 진린장군, 등자룡장군과 조․명연합수군의 항일 전쟁 스토리 등을 활용 이순신대교, 묘도 봉화산 전망공원과의 시너지효과 창출로 관광객 유치에 기여
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 묘도동 2020번지 일원 ○ 사업내용 : 테마공원 조성 A=29,534㎡, 부지매입 17필지 ＊ 조명화합‧체험마당, 화계가든, 기념원, 테크산책로 등 ○ 사 업 비 : 10,831백만 원(국비3,000, 시비 7,831-보상비 2,365포함) - 2020년 2,460백만 원(부지 및 공원조성)
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자		행정5급 신영자 시설6급 구제태 시설7급 안병현
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18.1. ~‘23.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 시행계획 수립 ※ 관광과 –1756호(‘18.1.29.)		`18. 1.29.		주철현 시장 최종선 부시장 김병완 국장 박명윤 과장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 입찰 공고 ※ 관광과 –3624호(‘18.3.5.)		`18. 3. 5.		박명윤 과장 박성식 팀장 김대성 주무관
○ 기본계획수립용역 계약 체결 ※ 회계과 –20626호(‘18.4.26.)		`18. 4.26.		장두한 과장 홍주성 팀장 김영란 주무관
○ 실시설계용역 중간보고회 개최 - 조ㆍ명연합광장, 추모공원, 전망공원, 쉼터조성 등		`18.11.27.		권오봉 시장 고재영 부시장 고재익 국장 김학섭 과장 오병구 팀장 임인수 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 - 전문가 자문 및 행정절차 이행 ※ 관광과 -1971호		`19. 1.17.		박은규 과장 손하진 팀장 김영란 주무관

○「여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 용역」 계약의뢰 ※ 기획예산과-10045	‘19.06.09.	장인호 과장 조인천 팀장 유홍 주무관
○「여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 용역」감독공무원 변경 요청 ※ 기획예산과-12168	‘19.07.08.	나병곤 과장 조인천 팀장 유홍 주무관
○「여수시 지속가능발전목표 세부시행계획 수립 용역」분야별 연구원 활용계획서 송부 ※ 기획예산과-17291(‘19.10. 1)	‘19.10.01.	나병곤 과장 조인천 팀장 유홍 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청 ※ 관광과-22845호	‘19.12. 4.	김학섭 과장 최종춘 팀장 임인수 차장
○ 추진계획 보고 ※ 관광과-259호	‘20. 1. 6.	권오봉 시장 고재영 부시장 김용필 국장 김학섭 과장 나병곤 과장 박은규 과장 최종춘 팀장 오병구 팀장 이 강 팀장 임인수 차장
○ 도시계획시설사업 실시계획 인가에 따른 조치계획서 제출 ※ 관광과-4702호	‘20. 3.12.	정재호 과장 최종춘 팀장 한상근 차장
○ 소규모환경영향평가 협의 ※ 영산강유역환경청 환경평가과-2500호	‘20. 4. 3.	최종인 환경평가과장 송유철 주무관 황상민 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획 인가 알림 ※ 도시계획과-8351호	‘20. 4. 9.	김문환 도시계획과장 서범규 도시계획과장 김용환 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’ 일상감사 요청 ※ 관광과-10059호	‘20. 6.11.	정재호 과장 최종춘 팀장 한상근 차장
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’ 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-4428호	‘20. 6.12.	문승남 과장 김태용 팀장 주원평 차장
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 계약심사 요청 ※ 관광과-11164호	‘20. 6.30.	정재호 과장 최종춘 팀장 한상근 차장

○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 계약심사 결과 알림 ※ 전라남도 회계과-33434호	‘20. 7. 1.	정찬균 국장 박용일 과장 문인기 팀장 정찬준 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(전기)’ 계약심사 요청 ※ 관광과-11613호	‘20. 7. 7.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(전기)’ 계약심사 결과 알림 ※ 전라남도 회계과-34693호	‘20. 7. 9.	박용일 과장 문인기 팀장 강만성 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’ 시행계획 보고 ※ 관광과-13136호	‘20. 7.30.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 계약 의뢰 ※ 관광과-13166호	‘20. 7.30.	정재호 과장 윤대근 팀장 고영란 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’실시설계용역 검사 공무원 지정 알림 ※ 회계과-51235호	‘20. 9.11.	조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 계약 체결 ※ 회계과-52746호	‘20. 9.21.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(전기)’ 계약 의뢰 ※ 관광과-16452호	‘20. 9.21.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(전기)’ 계약 체결 ※ 회계과-58061호	‘20.10.22.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’ 관급자재선정심의위원회 결과 알림 ※ 관광과-18286호	‘20.10.26.	정재호 과장 박영춘 팀장 이부길 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 품질시험계획서 승인 알림 ※ 관광과-18915호	‘20.11. 4.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관

○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 현장대리인 변경 신고사항 검토결과 회신 ※ 관광과-21287호	‘20.12.11.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)’ 설계도서 검토결과 알림 ※ 관광과-21783호	‘20.12.21.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 건설폐기물처리용역’ 계약 의뢰 ※ 관광과-3186호	‘21. 3. 2.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 건설폐기물처리용역’ 계약 체결 ※ 회계과-10699호	‘21. 3. 9.	장명이 팀장 김진욱 팀장 최수지 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (통신)’ 시행 ※ 관광과-6583호	‘21. 4.26.	서은수 부시장 김학섭 국장 정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (통신)’ 계약의뢰 ※ 관광과-7406호	‘21. 5. 3.	정재호 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (통신)’ 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 회계과-26399호	‘21. 5.21.	김미옥 팀장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목+조경)’ 기성대가 확정 통보 ※ 회계과-31631호	‘21. 6.16.	김용필 국장 장명이 팀장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’ 실정보고(2020-2-2) 변경 승인 알림 ※ 관광과-13585호	‘21. 8.25.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 공중화장실 신축 기본 및 실시설계용역’계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-45266호	‘21. 9. 3.	조계윤 과장 김진욱 팀장 최수지 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’ 실정보고에 따른 검토 보고 알림 ※ 관광과-16564호	‘21.10.16.	권오봉 시장 박현식 부시장 김학섭 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관

○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’ 설계변경 계약 사항 통보 ※ 회계과-51943호	‘21.10.20.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’2회 기성검사공무원 지정 통보 ※ 회계과-51943호	‘21.11. 5.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’기성대가(2회) 확정 통보 ※ 회계과-55594호	‘21.11.10.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’물가변동에 의한 계약금액 조정 검토 결과 안내 ※ 회계과-58529호	‘21.11.26.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목,조경)’구조물 설계에 대한 의견 제출 요청 ※ 회계과-21429호	‘21.12.22.	박형열 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목,조경) 관급자재(디자인형 울타리) 구매 요청 ※ 관광과-1250호	`22.1.21.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목,조경) 관급자재(목재데크) 구매 요청 ※ 관광과-1251호	`22.1.21.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 관급자재」2단계 경쟁 평가결과 알림 ※ 회계과-2759호	`22.2.15.	조계윤 과장 오병구 팀장 김여원 주무관
○ 조명연합수군 테마 관광자원개발사업 실정보고내용(자연석쌓기 등) 검토보고 ※ 관광과-4323호	`22.3.11.	박현식 부시장 나병곤 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관

○ 조명연합수군 테마 관광자원개발사업' 실정보고내용(패널식옹벽 등) 검토 보고 ※ 관광과-5590호	`22.3.30.	권오봉 시장 박현식 부시장 나병곤 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작·설치」협상에 의한 계약 타당성 검토 요청 ※ 관광과-6081호	`22.4.8.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 협상에 의한 계약의 타당성 검토 결과 통보(조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작·설치) ※ 회계과-18942호	`22.4.21.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 외 1건 사업계획 변경 승인신청 보완 제출 ※ 관광과-7038호	`22.4.25.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 협상에 의한 타당성 검토 및 일상감사 요청(조명연합수군 테마관광자원 상징조형물) ※ 관광과-7092호	`22.4.25.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작·설치 일상감사 회신 ※ 감사담당관-3600호	`22.4.26.	이충현 과장 정진희 팀장 정회주 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치 발주 계획 보고 ※ 관광과-7344호	`22.4.28.	박현식 부시장 나병곤 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치 제안서 평가위원 구성 및 운영계획 ※ 관광과-7540호	`22.5.2.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관

○ 조명연합수군 테마관광자원개발 상징조형물 제작설치 제안서 평가위원(후보자) 공개모집 공고 ※ 관광과-7573호	`22.5.2.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 문화관광자원개발(조명연합수군 테마관광 외1) 사업계획 변경 승인 알림 ※ 전남도 관광과-7573호	`22.5.3.	박용학 과장 권장주 팀장 김동윤 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신) 관급자재(CCTV) 구매 요청 ※ 관광과-8202호	`22.5.11.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신) 관급자재(방송설비) 구매 요청 ※ 관광과-8201호	`22.5.11.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작·설치 기술제안서 제출 공고 ※ 관광과-8408호	`22.5.16.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경) 관급자재(그림타일) 구매 요청 ※ 관광과-8687호	`22.5.18.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치' 제안서 예비평가위원 선정 결과 보고 ※ 관광과-10208호	`22.6.13.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신) 관급자재(공공와이파이) 구매 요청 ※ 관광과-10486호	`22.6.15.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관

○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치' 기술제안서 정량적평가 결과 보고 ※ 관광과-10699호	`22.6.20.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치' 기술제안서 평가위원 선정 결과보고 ※ 관광과-10693호	`22.6.20.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원 상징조형물 제작설치'제안서 평가위원회 일정변경 및 재추진계획 ※ 관광과-11222호	`22.6.27.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원 상징조형물 제작설치'제안서 예비평가위원 재선정 결과 보고 ※ 관광과-11267호	`22.6.27.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 여수 조명연합수군 테마관광자원개발사업 설계변경 계약심사 결과 알림 ※ 전남도 회계과-30098호	`22.6.27.	이길용 과장 김재인 팀장 이광열 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목,조경)」변경(2회) 계약의뢰	`22.6.30.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업(전기)’ 표준시설부담금(가로등) 집행 ※ 관광과-11670	`22.7.1.	박형열 과장 정상기 주무관
○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업(전기)’ 표준시설부담금(화장실 등) 집행 ※ 관광과-11671	`22.7.1.	박형열 과장 정상기 주무관

○ - 조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치 - 기술제안서 평가위원회 개최 결과 보고 ※ 관광과-12295	`22.7.11.	나병곤 국장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치」협상결과 알림 ※ 관광과-13181	`22.7.22.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치」협상 완료에 따른 계약 의뢰 ※ 관광과-13377	`22.7.26.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작 설치」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-38435	`22.8.5.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업」공사 일시정지 검토 보고 ※ 관광과-15344	`22.8.24.	나병곤 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 박형열 과장 조정선 팀장 정상기 주무관
○ 「조명연합수군 테마 관광자원개발사업(토목,조경)」 일시정지 통보 ※ 회계과-41088	`22.8.26.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마 관광자원개발사업(전기)」일시정지 통보 ※ 회계과-41086	`22.8.26.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마 관광자원개발사업(통신)」일시정지 통보 ※ 회계과-41085	`22.8.26.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작 설치」선금급 지급 결정 통보 ※ 회계과-44229	`22.9.16.	김지선 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 추진에 따른 자료 제공 요청 ※ 관광과-17622	`22.9.23.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목,조경) 관급자재(이동식화장실 등) 구매 요청 ※ 관광과-17882	`22.9.27.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 2022년 균특회계 관광자원개발(지방이양) 보조금 교부 신청(조명연합수군 테마관광자원) ※ 관광과-19569	`22.10.20.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치」디자인 변경 확인 건 회신 ※ 관광과-19569	`22.11.7.	이범송 팀장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경) 관급자재(파고라 등 13종) 구매 요청 ※ 관광과-19569	`22.11.16.	이범송 팀장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치」자문위원 의견에 따른 동상 자세변경 건 회신 ※ 관광과-22460	`22.11.23.	이범송 팀장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 도시계획시설(공원)사업 실시계획(변경)인가 고시 알림(조명연합수군 테마공원) ※ 도시계획과-26321	`22.12.5.	김문환 과장 임기형 팀장 정동현 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 공중화장실 신축」관련 공용건축물 건축협의 요청 ※ 관광과-24335	`22.12.20.	이범송 팀장 조정선 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)」하도급 변경계약 검토결과 회신 ※ 관광과-24985	`22.12.28.	박형열 과장 조정선 팀장 정상기 차장
○ '조명연합수군 테마관광자원개발사업 상징조형물 제작설치' 기간연장 요청 ※ 관광과-1634	`23.2.3.	나경숙 팀장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 폐기물처리용역」일시정지 해제 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-6536	`23.2.21.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 폐기물처리용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-7053	`23.2.23.	봉영권 팀장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 『조명연합수군 테마관광자원 개발사업 상징조형물 제작·설치』준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-11453	`23.3.22.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업」실정보고 검토요청 ※ 회계과-11908	`23.3.24.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 상징조형물 제작 설치」지연배상금 부과 알림 ※ 회계과-12694	`23.3.29.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업」공사기간 연장 요청에 따른 검토 보고 ※ 관광과-6150	`23.4.3.	정재호 국장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목, 조경)’공사기간 연장 요청 ※ 관광과-6231	`23.4.4.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조·명연합수군 테마관광자원 개발사업’실정보고내용(조경석 쌓기 및 미끄럼방지포장 등) 검토보고 ※ 관광과-6933	`23.4.4.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 박형열 담당관 서은주 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목 조경)」변경계약 사항 통보 ※ 회계과-14558	`23.4.6.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ ‘조·명연합수군 테마관광자원 개발사업 건설폐기물처리용역’용역 기간연장 검토 보고 ※ 관광과-6662	`23.4.7.	신영자 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조·명연합수군 테마관광자원개발사업 폐기물처리용역’기간연장 요쳥 ※ 관광과-6679	`23.4.7.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 폐기물처리용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-15082	`23.4.10.	한진숙 과장 최철웅 팀장 박윤희 주무관

○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)」하도급 변경계약 검토 요청 ※ 회계과-15078	`23.4.10.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원 개발사업 (토목, 조경) - 하도급 변경계약 적정성 검토 보고 ※ 관광과-7109	`23.4.13.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목, 조경)」하도급 변경계약 검토결과 회신 ※ 관광과-7149	`23.4.13.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업(전기)」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-16084	`23.4.14.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ ‘조명연합수군 테마관광자원 개발사업’설계변경(3회) 계약심사 의뢰 ※ 관광과-8122	`23.4.26.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 여수 조명연합수군 테마관광자원 개발사업 설계변경 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-22617	`23.5.1.	이천영 과장 김광호 팀장 이광열 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목,조경)」변경(3회) 계약의뢰 ※ 관광과-8700	`23.5.3.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)」변경계약 사항 통보 ※ 회계과-21334	`23.5.12.	이동일 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업」공사기간 연장 요청에 따른 검토 보고 ※ 관광과-10055	`23.5.22.	정재호 국장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조명연합수군 테마관광자원개발사업 건설폐기물처리용역’용역 기간연장 검토 보고 ※ 관광과-10049	`23.5.22.	신영자 과장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조명연합수군 테마 관광자원개발사업(토목, 조경)’공사기간 연장 요청 ※ 관광과-10086	`23.5.22.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ ‘조명연합수군 테마관광자원개발사업폐기물처리용역’기간연장 요청 ※ 관광과-10085	`23.5.22.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」하도급 변경계약 검토 요청 ※ 회계과-23491	`23.5.23.	한진숙 과장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마 관광자원개발사업(통신)」공사 포기 각서 제출에 따른 검토 요청 ※ 회계과-23502	`23.5.23.	한진숙 과장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원 개발사업 폐기물처리용역」변경계약 체결 알림 ※ 회계과-23512	`23.5.23.	한진숙 과장 봉영권 팀장 최철웅 팀장 박윤희 주무관
○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업(토목+조경)」변경계약 사항 통보 ※ 회계과-23917	`23.5.25.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업 물가변동(2회) 검토 용역」시행 ※ 관광과-10901	`23.6.1.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조·명연합수군 테마관광자원 개발사업」5회 기성 검사공무원 지정 통보 ※ 회계과-24791	`23.6.1.	한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」하도급 변경계약 검토 요청 ※ 회계과-25641	`23.6.4.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마 관광자원개발사업(토목+조경)」기성대가(5회) 확정 통보 ※ 회계과-25712	`23.6.4.	이동일 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김순미 주무관
○ -조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)- 하도급 변경계약(5회, 6회) 적정성 검토 보고 ※ 관광과-11235	`23.6.7.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)」 하도급 변경계약(5회, 6회) 검토결과 회신 ※ 관광과-11296	`23.6.7.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)」 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 보고 ※ 관광과-11964	`23.6.15.	정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」 물가변동에 의한 계약금액 조정(2회) 검토결과 제출 ※ 관광과-12166	`23.6.17.	신영자 과장 구제태 팀장 정상기 차장

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업」 공사 일시정지 검토 보고 ※ 관광과-12877	`23.6.26.	정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 나경숙 팀장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)」 공사 일시정지 요청 ※ 관광과-12899	`23.6.27.	나경숙 팀장 구제태 팀장 정상기 차장
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목, 조경)」일시정지 통보 ※ 회계과-31256	`23.6.27.	한광민 국장 이동일 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김순미 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업폐기물처리용역」준공검사 공무원 지정 알림 ※ 회계과-34643	`23.7.12.	한진숙 과장 최철웅 팀장 정서인 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업폐기물처리용역」준공검사원 송부 ※ 관광과-14634	`23.7.18.	구제태 팀장 안병현 주무관
○ 조명연합수군 테마 관광자원개발사업 통신공사 계약 해지 검토보고 ※ 관광과-16335	`23.8.9.	정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신)」계약 해지 요청 ※ 관광과-16374	`23.8.9.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업 (토목+조경)」설계변경(4회) 검토보고 ※ 관광과-21721	`23.10.18.	정기명 시장 김종기 부시장 정재호 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신)」계약해지 알림 ※ 회계과-58951	`23.11.24.	한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업」설계변경(4회) 계약심사 요청 ※ 관광과-24419	`23.11.30.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 조명연합수군 테마관광자원개발사업 설계변경 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-60923	`23.12.4.	이천영 과장 김광호 팀장 정동완 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 관광과-24913	`23.12.6.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 도시계획시설(공원)사업 실시계획인가 변경 신청(조명연합수군 테마공원) ※ 관광과-25025	`23.12.7.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업-토목+조경」일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-62752	`23.12.11.	한광민 국장 한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신)」기성검사원 송부 ※ 관광과-25250	`23.12.11.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업-토목+조경」하도급 변경계약 검토요청 ※ 회계과-63724	`23.12.14.	한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관

○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(통신)」타절준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-64091	`23.12.15.	한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」하도급 변경계약 적정성 검토보고 ※ 관광과-25821	`23.12.18.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업 공원 및 데크등 정비공사」 시행 ※ 관광과-25985	`23.12.19.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」준공계 송부 ※ 관광과-26112	`23.12.20.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관
○ 여수 도시계획시설(공원)사업 실시계획(변경)인가 알림(조명연합수군 테마공원) ※ 도시계획과-30621	`23.12.21.	이영호 과장 임기형 팀장 정동현 주무관
○ 「조명연합수군 테마관광자원개발사업(토목+조경)」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-67153	`23.12.26.	한진숙 과장 최철웅 팀장 이정란 주무관
○ 준공검사조서 송부[조명연합수군 테마 관광자원개발사업(토목+조경) 등 2건] ※ 관광과-26440	`23.12.26.	신영자 과장 구제태 팀장 안병현 주무관