중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	GS사택정문 앞 ~ 소호요트장 도로확장
② 추진배경	소호동 동동다리를 찾는 관광객 증가로 GS사택 정문 앞~소호 요트장 교통량이 증가하여 차로확장으로 병목현상 해소
③ 사업개요	○ 위 치 : 소호동 384번지 일원 ○ 사 업 량 : L=445m, B=25m→31.5m ○ 사 업 비 : 3,300백만원 (공사 1,358 보상 등 1,1942)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설6급 유재영 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘19. 1. ~‘20. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 집행계획 ※ 도로과-30호		‘19. 1. 2.		김기채 국장 박은규 회계과장 문태선 과장 장지문 계약1팀장 최홍식 팀장 마동현 주무관
○ 실시설계용역 계약심사 ※ 도로과-44호, 회계과-507		‘19. 1. 3.		박은규 회계과장 문태선 과장 김정아 계약심사팀장 최홍식 팀장 한상근 주무관 마동현 주무관
○ 부동산종합공부 전산 자료 제공요청 ※ 도로과-2025호		‘19. 2.19.		서유권 과장 이영호 팀장 마동현 주무관
○ 실시설계용역 준공		‘19. 5.16.		서유권 과장 이영호 팀장 마동현 주무관
○ 실시계획인가 통보 ※ 도로과-11534호		‘19.9.18.		김기채 국장 장세길 과장 서유권 과장 김문환 팀장 이영호 팀장 하인대 주무관 마동현 차장

○ 분할측량 의뢰 ※ 도로과-11581호	‘19. 9.18.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 등록사항 정정에 따른 토지이동 신청서 제출 ※ 도로과-12822	‘19.10.16.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 손실보상비 산정 및 집행계획 ※ 도로과-14889호	‘19.12. 3.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 마동현 차장 이영호 팀장 이덕연 팀장 한성민 실무원
○ 시행계획 ※ 도로과-1294호	‘20.1.29.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이덕연 팀장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 손실보상협의 완료보고 ※ 도로과-1645호	‘20.2.10.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 낙찰자 결정 통보 ※ 회계과-13273호	‘20.3.11.	서유권 과장 유재영 차장
○ 착수계(GS사택정문 앞 ~ 소호요트장 도로 확포장 공사 폐기물처리용역) ※ 도로과-3777	‘20.3.18.	서유권 과장 유재영 차장
○ 착수계(GS사택정문 앞 ~ 소호요트장 도로확포장공사) ※ 도로과-3778	‘20.3.18.	서유권 과장 유재영 차장
○ 가로등 설치공사 계약의뢰 ※ 도로과-4088호	‘20.3.23.	서유권 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 2차분 계약의뢰 ※ 도로과-8231	‘20.6.22.	이영호 팀장 유재영 차장
○ 2차분 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 도로과-8445 ※ 회계과-37640	‘20.6.25.	양기원 국장 김학섭 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 조민아 차장
○ 전체분, 1차분, 2차분 변경계약 의뢰 ※ 도로과-9060	‘20.7.7.	강 균 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ GIS DB 구축 용역 계약의뢰 ※ 도로과-9332	‘20.7.13.	강 균 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ (1차분) 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-9543	‘20.7.17.	강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 김동승 주무관
○ 총괄 및 2차분 변경계약 사항 통보 ※ 도로과-13761	‘20.10.27.	김용필 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 강 균 과장 유재영 차장 김동승 주무관
○ 폐기물 처리용역 변경계약 사항 통보 ※ 도로과-13778	‘20.10.27.	조계윤 과장 손하진 팀장 강 균 과장 유재영 차장 심미연 주무관
○ 준공계(GS사택 정문 앞~소호요트장 도로 확장공사) ※ 도로과-15458	‘20.12.07.	강 균 과장 유재영 차장
○ GS사택 정문 앞~소호요트장 도로 확장공사 시설물 인계·인수 요청 ※ 도로과-15989	‘20.12.17	강 균 과장 이영호 팀장 유재영 차장