정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
② 추진배경	돌산대교 차량 상습정체 해소방안으로 돌산 백초~거북선대교를 연결하는 진․출입로 개설로 교통소통 원활 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 돌산읍 백초마을 일원 ○ 사 업 량 : L = 425m, B = 5.25 ∼ 9.5m ○ 사 업 비 : 6,020백만원 (보상 1,373 / 공사 4,089 / 기타 558)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 김현철 시설5급 심근하
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘19. 1. ~‘25. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 집행 계획 ※ 도로과-31호		‘19.1.2.		고재영 부시장 김기채 국장 박은규 회계과장 문태선 과장 장지문 계약1팀장 최홍식 팀장 마동현 주무관
○ 계약심사 요청 ※ 도로과-38호		‘19. 1. 2.		문태선 과장 최홍식 팀장 마동현 주무관
○ 일상감사 요청 ※ 도로과-50호		‘19. 1.2.		문태선 과장 최홍식 팀장 마동현 주무관
○ 착수보고 결과보고 ※ 도로과-3178호		‘19.3.14.		서유권 과장 이영호 팀장 박성 주무관
○ 중간보고 개최 계획 ※ 도로과-9688호		‘19.8.6.		김기채 국장 서유권 과장 이영호 팀장 박성 주무관
○ 소규모 환경영향평가용역 착수 ※ 도로과-11399호		‘19.9.16.		서유권 과장 이영호 팀장 박성 주무관

○ 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 도로과-12577호	‘19.10.11.	서유권 과장 이영호 팀장 박성 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 신청 ※ 도로과-12667호	‘19.10.14.	서유권 과장 이영호 팀장 박성 주무관
○ 소규모 환경영향평가 일시정지 의뢰 ※ 도로과-14920호	‘19.12. 3.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 소규모 환경영향평가 용역 재대행 승인 검토 ※ 도로과-15115호	‘19.12. 9.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 요청 ※ 도로과-2265호	‘20.2.20.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 주민설명회 개최 결과보고 ※ 도로과-4426	‘20.3.31.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 특허공법 선정위원회 개최 결과보고 ※ 도로과-11028	‘20.8.20.	강균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 특허 사용협약 체결 요청 ※ 도로과-12348	‘20.9.21.	강균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-12357	‘20.9.22.	강균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 소규모환경영향평가 용역 준공계 ※ 도로과-12567	‘20.9.25.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획인가 신청 ※ 도로과-13240	‘20.10.14.	강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 착수계(돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사 소규모재해영향평가 용역) ※ 도로과-14502	‘20.11.13.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 「돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사」 최종 소규모재해영향평가서 제출 ※ 도로과-16243	‘20.12.23.	강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 「돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사 소규모 재해영향 평가」 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 도로과-966	‘21.1.25.	강 균 과장 황보호 주무관
○ 준공계「돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설공사 소규모 재해영향평가 용역」 ※ 도로과-1107	‘21.1.27.	강 균 과장 황보호 주무관
○ 여수도시계획시설사업 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 알림(백초~거북선대교) ※ 도로과-3414	‘21.3.22.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원 황보호 주무관
○도시계획시설(도로)사업인정에 관한 의견청취 결과 제출(돌산읍 백초~거북선 대교) ※ 도로과-4544	‘21.4.14.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원 황보호 주무관
○「돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 공사」일상감사 조치결과 제출 ※ 도로과-6961	‘21.6.9.	강 균 과장 김정남 팀장 황보호 주무관
○준공계(돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설 실시설계용역) ※ 도로과-7601	‘21.6.24.	강 균 과장 황보호 주무관
○보상계획 열람공고(돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사) ※ 도로과-10378	‘21.8.27.	강 균 과장 김정아 팀장 문태영 주무관 장문희 실무원
○보상계획 열람공고(돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사) ※ 도로과-10378	‘21.8.27.	강 균 과장 김정아 팀장 문태영 주무관 장문희 실무원
○돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-11245	‘21.9.16.	강 균 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 편입토지(지장물 등) 손실보상비 집행 계획 ※ 도로과-12896	‘21.11.3.	권오봉 시장 박현식 부시장 임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 김정아 팀장 김정남 팀장 문태영 주무관 장문희 실무원
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림(백초~거북선대교 진·출입로 개설공사) ※ 도로과-1994	‘22.2.21.	문태영 주무관
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 수용재결에 따른 보상협의 및 공탁안내 ※ 도로과-5288	‘22.5.12.	오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 편입 국유지 보상협의 요청 ※ 도로과-6917	‘22.6.21.	오정환 과장 김정아 팀장 문태영 주무관 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 편입토지에대한 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-8154	‘22.7.21.	오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 이의신청 사업자 의견조회 ※ 도로과-8407, 중토위사무국-25065	‘22.7.28.	장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 이의신청 사업자 의견회신 ※ 도로과-8848	‘22.8.8.	장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 손실보상 보상비 집행 ※ 도로과-12108, 12191	‘22.10.4.	문인기 국장 오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 등기수수료, 공탁 집행 ※ 도로과-12377, 13057, 13634	‘22.12.1.	오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 이의재결서 정본 공시송달 ※ 도로과-13869	‘22.12.7.	오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 돌산읍 백초~거북선대교 진,출입로 개설공사 재결서 공시송달 결과제출 ※ 도로과-14650	‘22.12.26.	오정환 과장 김정아 팀장 장문희 실무원
○ 기술자문위원회 자문대상사업 제출 ※ 도로과-225	‘23. 1. 19.	오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 시공단계 건설사업관리계획 수립 및 제출 ※ 도로과-2196	‘23. 3. 2.	오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 여수시 기술자문위원 확인서 제출 ※ 도로과-3969	‘23. 4. 11.	오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청 ※ 도로과-4170, 감사담당관-4871	‘23. 4.14.	오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-5231	‘23. 5.10.	정웅정 과장 이재태 팀장 오차영 주무관
○ 사업시행계획보고 ※ 도로과-5979	‘23. 6. 5.	정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 계약 의뢰 ※ 도로과-6003	‘23. 6. 5.	오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 낙찰자 결정 통보 ※ 회계과-31398	‘23. 6.28.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-32907	‘23. 7. 4.	한광민 국장 봉영권 팀장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 1차분 선금 지급 통보 ※ 회계과-33634	‘23. 7. 7.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 현장대리인 변경 검토 보고 및 알림 ※ 도로과-8588, 8594	‘23. 8. 2.	윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 건설재해예방 지도기술용역 시행 및 계약 ※ 도로과-10084, 10095	‘23. 9. 7.	심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 사토분 사용 수요 조사 ※ 도로과-10084, 10095	‘23. 9.12.	심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 현장실정 보고 내용검토 및 승인 ※ 도로과-10372, 10377	‘23. 9.14.	심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 건설재해예방 지도기술용역 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-45781	‘23. 9.15.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김수현 주무관
○ 사토분 사용 검토 및 알림 ※ 도로과-11202, 11225	‘23.10.11.	심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 신청(백초~거북선대교 진·출입로 개설공사) ※ 도로과-11998	‘23.10.31.	심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림(백초~거북선대교 진·출입로 개설공사) ※ 도시계획과-30625	‘23.12.21.	이영호 과장 임기형 팀장 정동현 주무관