정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장
② 추진배경	통학생 및 주민 통행불편 해소를 위하여 기존도로 확장
③ 사업개요	○ 위 치 : 서교동 487번지 일원 ○ 사 업 량 : L=81m, B=8m ○ 사 업 비 : 860백만원(공사 380, 보상 및 기타 480)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 조영문 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 1. ~‵23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과-1185호		‵19. 1. 21.		서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-2961호		‵19. 3. 19.		서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 신청 ※ 도로과-6147호		‵19. 5. 17.		서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가 ※ 도로과-15629호		‵19. 12. 18.		서유권 과장 이재태 팀장 하인대 주무관 김준현 주무관
○ 지적분할측량 의뢰 ※ 도로과-15746호		‵19. 12. 20		서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 실시설계용역 준공계 ※ 도로과-6014호		‵20. 5. 6.		서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 도로확장공사 계약심사 요청 ※ 도로과-7628호		‵20. 6. 9.		서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 도로확장공사(폐기물처리) 계약의뢰 ※ 도로과-8394호		‵20. 6. 24.		서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 도로확장공사(폐기물처리) 착수계 ※ 도로과-9790호		‵20. 7. 20.		서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 도로확장공사(폐기물처리) 일시정지 요청 ※ 도로과-10670호		‵20. 8. 11.		김희신 팀장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 국가지정문화재 보존 관련 행위 허가 신청 ※ 도로과-10754호		‵20. 8. 13.		김희신 팀장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 폐기물 처리용역 일시정지 ※ 도로과-11048호		‵20. 8. 21.		김희신 팀장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 지적 분할 측량 의뢰 ※ 도로과-14505호		‵20. 11. 13.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 편입토지 등에 대한 손실보상협의 요청 ※ 도로과-14557호		‵20. 11. 13.		강 균 과장 김희신 팀장 배 경 주무관
○ 편입토지(물건) 등 소유권이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-16222호		‵20. 12. 23.		강 균 과장 김희신 팀장 배 경 주무관
○ 도시계획시설(도로)실시계획 (변경)인가 신청 ※ 도로과-1376호		‵21. 2. 2.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 편입토지(주택 등)에 대한 손실보상액 집행 ※ 도로과-2728호		‵21. 3. 8.		임광건 국장 조계윤 관장 오병구 팀장 강 균 과장 김희신 팀장 배 경 주무관
○ 2021년 제3회 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 도로과-5016호		‵21. 4. 26.		임광건 국장 강 균 과장 김희신 팀장 배 경 주무관
○ 문화재 현상변경 변경허가 신청 ※ 도로과-7822호		‵21. 6. 29.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 문화재 현상변경 변경허가 ※ 도로과-8137호		‵21. 7. 6.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 가로등 설치공사 착공 ※ 도로과-14208호		‵21. 12. 7.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 석면폐기물 처리 용역 착수 ※ 도로과-14495호		‵21. 12. 14.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 문화재 시굴조사용역 착수 ※ 도로과-14614호		‵21. 12. 16.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 준공 ※ 도로과-798호		‵22. 1. 20.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 준공 ※ 도로과-1673호		‵22. 2. 14.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지적 경계복원측량 의뢰 ※ 도로과-2447호		‵22. 3. 3.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 문화재 시굴조사용역 준공 ※ 도로과-2638호		‵22. 3. 9.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 가로등 설치공사 착공 ※ 도로과-2853호		‵22. 3. 15.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 착수 ※ 도로과-5615호		‵22. 5. 19.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 가로등 설치공사 일시정지 해지 요청 ※ 도로과-6732호		‵22. 6. 16.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 「전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 공사」외 1건 일시정지 요청 ※ 도로과-7928호		‵22. 7. 18.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 가로등 설치공사 준공계 ※ 도로과-8816호		‵22. 8. 8.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지하매설물 CCTV 조사 용역 시행 ※ 도로과-9466호		‵22. 8. 25.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 일시정지 요청 ※ 도로과-10066호		‵22. 9. 8.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 설계변경 및 일시정지 해지 검토보고 ※ 도로과-10692호		‵22. 9. 23.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-10714호		‵22. 9. 26.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 폐기물처리용역 준공계 ※ 도로과-11316호		‵22. 10. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 「전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장 공사」준공계 ※ 도로과-11360호		‵22. 10. 11.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○국가지정 문화재 현상변경 완료 신고서 제출 ※ 도로과-12887호		‵22. 11. 15.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 도시계획시설(도로)실시계획 (변경)인가 신청 ※ 도로과-13864호		‵22. 12. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 도시계획시설(도로)실시계획 (변경)인가 알림 ※ 도시계획과-27110호, 도로과-14099호		‵22. 12. 13.		조태익 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 일시정지 해지 검토 보고 ※ 도로과-710호		‵23. 1. 17.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이광재 팀장 조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2144호, 도로과-868호		‵23. 1. 25.		조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 제출 ※ 도로과-896호		‵23. 1. 26.		오정환 과장 이광재 팀장 조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 준공계 ※ 도로과-976호		‵23. 1. 27.		조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB구축용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-2957호, 도로과-1059호		‵23. 1. 30.		조영문 주무관
○ 폐기물처분부담금 납부 ※ 도로과-2592호		‵23. 3. 10.		오정환 과장 이광재 팀장 조영문 주무관