정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설
② 추진배경	○ 농촌지역 마을간 접근성 제고를 통한 영농편익 기여 ○ 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편익 제공 및 생활환경 개선도모
③ 사업개요	○ 사업위치 : 여수시 화양면 나진리 40-1번지 일원 ○ 사 업 량 : L= 1,225m, B= 8.0m ○ 사 업 비 : 6,900백만 원
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 안준희 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 1. ~ ‵27. 7.
<그간 주요 추진내용>
○ 공사 실시설계용역 집행계획 및 계약 ※ 도로과-315호(’19.1.8.) ※ 도로과-416호(’19.1.9.) ※ 회계과-5607호(’19. 2. 12.)		‵19. 1. 8. (2. 12.)		양기원 국장 김기채 국장 서유권 과장 박은규 과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 황규석 차장
○ 소규모환경영향평가, 사전재해영향 평가 용역 시행 및 계약 ※ 도로과-1810호(’19.2.13.), 1965호(’19.2.18.) ※ 회계과-10317호(’19.3.11.)		‵19. 3. 8.		김기채 국장 서유권 과장 배도선 팀장 황규석 차장 박은규 과장 손하진 계약1팀장 박희진 주무관
○ 실시설계용역 등 일시정지 ※ 도로과-8232호(’19.7.2.), 8264호(’19.7.3.) ※ 회계과-34161호(’19.7.4.), 34319호(’19.7.4.)		‵19. 7. 3.		양기원 국장 박은규 과장 손하진 계약1팀장 김성욱 주무관 박희진 주무관 김기채 국장 서유권 과장 배도선 팀장 황규석 차장
○ 감독공무원 변경 ※ 도로과-8443호(’19.7.8.), 9136호(’19.7.24.) ※ 회계과-35477호(’19.7.10.), 38265호(’19.7.26.)		‵19. 7. 10. ‵19. 7. 26.		박은규 과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관 박희진 주무관 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 교차로 도로연결 시 주행안전을 위한 기술자문 의뢰 ※ 도로과-13474호(’19.11.1.)		‵19. 11. 1.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 노선선정 검토보고 ※ 도로과-15295호(’19.12.11.)		‵19. 12. 11.		권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-15545호(’19.12.17.)		‵19. 12. 19.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 노선재선정 검토보고 ※ 도로과-2294(‘20.02.21)		‵20. 2. 21.		권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 현황측량 의뢰 ※ 도로과-2378호		‵20. 2. 24.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 소규모환경영향평가 용역 재대행 승인 검토보고 ※ 도로과-8550호		‵20. 6. 26.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 소규모환경영향평가 재대행계약 검토결과 제출 ※ 도로과-8661호		‵20. 6. 30.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 부동산종합공부 전산자료 요청 ※ 도로과-9499호		‵20. 7. 16.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 상·하수도 전산자료(관망도) 요청 ※ 도로과-10999호		‵20. 8. 20.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 도로과-15566호		‵20. 12. 8.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소하천 심의 대상사업 검토 요청 ※ 도로과-1570호		‵21. 2. 5.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 요청 ※ 도로과-1601호		‵21. 2. 7.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 재해영향평가 검토 협의 ※ 도로과-1974호		‵21. 2. 17.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소하천 심의 요청 ※ 도로과-2146호		‵21. 2. 22.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소하천 심의의견 조치계획서 제출 ※ 도로과-3331호		‵21. 3. 19.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 기수갈고둥 정밀조사 용역 시행 ※ 도로과-4452호		‵21. 4. 13.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소규모재해영향평가 협의 완료 ※ 도로과-5189호		‵21. 4. 29.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 사전재해영향성검토용역 준공 ※ 도로과-6018호		‵21. 5. 18.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 기수갈고둥 정밀조사용역 준공 ※ 도로과-7643호		‵21. 6. 25.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소규모환경영향평가서 보완자료 제출 ※ 도로과-8134호		‵21. 7. 6.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 소규모환경영향평가서 협의기간 연장 알림 ※ 도로과-8212호		‵21. 7. 8.		강 균 과장 전명수 팀장 황보호 주무관
○ 소규모환경영향평가서 재보완 요청 ※ 도로과-9069호		‵21. 7. 26.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 포획 및 방사 허가신청 ※ 도로과-14713호		‵21. 12. 17.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 멸종위기 야생생물 허가신청 관련 보완 제출 ※ 도로과-439호		‵22. 1. 13.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 농어촌도로 노선지정을 위한 인허가 협의 ※ 도로과-1818호		‵22. 2. 16.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 농어촌도로 노선지정을 위한 농지전용 협의 요청 ※ 도로과-2030호		‵22. 2. 21.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 소규모 환경영향평가서(재보안) 협의 ※ 도로과-2153호		‵22. 2. 23.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기술자문위원회 대상사업 검토 요청 ※ 도로과-2468호		‵22. 3. 3.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 도로의 노선지전 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-2642호		‵22. 3. 9.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 농어촌도로 노선지정을 위한 협의 요청 ※ 도로과-2909호		‵22. 3. 15.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 농어촌도로 노선지정 협의 회신 ※ 도로과-3055호		‵22. 3. 18.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 소규모환경영향평가용역 준공 ※ 도로과-5159호		‵22. 5. 10.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 이주 및 모니터링 용역 시행 계획 보고 ※ 도로과-9423호		‵22. 8. 24.		문인기 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 이주 및 모니터링 용역 계약심사 요청 ※ 도로과-9428호		‵22. 8. 25.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 이주 및 모니터링 용역 착수계 ※ 도로과-10601호		‵22. 9. 22.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 이주 및 모니터링 용역 선금 지급 결정 통보 ※ 도로과-10698호		‵22. 9. 23.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 포획 및 방사 허가신청서 제출 ※ 도로과-111762호		‵22. 10. 19.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-11994호		‵22. 10. 26.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기수갈고둥 포획 및 방사 계획서 보완 제출 ※ 도로과-12701호		‵22. 11. 10.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 감정평가 수수료 지급 ※ 도로과-13636호		‵22. 12. 1.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 토지보상비 납부 이행 협조 요청 ※ 도로과-2829호		‵23. 3. 16.		오정환 과장 이광재 팀장 최영민 주무관
○ 기본계획 변경 수립에 따른 협의 ※ 건설과-5198호, 도로과-3643호		‵23. 4. 4.		최영민 주무관
○ 사전 컨설팅감사 요청 ※ 도로과-4101호		‵23. 4. 13.		김정아 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 법률자문 요청 ※ 도로과-4812호		‵23. 5. 2.		오정환 과장 박상진 팀장 백영화 차장 최영민 주무관
○ 기본계획 수립(변경) 고시 알림 ※ 건설과-7904호, 도로과-5186호		‵23. 5. 12.		최영민 주무관
○ 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 추진을 위한 법률 자문 요청 ※ 도로과-6009호		‵23. 6. 2.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 여수시의회 의원 자료제출 요구사항 제출 ※ 도로과-6507호		‵23. 6. 16.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 선금모증서 갱신을 위한 준공예정일 안내 ※ 도로과-8713호		‵23. 8. 4.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 농어촌도로 개설 추진을 위한 법률자문 요청 ※ 도로과-8961호		‵23. 8. 9.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 농어촌도로 개설공사 추진 관련 질의에 대한 회신 ※ 도로과-9137호		‵23. 8. 16.		최영민 주무관
○ 분재조합 토지보상비 재협의 요청관련 검토보고 ※ 도로과-10146호		‵23. 9. 8.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 토지보상비 재협의 요청에 대한 회신 ※ 도로과-10176호		‵23. 9. 11.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 마을정비구역 지정(변경) 고시일 변경 안내 ※ 건설과-17121호		‵23. 9. 19.		최영민 주무관
○ 민원 처리결과 안내 (분재마을 농어촌도로 보상비 재협의) ※ 도로과-11492호		‵23. 10. 18.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 분재조합 토지보상 협약서 체결계획 ※ 도로과-14310호		‵23. 12. 18.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 심근하 과장 김정아 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 토지보상 협약서 및 보상비 납부 이행 협조 요청(분재마을 정비조합장) ※ 도로과-1213호		‵24. 1. 29.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 협약에 따른 보상비 납부 안내 (분재마을 정비조합장) ※ 도로과-1461호		‵24. 2. 2.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 기수갈고둥 모니터링 결과 제출(1차년도) ※ 도로과-2231호		‵24. 2. 22.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-3821호		‵24. 3. 28.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 관급자재 선정 심의 요청 ※ 도로과-6738호		‵24. 6. 3.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 보상협의 요청(최종) ※ 도로과-7799호		‵24. 6. 26.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○「화양 분재 신규마을 조성사업」시행계획 수립(변경)을 위한 협의 회신 ※ 도로과-7853호		‵24. 6. 27.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 설계안전성검토 용역 시행 보고 ※ 도로과-3072호		‵24. 9. 25.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」실정보고에 대한 검토보고 ※ 도로과-4466호		‵24. 10. 28.		이동일 국장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 명호남 과장 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」변경계약 의리 ※ 도로과-4502호		‵24. 11. 1.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 설계안전 검토보고서 검토 수수료 납부 ※ 도로과-5050호		‵24. 11. 19.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ [이월품의]화양면 나진~분재마을 농어촌도로 실시설계용역 ※ 도로과-5300호		‵24. 11. 26.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 농어촌도로 노선지정 (변경)인가 협의 (화양면 나진~분재마을) ※ 도로과-5511호		‵24. 11. 29.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 농어촌도로 노선지정 (변경)인가 협의 자료보완 회신(화양면 나진~분재마을) ※ 도로과-6019호		‵24. 12. 13.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 농어촌도로 노선지정 (변경)인가 협의 신청서보완제출(화양면나진~분재마을) ※ 도로과-6249호		‵24. 12. 19.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 도로의 노선지정(변경)에 관한 공고「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 ※ 도로과-6262호		‵24. 12. 20.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 도로의 노선지정(변경)공고 게재 의뢰「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 ※ 도로과-6266호		‵24. 12. 20.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○ 도로의 노선지정(변경)에 관한 공고 알림「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 ※ 도로과-6267호		‵24. 12. 20.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 백두산 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 설계안전성검토 용역」완료계 제출 ※ 도로과-188호		‵25. 1. 7.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 설계안전성검토 용역」준공검사조서 제출 ※ 도로과-427호		‵25. 1. 13.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 설계안전성검토 용역」[이월품의] ※ 도로과-547호		‵25. 1. 15.		박성식 과장 전결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」실정보고에 따른 일시정지 검토보고 ※ 도로과-977호		‵25. 1. 24.		최연호 국장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」일시정지 요청 ※ 도로과-992호		‵25. 1. 31.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」편입 토지 등 손실보상비 집행 ※ 도로과-1510호		‵25. 2. 13.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 정진희 팀장 박시영 실무원
○ 화양면 나진~분재마을 농어촌도로개설공사 편입 토지에 대한 소유권이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-1592호		‵25. 2. 17.		박성식 과장 전결 정진희 팀장 박시영 실무원
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」일시정지 요청 ※ 도로과-992호		‵25. 1. 31.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」총사업비 변경 및 추진계획 보고 ※ 도로과-2810호		‵25. 3. 18.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 최연호 국장 신영자 과장 신숙이 팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청(화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사) ※ 도로과-3338호		‵25. 4. 1.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청(화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 건설폐기물 처리용역) ※ 도로과-3339호		‵25. 4. 1.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」일상감사 의견 조치결과 회신 ※ 도로과-3896호		‵25. 4. 14.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사 건설폐기물처리용역」일상감사 의견 조치결과 회신 ※ 도로과-3897호		‵25. 4. 14.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」공사 시행계획(총괄 및 1차분) ※ 도로과-6196호		‵25. 6. 11.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 최연호 국장 김종필 과장 정일권 팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 폐기물 처리용역」 (총괄 및 1차분) 계약의뢰 ※ 도로과-6323호		‵25. 6. 17.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 임목폐기물 처리용역」 (총괄 및 1차분) 계약의뢰 ※ 도로과-6324호		‵25. 6. 17.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」(총괄 및 1차분) 계약의뢰 ※ 도로과-6325호		‵25. 6. 17.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」실정보고에 따른 일시정지 해지 검토보고 ※ 도로과-6698호		‵25. 6. 23.		최연호 국장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 박성식 과장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」일시정지 해지 요청 ※ 도로과-6734호		‵25. 6. 25.		박성식 과장 결재 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」[이월품의] ※ 도로과-6813호		‵25. 6. 26.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」완료계 제출 ※ 도로과-6816호		‵25. 6. 26.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 실시설계용역」준공검사조서 제출 ※ 도로과-6854호		‵25. 6. 27.		정진희 팀장 대결 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 건설재해예방 기술지도 용역」시행 ※ 도로과-7021호		‵25. 7. 1.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 건설재해예방 기술지도 용역」계약의뢰 ※ 도로과-7022호		‵25. 7. 1.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 곽 원 팀장 안준희 주무관
○ 착수계 제출「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 폐기물 처리용역(총괄 및 1차분)」 ※ 도로과-7728호		‵25. 7. 17.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 착수계 제출「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 건설재해예방 기술지도 용역」 ※ 도로과-7788호		‵25. 7. 17.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 착수계 제출「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 임목폐기물 처리용역(총괄 및 1차분)」 ※ 도로과-7789호		‵25. 7. 17.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 착공계 제출「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설(총괄 및 1차분)」 ※ 도로과-7790호		‵25. 7. 17.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 도로노선 지정(변경) 및 사업인정에 관한 주민등의 의견 청취 공고(화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설) ※ 도로과-7828호		‵25. 7. 18.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 도로노선 지정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 게재 의뢰「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 ※ 도로과-7840호		‵25. 7. 18.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 도로노선 지정(변경) 및 사업인정에 관한 주민등의 의견 청취 공고 알림「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 ※ 도로과-7841호		‵25. 7. 18.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 지장물(한전주) 이설 요청 ※ 도로과-10089호		‵25. 9. 17.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설」 지장물(통신주) 이설 요청 ※ 도로과-10090호		‵25. 9. 17.		박성식 과장 전결 서주용 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 도시관리계획 결정(변경) 용역」시행 검토보고 ※ 도로과-10496호		‵25. 9. 26.		박성식 과장 전결 김종필 과장 정일권 팀장 서주용 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설 도시관리계획 결정(변경) 용역」계약의뢰 ※ 도로과-10517호		‵25. 9. 29.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○ 부동산종합공부 전산자료 요청(화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설) ※ 도로과-11076호		‵25. 10. 20.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 안준희 주무관
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」편입 토지 등 손실보상비 집행(김O태) ※ 도로과-11263호		‵25. 10. 24.		박성식 과장 전결 엄정직 팀장 정일권 팀장 김은희 팀장 박시영 실무원
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」편입 토지 손실보상비 집행(김O주) ※ 도로과-11264호		‵25. 10. 24.		박성식 과장 전결 엄정직 팀장 정일권 팀장 김은희 팀장 박시영 실무원
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」편입 토지 등 손실보상비 집행(김O숙) ※ 도로과-11266호		‵25. 10. 24.		박성식 과장 전결 엄정직 팀장 정일권 팀장 김은희 팀장 박시영 실무원
○「화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설공사」편입토지에 대한 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-11267호		‵25. 10. 24.		박성식 과장 전결 김은희 팀장 박시영 실무원