정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도서식수원 개발사업(17개 지구)/완료
② 추진배경	○ 도서지역 지하수 고갈, 염분유입 등 열악한 식수상황 개선 필요 ○ 도서지역 정주여건 개선을 위해 지방상수도 공급 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 도서지역 일원(남면 소횡간도 등) (17개 도서) ○ 사업비 : 14,342백만 원 ○ 사업규모 : 해수담수화시설, 관정개발, 관로매설 등 ○ 사업기간 :‘19. 1. ~ ’21. 2.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설8급 임영수 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘19.1. ~ ’21. 2.
<그간 주요 추진내용>
○ 2019년도 도서지역 식수원 개발사업 예산안 편성 관련 자료 제출 ※ 상수도과-15126 ○ 실시설계용역 일상감사 요청 ※ 상수도과-19188 ○ 실시설계용역 계약심사 의뢰 ※ 상수도과-20023		‘18. 8.22. ‘18.10.29. ‘18.11.12.		하헌옥 과장 이영호 팀장 김강혁 주무관
○ 실시설계용역 추진계획(안) ※ 상수도과-20579		‘18.11.20.		권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 단장 하헌옥 과장 이영호 팀장 김강혁 주무관
○ 실시설계용역 시행 ※ 상수도과-63		‘19. 1. 2.		정종태 단장 하헌옥 과장 이영호 팀장 김강혁 주무관
○ 실시설계용역 낙찰자결정 알림 ※ 수도행정과-497		‘19. 1.22.		강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 사업계획 변경 검토 보고 ※ 상수도과-7110		‘19. 4.16.		권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 총사업비 변경 신청 ※ 상수도과-8245		‘19. 5. 2.		강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 건설사업관리용역 추진 검토보고 ※ 상수도과-10628		‘19. 6.10.		권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 통합건설사업관리용역 일상감사 요청 ※ 상수도과-12226		‘19. 7. 4.		강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 실시설계용역 변경 검토 보고 ※ 상수도과-12425		‘19. 7. 8.		김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 김강혁 주무관
○ 실시설계용역 변경계약 체결의뢰 ※ 상수도과-12800		‘19. 7.11.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역 계약심사 요청 ※ 상수도과-12799		‘19. 7.11.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「송도 도서지역 식수원 개발사업」 계약의뢰 ※ 상수도과-15548		‘19. 8.20.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 검토 보고 ※ 상수도과-17007		‘19. 9.11.		김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 ※ 수도행정과-7128		‘19. 9.12.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「송도 도서지역 식수원 개발사업」 계약체결 ※ 수도행정과-7209		‘19. 9.16.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「송도 도서지역 식수원 개발사업」 착공 ※ 상수도과-17470		‘19. 9.20.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「대횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 시행 ※ 상수도과-18336		‘19.10. 2.		고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「대횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 계약심사 요청 ※ 상수도과-18429		‘19.10. 4.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 화정면 도서지역(조발,둔병,낭도, 적금마을)식수원 개발(지방상수도) 사업 집행계획 ※ 상수도과-18344		‘19.10. 4.		권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○「금죽도 도서지역 식수원 개발사업」 계약의뢰 ※ 상수도과-19256		‘19.10.17.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「대횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 계약의뢰 ※ 상수도과-19520		‘19.10.21.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「둔병도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」계약심사 요청 ※ 상수도과-19560		‘19.10.22.		강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 화정면 도서지역(조발, 낭도, 적금도) 식수원개발(지방상수도)사업 공사 및 폐기물 계약심사 요청 ※ 상수도과-19897		‘19.10.28.		강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○「상화도 도서지역 식수원 개발사업」 시행 및 계약심사 요청 ※ 상수도과-19995, 20018		‘19.10.29.		고재영 부시장 김정남 단장 명호남 팀장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 도서지역 식수원 개발사업 사업 계획 변경 보완 제출 ※ 상수도과-20210		‘19.11. 1.		차용석 팀장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 여수시 도서지역 식수원 개발사업에 따른 행정재산 사용협의 요청 ※ 상수도과-20454		‘19.11. 5.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 추도 도서지역 식수원 개발사업 시행 ※ 상수도과-20685		‘19.11. 8.		김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 도서지역 식수원 개발사업 집행계획 ※ 상수도과-21293		‘19.11.11.		권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「둔병도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」계약 체결 의뢰(긴급) ※ 상수도과-20867		‘19.11.12.		강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 낭도,적금,조발 도서지역 식수원 개발 (지방상수도)사업 계약 체결 의뢰(긴급) ※ 상수도과-21211, 21212, 21213		‘19.10.22.		강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○「금죽도 도서지역 식수원 개발사업」 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-9082		‘19.11.18.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」 등 총4건 일상감사 요청 ※ 상수도과-21397, 21398, 21402, 21403		‘19.11.19.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「광도 도서지역 식수원 개발사업」 계약심사 요청 ※ 상수도과-21741		‘19.11.20.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역」계약심사 요청 ※ 상수도과-21484		‘19.11.20.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업 통합건설사업관리용역」계약의뢰 ※ 상수도과-21786		‘19.11.26.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」외 3건 일상감사 조치결과 및 조정내역서 제출 ※ 상수도과-21994		‘19.11.28.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 도서지역 식수원 개발사업 (해수담수화시설) 집행계획 ※ 상수도과-22361		‘19.11.28.		권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역」외 1건 계약심사 요청 ※ 상수도과-22271		‘19.12. 2.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「대횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 계약체결 및 감독 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-9649		‘19.12. 4.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○ 동도 도서지역 식수원 개발사업 외 3건 계약심사 요청(여수시) ※ 상수도과-22558		‘19.12. 4.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「상화도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 계약체결 및 감독 공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-9652		‘19.12. 4.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○ 2019년 여수시 도서지역 식수원 개발사업 변경 승인 알림 ※ 영산강유역환경청 상수원관리과-3014		‘19.12. 6.		이야문 과장 서지민 주무관
○「둔병도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 정정 알림 ※ 수도행정과-9716		‘19.12. 6.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○「송도 도서지역 식수원 개발사업」일시정지 검토 보고 ※ 상수도과-22890		‘19.12. 9.		김정남 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「적금도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-9798		‘19.12. 9.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○「송도 도서지역 식수원 개발사업」 여과기 설치 재검토 요청 ※ 상수도과-23030		‘19.12.11.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」 외 2건 계약의뢰 ※ 상수도과-23060		‘19.12.11.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「서도 도서지역 식수원 개발사업」 외 2건 계약의뢰 ※ 상수도과-23059		‘19.12.11.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「도서지역 식수원 개발사업 해수담수화 시설 제작설치」일상감사 요청 ※ 상수도과-23240, 23235, 23236		‘19.12.13.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 계약심사 요청 ※ 상수도과-23324		‘19.12.13.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업」 계약심사 요청 ※ 상수도과-23328		‘19.12.13.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「조발도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-9959		‘19.12.13.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○ 국가지정문화재 현상변경 허가 알림 (추도, 낭도 도서지역 식수원 개발) ※ 문화예술과-27211		‘19.12.16.		김지선 과장 윤영희 팀장 신아름 주무관
○「대두라도 도서지역 식수원 개발사업」 외 2건 계약의뢰 ※ 상수도과-23459		‘19.12.16.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「낭도 도서지역 식수원 개발(지방상수도) 사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-10224		‘19.12.20.		백동선 팀장 김희경 팀장 박난실 차장
○ 상화도 도서지역 식수원 개발사업 일시 정지 검토 보고 ※ 상수도과-24083		‘19.12.23.		김동석 과장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 여수시 도서지역 식수원 개발사업 실시 설계 용역 일시정지 해지 검토 보고 ※ 상수도과-24084		‘19.12.23.		김동석 과장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역」계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-10531		‘19.12.31.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○「광도 도서지역 식수원 개발사업」외 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-10532		‘19.12.31.		김동석 과장 김희경 팀장 박난실 차장
○ 수항도 도서지역 식수원 개발사업 외 2건 계약의뢰 ※ 상수도과-261		‘20. 1. 6.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 개도 도서지역 식수원 개발사업 외 5건 계약의뢰 ※ 상수도과-605		‘20. 1.10.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 소횡간도 도서지역 식수원 개발사업 외 4건 계약의뢰 ※ 상수도과-633		‘20. 1.10.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업 실시 설계 용역」준공검사공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-627		‘20. 1.21.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○ 송도 도서지역 식수원 개발사업 일시정지 해지 및 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-1468		‘20. 1.21.		정윤수 단장 강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○ 금죽도 도서지역 식수원 개발사업 실정보고에 따른 설계변경 및 공사기간 연장 검토 보고 ※ 상수도과-2559		‘20. 2. 6.		정윤수 단장 강 균 과장 전명수 팀장 노명훈 주무관
○ 여수시 도서지역 식수원 개발사업 매장문화재 관련 전문가 검토의견 제출 ※ 상수도과-2511		‘20. 2. 6.		강 균 과장 편우평 팀장 노명훈 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-1667		‘20. 2.21.		백동선 팀장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「서도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-1694		‘20. 2.24.		백동선 팀장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-1735		‘20. 2.24.		백동선 팀장 김희경 팀장 오민주 주무관
○ 대횡간도 도서지역 식수원 개발사업 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-4101		‘20. 2.28.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-1995		‘20. 2.28.		김동석 과장 백동선 팀장 오민주 주무관
○「대두라도 도서지역 식수원 개발사업」 외 1건 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-2070		‘20. 3. 2.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업」 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-2140		‘20. 3. 3.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○ 금죽도 도서지역 식수원 개발사업 전기공사 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-5308		‘20. 3.16.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」일상 감사 요청 ※ 상수도과-5466		‘20. 3.18.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「대운두도 도서지역 식수원 개발사업」 외 4건 계약의뢰 ※ 상수도과-5472		‘20. 3.18.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업 건축 공사」계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-2844		‘20. 3.19.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업 전기 공사」계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-2845		‘20. 3.19.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업 전기공사」계약체결 및 공사관리관 통보 ※ 수도행정과-3083		‘20. 3.25.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역」계약체결 및 공사관리관 통보 ※ 수도행정과-3086		‘20. 3.25.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업 건축공사」계약체결 및 공사관리관 통보 ※ 수도행정과-3301		‘20. 3.30.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「둔병도 도서지역 식수원 개발사업」 실정보고내용 검토보고 ※ 상수도과-6605		‘20. 4. 2.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업」실정보고내용 검토보고 ※ 상수도과-6724		‘20. 4. 3.		서은수 부시장 정윤수 단장 강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업 전기 공사」계약체결 및 공사관리관 지정 통보 ※ 수도행정과-3520		‘20. 4. 3.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「둔병도 도서지역 식수원 개발사업 및 폐기물처리용역」변경 계약의뢰 ※ 상수도과-6748		‘20. 4. 6.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업 및 폐기물처리용역」변경 계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-6746		‘20. 4. 6.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「상화도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-6968		‘20. 4. 7.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업」외 2건 현장 실정보고에 따른 일시정지 검토 보고 ※ 상수도과-7011		‘20. 4. 8.		정윤수 단장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업(변경) 계약심사 요청 ※ 상수도과-7040		‘20. 4. 8.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업」외 2건 일시정지 요청 ※ 상수도과-7050		‘20. 4. 9.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「대운두도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 계약체결 및 공사관리관 지정 통보 ※ 수도행정과-3842		‘20. 4.13.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」집행 계획 ※ 상수도과-7629		‘20. 4.17.		권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」현장 대리인 변경 요청에 따른 자격 검토 보고 ※ 상수도과-7688		‘20. 4.20.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」 계약 심사 요청(여수시) ※ 상수도과-7687		‘20. 4.20.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 외 3건 현장 실정보고에 따른 일시정지 검토 보고 ※ 상수도과-7870		‘20. 4.21.		정윤수 단장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역」계약심사 요청 ※ 상수도과-7786		‘20. 4.20.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」현장 대리인 변경 검토 요청 회신 ※ 상수도과-7801		‘20. 4.20.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 외 3건 일시정지 요청 ※ 상수도과-7899		‘20. 4.21.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」계약 심사 자료 보완 제출(여수시) ※ 상수도과-7915		‘20. 4.21.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○ 도서지역 식수원 개발사업에 따른 다도해해상국립공원내 행위허가 협의 요청(여수시) ※ 상수도과-7954		‘20. 4.22.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업 및 폐기물처리용역」변경 계약의뢰 ※ 상수도과-8119		‘20. 4.24.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「대운두도 도서지역 식수원 개발사업 전기 공사」계약체결 및 공사관리관 지정 통보 ※ 수도행정과-4314		‘20. 4.24.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」외 2건 계약의뢰 ※ 상수도과-8567		‘20. 5. 1.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「광도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-8570		‘20. 5. 1.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업」공사 일시정지 검토보고 ※ 상수도과-8571		‘20. 5. 1.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「광도 도서지역 식수원 개발사업」변경 계약 요청 ※ 상수도과-8573		‘20. 5. 1.		강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업」공사 일시 정지 요청 ※ 상수도과-8572		‘20. 5. 1.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「개도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 현장 실정보고에 따른 일시정지 검토 보고 ※ 상수도과-9295		‘20. 5.13.		정윤수 단장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 일시정지 요청 ※ 상수도과-9315		‘20. 5.13.		명호남 팀장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「낭도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고내용 검토보고 ※ 상수도과-9790		‘20. 5.20.		정윤수 단장 강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「조발도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고내용 검토보고 ※ 상수도과-9969		‘20. 5.25.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업」공사 일시정지 해제 검토보고 ※ 상수도과-10483		‘20. 6. 1.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「적금도 도서지역 식수원 개발사업」공사 일시 정지 해제 요청 ※ 상수도과-10546		‘20. 6. 1.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「조발도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고 내용 검토보고 ※ 상수도과-10820		‘20. 6. 4.		정윤수 단장 강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「조발도 도서지역 식수원 개발사업 및 폐기물처리용역」변경 시행 ※ 상수도과-11144		‘20. 6.10.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「조발도 도서지역 식수원 개발사업 및 폐기물처리용역」변경 계약의뢰 ※ 상수도과-11147		‘20. 6.10.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「낭도 도서지역 식수원 개발사업」 실정 보고(2차) 내용 검토 보고 ※ 상수도과-11324		‘20. 6.11.		강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○「도서지역 식수원 개발사업(17개 지구) 예산(시설비) 변경 사용 검토 보고」 ※ 상수도과-11324		‘20. 6.22.		김동석 과장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업 통합 건설사업관리 용역」제1회 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-6688		‘20. 6.23.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「서도 도서지역 식수원 개발사업」제1회 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-6709		‘20. 6.23.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「대두라도 도서지역 식수원 개발사업」 제1회 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-6698		‘20. 6.23.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」제1회 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-6774		‘20. 6.24.		김동석 과장 김희경 팀장 오민주 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업」통합 건설사업관리용역 과업기간 연장 및 과업 변경 검토 보고 ※ 상수도과-12461		‘20. 6.29.		서은수 부시장 김동석 과장 강 균 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「서도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 및 공기연장 검토 보고 ※ 상수도과-16210		‘20. 8.21.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 공사기간 연장 검토 보고 ※ 상수도과-16748		‘20. 8.28.		정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업」 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-17020		‘20. 9. 1.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「대운두도 도서지역 식수원 개발사업」 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-17692		‘20. 9.10.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「대두라도 도서지역 식수원 개발사업」 일시정지 해지 및 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-18094		‘20. 9.16.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「개도 도서지역 식수원 개발사업」 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-18519		‘20. 9.22.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「여수시 도서지역 식수원 개발사업 통합 건설사업관리 용역」제2회 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-10399		‘20. 9.23.		김동석 과장 김희경 팀장 박희진 주무관
○「제도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-20760		‘20.10.27.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-20547		‘20.10.23.		권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「서도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경(2차) 검토 보고 ※ 상수도과-21183		‘20.11. 2.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○ 국가지정(등록)문화재 현상변경 허가신청(추도) ※ 상수도과-21277		‘20.11. 4.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「추도 도서지역 식수원 개발사업」시행 ※ 상수도과-21482		‘20.11. 6.		정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「추도 도서지역 식수원 개발사업」계약 의뢰 ※ 상수도과-21670		‘20.11. 9.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「동도 도서지역 식수원 개발사업 폐기물 처리용역」설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-22486		‘20.11.20.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「소횡간도 도서지역 식수원 개발사업 건축공사」실정보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-22651		‘20.11.23.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업」 추진에 따른 다도해해상국립공원내 행위 허가(변경) 협의 요청 ※ 상수도과-23892		‘20.12. 9.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「추도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-24572		‘20.12.18.		오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「추도 도서지역 식수원 개발사업」외 1건 준공검사공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-14247		‘20.12.28.		김동석 과장 김희경 팀장 박희진 주무관
○「수항도 도서지역 식수원 개발사업」실정 보고에 따른 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-25350		‘20.12.29.		서은수 부시장 정윤수 단장 오정환 과장 구제태 팀장 노명훈 주무관
○「수항도 도서지역 식수원개발사업」 준공검사공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-909		‘21. 1.27.		이돈주 과장 송향자 팀장 박희진 주무관