정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	오천산단 재생사업
② 추진배경	준공 된지 41년이 경과한 오천산단 환경개선사업으로 산단과 인근 주변을 창의·혁신적인 공간 전환
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 망양로 477 일원(오천산업단지) ○ 사 업 비 : 18,650백만원 ○ 사업내용 : 오천산단 인프라개선 및 환경개선 (산단도로 확포장, 주차장 조성, 소공원 및 녹지조성) ○ 사업기간 :‘18. 1. ~‘26. 12.
④ 사업부서	여수시 산업지원과		⑤ 담당자		행정5급 조계완 행정6급 박혜경 시설8급 김평순
⑥ 선정기준	10억 이상 사업		⑦ 사업기간		‘18. 1. ~‘26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 여수오천산단 재생 및 재생 시행계획 수립용역 계획(안) ※ 산단지원과-10465호		‘17. 9. 15.		주철현 시장 최종선 부시장 최인규 국장 서태민 과장 서재풍 팀장 양승재 주무관
○ 여수오천산단 재생사업 지구 지정 및 재생시행계획 추진 (일상감사, 계약 등) ※ 산단지원과-3262호		‘18. 4. 17.		주철현 시장 최종선 부시장 성동범 국장 서태민 과장 김기언 팀장 양승재 주무관
○ 여수오천산단 재생사업 지구 지정 및 재생시행계획 용역사 선정 (착수보고회 개최) ※ 산단지원과-5667호		‘18. 7. 13.		고재영 부시장 성동범 국장 서태민 과장 김기언 팀장 양승재 주무관
○ 여수오천산단 재생사업 제영향 평가용역 선정 및 착수 ※ 산단지원과-131,455호		‘19. 1. 21. ‘19. 1. 10.		성동범 국장 서태민 과장 김기언 팀장 최동구 주무관
○ 여수오천산단 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 용역 중지 ※ 산단지원과-7039호 ○ 여수오천산단 재생사업 제영향평가 용역 중지 ※ 회계과-8806호		‘19. 8. 19. ‘19. 10. 15.		성동범 국장 박형렬 과장 이범송 팀장 최동구 주무관

○ 노후산단 재정비 지원사업 재정집행 점검회의 참석(국토교통부) ○ 환경영향평가협의회 구성을 위한 전남 도청 협의 ○ 총사업비 조정을 위한 국토부 사전협의	‘20. 7. 24. ‘20. 10. 23. ‘20. 10. 20.	김태완 과장 김용우 팀장 김종학 주무관
○ 총사업비 조정요구서 제출(국토교통부) ※ 산업지원과-11401호 ○ 총사업비 조정 결과 알림(국토교통부) ※ 국토교통부 산업입지정책과-4628호	‘20. 11. 26. ‘20. 12. 3.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구 재생계획 및 시행계획 승인신청(안) 방침 결정 및 승인신청 ※ 산업지원과-12823호	‘20. 12. 30.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구계획 승인신청에 따른 환경영향평가서(초안) 협의 요청 ※ 산업지원과-409호	‘21. 1. 11.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구계획 및 환경영향평가 등 공람 공고 ※ 산업지원과-484호, 여수시 공고 제2021-126호	‘21. 1. 14.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구계획 및 환경영향평가 등 합동설명회 개최 ※ 산업지원과-1090호	‘21. 1. 26.	김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구계획 승인신청에 따른 관계기관 협의(국토부, 전남도, 여수시 등) ※ 산업지원과-2799, 1963호 등	‘21. 1. 15. ~‘21. 3. 12	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 추진일정 보고회 개최 ※ 산업지원과-3846호	‘21. 3. 24.	김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 오천산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획 수립 용역 외 1건 설계변경 검토보고 ※ 산업지원과-4530호	‘21. 4. 26.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 재생시행계획에 대한 관계기관 추가 협의 요청 ※ 산업지원과-5427호	‘21. 5. 18.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 재생사업지구계획 승인신청에 따른 환경영향평가서(본안) 협의 요청 ※ 산업지원과-6067호	‘21. 6. 3.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 국비사업 타당성 검증(국토연구원) ※ 산업지원과-7133호	‘21. 6. 18.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 신기술·특허공법 선정위원회 개최 ※ 산업지원과-7142호	‘21. 6. 29.	김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수오천일반산업단지 재생사업 환경영향평가 용역 실정보고(2차)에 따른 설계변경 검토보고 ※ 산업지원과-7995호	‘21. 7. 25.	박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 타당성 검증 결과보고서 제출 ※ 산업지원과-9327호	‘21. 8. 30.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 신기술·특허공법 선정위원회(2차) 개최 ※ 산업지원과-9931호	‘21. 9. 13.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 환경영향평가서(본안) 보완 협의요청 ※ 산업지원과-9818호	‘21. 9. 9.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 환경영향평가에 따른 사업지구 내 비점오염원 저감대책 검토 ※ 산업지원과-11612호 ※ 영산강청 재보완 요구(‘21. 9. 28.)에 따른 검토	‘21. 10. 29.	박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 환경영향평가서(본안) 재보완 협의 요청 ※ 산업지원과-11620호	‘21. 10. 29.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천산업단지 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 수립 용역」 실정보고에 따른 일시정지 검토보고 ※ 산업지원과-10493호	‘21. 10. 1.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업」 사업인정을 위한 의견청취 처리계획(변경) ※ 산업지원과-10780호	‘21. 10. 8.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 2021년도 제6회 기술자문위원회 심의 요청(여수 오천일반산업단지 재생사업) ※ 산업지원과-11290호	‘21. 10. 21.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획」에 대한 관계기관 협의 요청(추가 협의) ※ 산업지원과-11293호	‘21. 10. 21.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업」토지보상업무 전문기관 위탁 추진 검토보고 ※ 산업지원과-11676호	‘21. 11. 1.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 오천일반산업단지 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 변경(안) 보고 ※ 산업지원과-12876호	‘21. 11. 30.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 오천일반산업단지 재생사업 지구지정 및 재생시행계획 심의* 신청 ※ 산업지원과-12877호 * 전라남도 지방산업단지계획 심의	‘21. 11. 30.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업 교통영향평가 용역」외 1건* 일시정지 해지 검토보고 ※ 산업지원과-13196호 * 동 사업 환경영향평가 용역	‘21. 12. 7.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수오천일반산업단지 재생사업 환경영향평가 용역」변경계약 의뢰 ※ 산업지원과-13741호 * 산업지원과-4530, 7995호 검토 근거	‘21. 12. 16.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」토지보상업무 전문기관 위탁 협약체결 ※ 산업지원과-13809호	‘21. 12. 16.	박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획 수립용역」일시정지 해지 검토보고 ※ 산업지원과-13828호	‘21. 12. 17.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 전라남도 지방산업단지계획 심의(서면)에 따른 심의위원 방문설명 ※ 산업지원과-14344, 14217, 14367호	‘21. 12. 21. ~ ‘21. 12. 29.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」보상사업비 위탁 집행계획 ※ 산업지원과-14074호	‘21. 12. 22.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」협약체결에 따른 보상업무 착수금 지급 및 보상사업비 전도(1차) ※ 산업지원과-14149호	‘21. 12. 23.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획 수립용역」일시정지 검토보고 ※ 산업지원과-14579호	‘21. 12. 31.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」추진을 위한 신기술·특허 사용협약 체결 ※ 산업지원과-141호	‘22. 1. 5.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업 교통·환경영향평가 용역」일시정지 검토보고 ※ 산업지원과-2098호	‘22. 2. 21.	박은규 국장 고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 총사업비 2차 조정 승인(국토부), 조정 협의 결과보고 및 보상사업비 집행계획(2차) ※ 국토교통부 산업입지정책과-1004호, 산업지원과-3077 ※ 산업지원과-3436	‘22. 3. 17. ‘22. 3. 25.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공익성 사업인정(의제) 동의 통보 (중앙토지수용위원회, 2022년 제12차 심의) ※ 중앙토지수용위원회 사무국-9587호, 전라남도 지역계획과-5726	‘22. 4. 4.	고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 오천산단 재생사업지구계획 승인 고시 ※ 전라남도 지역계획과-8259	‘22. 5. 19.	고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업」협약체결에 따른 보상사업비 전도(2차) ※ 산업지원과-6315	‘22. 6. 3.	고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업」협약체결에 따른 보상사업비 전도(3차) ※ 산업지원과-7245	‘22. 6. 28.	고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」 주민설명회 개최 ※ 산업지원과-7318	‘22. 6. 30.	박은규 국장 고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」 사업착수(시행) 신고 ※ 산업지원과-8007	‘22. 7. 18.	고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「오천일반산업단지 재생사업」 사업 건축(주차장) 허가 신청 및 BF 예비인증 추진 ※ 산업지원과-9940	‘22. 8. 31.	고영준 과장 노기섭 팀장 임선규 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획」 변경계약 체결 및 일시정지 해지 요청 ※ 산업지원과-11036	‘22. 9. 26.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업」 건축(주차장) 등 협의 ※ 산업지원과-11600	‘22. 10. 6.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 지적측량(분할) 완료 ※ 산업지원과-13736	‘22. 11. 24.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 산업지원과-13824	‘22. 11. 28.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 지정공부 정리결과 알림 ※ 중부민원출장소-13219, 산업지원과-13824	‘22. 12. 20.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 오천산업단지 재생사업지구지정 및 재생시행계획 수립용역 일시정지 ※ 회계과-819, 산업지원과-195	‘23. 1. 13.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 보상계획 통지(여수 오천일반산업단지 재생사업) ※ 한국부동산원 광주지사-646, 산업지원과-1988	‘23. 2. 20.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 보상계획 공고 실시 알림 및 감정평가법인 등 선정 요청(여수 오천일반산업단지 재생사업) ※ 한국부동산원 광주지사-1306, 산업지원과-4395	‘23. 4. 11.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 교통영향평가 용역 준공 ※ 산업지원과-7708	‘23. 6. 26.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 환경영향평가 용역 준공 ※ 산업지원과-7708	‘23. 7. 4.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 비점오염원 설치신고 수리 알림(영산강유역 환경청) ※ 산업지원과-12200	‘23. 10. 5.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 편입토지의 잔여지 매수여부 요청에 따른 검토 보고 ※ 산업지원과-12437	‘23. 10. 11.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 잔여지 등 매수여부 검토결과 회신 ※ 산업지원과-13151	‘23. 10. 26.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 공시송달(보상협의) 공고 ※산업지원과-3029	‘24. 3. 5.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 오천일반산업단지 재생사업 총사업비 조정(안) 협의(3차) 검토 보고 ※산업지원과-5904	‘24. 5. 10.	나병곤 국장 조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 보상사업비 전도(4차) 결정 ※산업지원과-68	‘24. 7. 9.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 설계의 경제성(VE) 등 검토용역 시행 ※산업지원과-1832	‘24. 8. 21.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 오천일반산업단지 재생사업 건설사업관리용역 발주방법 및 예산 변경사용 검토 보고 ※산업지원과-2496	‘24. 9. 5.	나병곤 국장 조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사(공사시)용역 시행계획 보고 ※산업지원과-4147	‘24. 10. 17.	정기명 시장 최정기 부시장 나병곤 국장 조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 용역 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내(변경) 공고(여수 오천일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역) ※산업지원과-4691	‘24. 10. 30.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 오천일반산단 재생사업지구계획 변경 승인 신청(여수시) ※산업지원과-5308	‘24. 11. 13.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 계약심사 요청 ※산업지원과-6017	‘24. 11. 29.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 시행계획(총괄 및 1차분) ※산업지원과-6267	‘24. 12. 6.	정기명 시장 최정기 부시장 나병곤 국장 조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 건설재해예방 기술지도계약 시행 ※산업지원과-6393	‘24. 12. 9.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수시 오천일반산업단지 재생산업 착공계 제출 ※산업지원과-216	‘25. 1. 7.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수시 오천일반산업단지 재생사업(총괄 및 1차분) 재해예방 기술지도 용역 착수계 제출 ※산업지원과-539	‘25. 1. 13.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수시 오천일반산업단지 재생사업(총괄 및 1차분) 재해예방 기술지도 용역착수계 제출 ※산업지원과-549	‘25. 1. 13.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 용역 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내(변경) 공고(여수 오천일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역) ※산업지원과-4691	‘25. 1. 13.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업(총괄 및 1차분)」추진에 따른 일시정지 검토 보고 ※산업지원과-686	‘25. 1. 14.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 「여수시 오천일반산업단지 재생사업(1차분)」 선금 지급 결정 알림 ※산업지원과-602	‘25. 1. 14.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 환경영향평가 대상사업 착공통보서 제출(여수 오천일반산업단지 재생사업) ※산업지원과-1121	‘25. 1. 22.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생사업 건설폐기물 처리용역 등 2건 계약의뢰 ※산업지원과-2029	‘25. 2. 17.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수 오천일반산업단지 재생계획 및 재생시행계획 승인(변경)에 따른 지형도면 고시 ※산업지원과-2137	‘25. 2. 18.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 『여수 오천일반산업단지 재생사업 건설사업관리용역』 계약(가격입찰) 의뢰 ※산업지원과-3346	‘25. 3. 18.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○「여수 오천일반산업단지 재생사업」재생계획 및 재생시행계획(변경) 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※산업지원과-8239	‘25. 7. 16.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관
○ 안전관리계획서(보완) 재검토 의뢰(여수 오천일반산업단지 재생사업) ※산업지원과-9628	‘25. 8. 20.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업 석면조사 용역」시행 및 계약의뢰 ※산업지원과-10240	‘25. 9. 4.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관
○ 「여수 오천일반산업단지 재생사업(총괄 및 1차분)」일시정지 해지 요청 ※산업지원과-11538	‘25. 10. 15.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관
○ 오천일반산단 재생사업 건설공사 안전점검 수행기관 지정 모집공고 ※산업지원과-11659	‘25. 10. 16.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관