정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	종화지구 새뜰마을사업
② 추진배경	대통령 직속 지역발전위원회에서 생활여건이 취약한 지역을 개선하여 정주여건 개선을 위해 2019년 공모에 선정됨
③ 사업개요	○ 사업목적 : 취약지역의 개조사업을 통해 정주여건 조성 ○ 위 치 : 여수시 종화동 900-3번지 일원 ○ 사 업 비 : 7,747백만 원 (국비 4,358, 도비 560, 시비 1,308, 추가시비 1,521) ○ 사업내용 : 재해위험시설, 우,오수관 정비, 상수도 정비,옹벽경관 및 쉼터조성, 다목적 커뮤니티센터,순환형 임대주택, cctv설치, 집수리 등
④ 사업부서	여수시 도시재생과		⑤ 담당자	시설9급 최성원 행정5급 문장곤
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	‘19. 4. ~‘23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2019년도 취약지역 생활여건 개조사업 사전신청서 수정제출 ※ 도시재생과-1648호(‘19.2.11.) [관련문서번호 기재]		‘19. 2.11.	박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 추진계획(2019년 도시취약지역 생활 여건 개조사업) ※ 도시재생과-4367호(‘19.4.5.)		‘19. 4. 5.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 국장 박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 시행 ※ 도시재생과-7470호(‘19.6.10.)		‘19. 6.10.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 국장 박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관

○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 제안서 평가위원 구성및운영계획 ※ 도시재생과-8076호(‘19.6.20.)	‘19. 6.20.	문태선 국장 박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 제안서 평가결과보고 ※ 도시재생과-10688호(‘19.8.8.)	‘19. 8. 8.	문태선 국장 박성재 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 협상보고 ※ 도시재생과-11426호(‘19.8.23.)	‘19. 8.23.	문태선 국장 박성재 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 및 실시설계 협상결과알림 ※ 도시재생과-11625호(‘19.8.28.)	‘19. 8.28.	박성재 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 및 실시설계용역 착수보고회 결과보고 ※ 도시재생과-13759호(‘19.10.10.)	‘19. 10.10.	문태선 국장 박성재 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜 및 실시설계용역 주민설명회 개최 결과보고 ※ 도시재생과-14044호(‘19.10.14.)	‘19. 10.14.	문태선 국장 박성재 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리지원사업 신청 안내공고 ※ 도시재생과-16112(‘19.10.14.)	‘19. 11.20.	박성재 과장 김명근 팀장 김창오 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 매입대상지 선정 및 추진계획 보고 ※ 도시재생과-34(‘20.1.02.)	‘20. 1. 2..	문태선 국장 오병태 과장 김명근 팀장 김창오 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜수립 및 실시설계용역 중간보고회 추진계획 ※ 도시재생과-2709(‘20.2.25..)	‘20. 2.25.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 선정위원회 운영계획 ※ 도시재생과-3529(‘20.3.11.)	‘20. 3.11.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 선정위원회 운영계획 ※ 도시재생과-4667(‘20.4.2.)	‘20. 4.02.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜수립용역 최종보고회결과보고 ※ 도시재생과-5892(‘20.5.3.)	‘20. 5.03.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 추진계획 ※ 도시재생과-6151(‘20.5.11.)	‘20. 5.11.	서은수 부시장 문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜수립용역 주민설명회 결과보고 ※ 도시재생과-6932(‘20.5.27.)	‘20. 5.27.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 위수탁계약체결 ※ 도시재생과-7349(‘20.6.04.)	‘20. 6.04.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 선정위원회 운영계획(2차) ※ 도시재생과-9643(‘20.7.23.)	‘20. 7.23.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도사업 추진계획 ※ 도시재생과-10425(‘20.7.23.)	‘20. 8.10.	권오봉 시장 서은수 부시장 문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업(자체) 위수탁보고 ※ 도시재생과-11023(‘20.8.25.)	‘20. 8.25.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업(해비타트) 위수탁보고 ※ 도시재생과-12258(‘20.9.22.)	‘20. 9.22.	문태선 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 공동이용시설 신축에 따른 건축협의 신청 ※ 도시재생과-15404(‘20.11.28.)	‘20.11.28.	김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 집수리 지원사업(철거) 추진계획 ※ 도시재생과-346(‘21.1.8.)	‘21. 1. 8.	신윤옥 국장 김동호 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마스터플랜승인에 따른 추진계획 보고 ※ 도시재생과-458(‘21.1.12.)	‘21. 1.12.	권오봉 시장 서은수 부시장 신윤옥 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 시행계획 ※ 도시재생과-1046(‘21.1.21.)	‘21. 1.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김동호 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 집수리 지원사업(철거) 위수탁보고 ※ 도시재생과-2803(‘21.2.24.)	‘21. 2.24.	신윤옥 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 집수리 지원사업 2차 추진계획 ※ 도시재생과-3000(‘21.3.2.)	‘21. 3. 2.	신윤옥 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 집수리 선정위원회 개최 계획 ※ 도시재생과-3450(‘21.3.9.)	‘21. 3. 9.	신윤옥 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김대성 주무관 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 보상현황 및 변경 추진계획 보고 ※ 도시재생과-4936(‘21.4.2.)	‘21. 4. 2.	신윤옥 국장 김동호 과장 김명근 팀장 김남희 차장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 공동이용시설 신축공사 시행계획 ※ 도시재생과-7720(‘21.5.21.)	‘21. 5.21.	서은수 부시장 신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김동호 과장 김명근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 알록달록 종화 플러스학교 휴먼케어 운영계획 ※ 도시재생과-9829(‘21.6.16.)	‘21. 6.16.	김동호 과장 박영화 팀장 이슬 교육팀장 강병욱 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 집수리지원사업(해비타트) 위수탁 완료보고 ※ 도시재생과-10425(‘21.6.24.)	‘21. 6.24.	신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김동호 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 등 2건 일시정지 검토보고 ※ 도시재생과-11159(‘21.7.7.)	‘21. 7. 7.	신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 조경 보완 실시설계용역 시행계획 ※ 도시재생과-12910(‘21.8.3.)	‘21. 8. 3.	신윤옥 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 사업지구 내 도시계획도로 개설 예산 반영 및 추진 요청 ※ 도시재생과-14750(‘21.9.2.)	‘21. 9. 2.	박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 GIS DB 구축용역 시행계획 ※ 도시재생과-16254(‘21.10.1.)	‘21. 10. 1.	박현식 부시장 신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 지구 내 도시가스 공사 관련 협의 ※ 도시재생과-16623(‘21.10.7.)	‘21. 10. 7.	박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 GIS DB 구축 용역 계약의뢰	‘21. 10.18.	박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 집수리 지원사업(자체) 위수탁사항 완료보고	‘21. 11.25.	신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 박창배 과장 김명근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 사업 대상지 추가 매입 검토	‘21. 12. 9.	신윤옥 국장 박창배 과장 김명근 팀장 김준현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 사업 상ㆍ하수도 정비사업 추진(도시가스 병행추진)	‘22.1.~9	신윤옥 국장 정수환 과장 윤대근 팀장 최원혁 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 사업 소공원 조성 및 골목길 정비시행계획 ※ 도시재생과-5207(‘22.4.9.)	‘22. 4. 6.	박현식 부시장 신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 정수환 과장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 일상감사 의뢰 ※ 도시재생과-5225(‘22.4.6.)	‘22. 4. 6.	정수환 과장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사랑방 리모델링 실시설계용역 시행계획 ※ 도시재생과-5705(‘22.4.14.)	‘22. 4. 14.	정수환 과장 신숙이 팀장 오병구 팀장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 계약심사 요청 ※ 도시재생과-7742(‘22.5.20.)	‘22. 5. 20.	정수환 과장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 주민설명회 결과보고 ※ 도시재생과-9157(‘22.6.16.)	‘22. 6. 16.	정수환 과장 노정현 팀장 김숙 주무관 한승헌 센터장 반은하 사무국장
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 계약의뢰 ※ 도시재생과-10715(‘22.7.12.)	‘22. 7. 12.	정수환 과장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사랑방 리모델링 실시설계용역 일시정지 검토보고 ※ 도시재생과-12648(‘22.8.16.)	‘22. 8. 16.	정수환 과장 장혜숙 팀장 김진욱 팀장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 현장 실정사항에 따른 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-12785(‘22.8.18.)	‘22. 8. 18.	정재호 국장 정수환 과장 장혜숙 팀장 김진욱 팀장 윤대근 팀장 최원혁 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 마을기록화사업 용역 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-15646(‘22.10.17.)	‘22. 10.17.	정수환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 노정현 팀장 김숙 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 홍보물품 구입 계획 ※ 도시재생과-17306(‘22.11.17.)	‘22. 11. 17.	정수환 과장 노정현 팀장 김숙 주무관 김진기 센터장 반은하 사무국장 안수지 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 편입용지(국유지) 등 보상비 지급(종화동 607) ※ 도시재생과-18311(‘22.12.6.)	‘22. 12. 6.	정수환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 노정현 팀장 김미애 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 공동이용시설 건물번호 부여 신청 ※ 도시재생과-18734(‘22.12.13.)	‘22. 12. 13.	조희순 팀장 윤대근 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을 소식지 제작 ※ 도시재생과-18885(‘22.12.15.)	‘22. 12. 15.	정수환 과장 조희순 팀장 노정현 팀장 김숙 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 실정보고에 따른 검토보고 ※ 도시재생과-330(‘23.1.5.)	‘23. 1. 5.	정재호 국장 정수환 과장 이동일 과장 윤대근 팀장 이강 팀장 신정임 팀장 김진욱 팀장 황주영 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-564	‘23. 1. 18.	이병호 국장 정수환 과장 한진숙 과장 윤대근 팀장 김진욱 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 공기연장 의뢰 ※ 도시재생과-578(‘23.1.19.)	‘23. 1. 19.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 일시정비 검토보고 ※ 도시재생과-1687	‘23. 2. 8.	이병호 국장 정수환 과장 한진숙 과장 윤대근 팀장 김진욱 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 일시정지 요청 ※ 도시재생과-1707(‘23.2.10.)	‘23. 2. 10.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-3613(‘23.3.17.)	‘23. 3. 17.	이병호 국장 정수환 과장 한진숙 과장 윤대근 팀장 여미향 주무관 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 공기연장 요청 ※ 도시재생과-3632(‘23.3.20.)	‘23. 3. 20.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 GIS DB 구축 용역 공공측량성과 심사요청 ※ 도시재생과-4612(‘23.4.4.)	‘23. 4. 4.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 물가변동에 의한 계약금액 조정 신청에 따른 검토보고 ※ 도시재생과-4944(‘23.4.7.)	‘23. 4. 7.	이병호 국장 정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 일시정지 요청 ※ 도시재생과-4961(‘23.4.10.)	‘23. 4. 10.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 일시정지 요청 ※ 도시재생과-4961(‘23.4.10.)	‘23. 4. 10.	정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 현장대리인 변경 검토 회신 ※ 도시재생과-5738(‘23.4.24.)	‘23. 4. 24.	정수환 과장 김희경 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 물가변동에 의한 계약금액 조정 (E/S) 검토보고 ※ 도시재생과-5826(‘23.4.25.)	‘23. 4. 25.	이병호 국장 정수환 과장 신정환 차장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사무실 운영계획 검토보고 ※ 도시재생과-7101(‘23.5.18.)	‘23. 5. 18.	정수환 과장 윤대근 팀장 박지홍 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 상하수도 정비공사 설계변경 검토보고 ※ 도시재생과-7462(‘23.5.23.)	‘23. 5. 23.	김종기 부시장 이병호 국장 정수환 과장 신정환 차장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 도시가스 공급계약 체결(종화지구 마을카페) ※ 도시재생과-7245(‘23.5.23.)	‘23. 5. 23.	정수환 과장 윤대근 팀장 박지홍 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 골목길 정비 및 소공원 조성공사 실정보고서 접수에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도시재생과-9026(‘23.6.22.)	‘23. 6. 22.	김종기 부시장 이병호 국장 정수환 과장 윤대근 팀장 문정현 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 우수로 정비공사 시행 ※ 도시재생과-9821(‘23.7.5.)	‘23. 7. 5.	정수환 과장 윤대근 팀장 박지홍 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사랑방 철거공사 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도시재생과-9957(‘23.7.6.)	‘23. 7. 6.	이병호 국장 정수환 과장 윤대근 팀장 박지홍 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사랑방 리모델링 실시설계용역 일시정지 해제 및 변경계약 검토보고 ※ 도시재생과-9982(‘23.7.6.)	‘23. 7. 6.	정수환 과장 윤대근 팀장 박지홍 주무관
○ 종화지구 새뜰마을사업 임시사랑방 철거공사 준공계 제출 ※ 도시재생과-10758(‘23.7.19.)	‘23. 7. 19.	홍종옥 팀장 최성원 주무관