중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	국도17호선~월산교차로 도로확장(완료)
② 추진배경	농촌지역 협소한 도로 확장으로 주민 교통불편 해소 및 주거환경 개선을 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 국도17호선(월산IC)~월산교차로 ○ 사 업 량 : L=340m, B=18.5m, 교량 1개소 ○ 사 업 비 : 2,800백만 원(공사 2,100, 보상 및 기타 700)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 조진우 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 12. ~‘21. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 도시계획시설사업(도로) 실시계획 인가 신청 ※ 도로과 - 13735호		‘17.12.14.		김기채 과장 서범규 팀장 김동언 주무관
○ 실시설계 용역 집행계획 ※ 도로과 - 1505호		‘18. 2. 8.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과 - 2497호		‘18. 3. 7.		㈜우빈기술공사
○ 실시설계용역 일시정지 - 전라남도 하천 기본계획 심의 ※ 도로과 - 4459호 ※ 회계과 - 4604호		‘18. 4.23.		조일수 국장 김기채 과장 장세길 도시계획과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과 - 10059호		‘18. 9.28.		문태선 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 공사착공(총괄 및 1차분) ※ 도로과 - 13771호		‘18.12.21.		㈜우주종합건설

○ 도시관리계획 결정(변경)용역 집행계획 ※ 도로과 – 1047호	‘19. 1.25.	김기채 국장 서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경)용역 착수 ※ 회계과 – 6316호	‘19. 2.15.	서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 공사 일시정지 ※ 도로과 – 2286, 2255호 ※ 회계과 - 8393호	‘18. 2.26.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 석면폐기물 철거 및 처리 착수 ※ 도로과 – 6085, 6096호	‘19. 5.16.	서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 ※ 도시계획과 – 13424호	‘19. 6.30.	장세길 도시계획과장 서유권 과장 김문환 도시계획팀장 배도선 팀장 하인대 주무관 김종서 주무관
○ 도시계획시설 실시계획(변경)인가 ※ 도시계획과 – 20912호	‘19.10.11.	장세길 도시계획과장 서유권 과장 김문환 도시계획팀장 이재태 팀장 하인대 주무관 김종서 주무관
○ 석면폐기물 철거 준공 ※ 회계과 – 55718호	‘19.10.31.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 공사재개 ※ 도로과 – 13732호	‘19.11. 7.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 추가필지 감정평가 및 보상협의 ※ 도로과 – 14083, 15361호	‘19.11.14. ‘19.12.12.	서유권 과장 이덕연 팀장 장문희 주무관
○ 국유지 용도폐지 요청 ※ 도로과 – 15657호	’19.12.18.	서유권 과장 이덕연 팀장 김종서 주무관 장문희 주무관
○ 인사발령에 따른 감독공무원 변경 ※ 도로과-363(2020. 1. 9.) ※ 회계과-5805(2020. 2. 5.)	’20. 1. 8.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 조민아 주무관
○ 편입토지 손실보상비 집행 ※ 도로과-307(2020. 1. 8.)	‘20. 1. 8.	서유권 과장 이덕연 팀장 장문희 주무관
○ 편입 토지에 대한 보상협의 ※ 도로과 – 913호	‘20. 1. 22.	서유권 과장 이덕연 팀장 장문희 주무관
○ 지방토지위원회 수용재결 신청 ※ 도로과 – 5520호	‘20. 4. 22.	장세길 국장 서유권 과장 송문종 차장 장문희 주무관
○ 계약금액 조정 검토 용역 시행 ※ 도로과 – 6368호	‘20. 5. 13.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 변경 계약 체결 의뢰 ※ 도로과 – 8479호	‘20. 6. 25.	이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 하도급 변경계약 검토결과제출 ※ 도로과 – 9761호	‘20. 7. 22.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 편입 토지 손실 보상비 집행 ※ 도로과 – 10519호	‘20. 8. 7.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 주무관
○ 2차분 착공계 ※ 도로과 – 11316호	‘20. 8. 26.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 하도급변경계약 적정성 검토 ※ 도로과 – 13928호	‘20.10. 30.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 하도급변경계약 적정성 검토 ※ 도로과 – 13928호	‘20.10. 30.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 편입토지 등에 대한 잔여지 손실보상비 집행 ※ 도로과 – 13945호	‘20.10. 30.	강 균 과장 김희신 팀장 박동훈 주무관 장문희 주무관
○ 이의재결에 따른 사업시행자 의견제출 ※ 도로과 – 14201호	‘20. 11. 5.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축 용역 변경 계약체결 의뢰 ※ 도로과 – 15182호	‘20. 12. 1.	강 균 과장 김희신 팀장 박동훈 주무관
○ 폐기물처리용역(1차분) 완료계 ※ 도로과 – 16390호	‘20. 12. 29.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로확장공사(1차분) 완료계 ※ 도로과 – 16403호	‘20. 12. 29.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 용역완료계(물가변동 검토용역) ※ 도로과 – 438호	‘21. 1. 13.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 착수계(폐기물처리용역 3차분) ※ 도로과 – 2143호	‘21. 2. 22.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 착공계(도로확장공사 3차분) ※ 도로과 – 2144호	‘21. 2. 22.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 완료계(폐기물처리용역 2차분) ※ 도로과 – 3534호	‘21. 3. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 준공계(도로확장공사 2차분) ※ 도로과 – 3615호	‘21. 3. 25.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 교통신호기 설치공사 착공 ※ 도로과 – 4730호	‘21. 4. 19.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 계약기간연장에 따른 계약금액 조정 ※ 도로과 – 7197호	‘21. 5. 18.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고에 대한 검토보고 ※ 도로과 – 6736호	‘21. 6. 4.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ CCTV 조사용역 시행 ※ 도로과 – 7334호	‘21. 6. 17.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사(총괄 및 3차분) 변경계약 체결 ※ 도로과 – 7393호	‘21. 6. 21.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사(총괄 및 3차분) 준공 ※ 도로과 – 7574호	‘21. 6. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관