중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	국동1통L마트~국동주유소 뒤 도로개설 (완료)
② 추진배경	도시기반시설 확충을 통한 주민생활 환경 개선 및 국제해양 관광중심 도시건설
③ 사업개요	○ 위 치 : 국동 647-6번지 일원 ○ 사 업 량 : L=164m, B=8m ○ 사 업 비 : 1,400백만 원(공사비 370, 보상비 및 기타 1,030)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 김종서 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 3. ~‘19. 7.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행 ※ 도로과 - 1757호		‘17. 2. 9.		문태선 과장 서유권 팀장 김상곤 주무관
○ 실시설계용역 시행 ※ 도로과 - 3292호		‘17. 3.21.		산하종합기술(주)
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과 - 4130호		‘17. 4.10.		문태선 과장 서유권 팀장 김상곤 주무관
○ 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과 - 316호		‘18. 1. 9.		김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 실태조사 및 보상협의 ※ 도로과 - 2239호		‘18. 3. 8.		김기채 과장 이돈주 팀장 박규연 주무관
○ 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과 - 호		‘18. 3.14.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 공사 착공 ※ 도로과 - 7447호		‘18. 7. 4.		㈜장호건설

○ 공사 일시정지 ※ 도로과 – 9423, 9433호 ※ 회계과 - 9556호	‘18. 9. 3.	김기채 국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과 – 10389, 10435호 ※ 회계과 – 10533호	‘18.10. 1.	김기채 국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 공사 일시정지 ※ 도로과 – 471, 454호 ※ 회계과 – 1258호	‘19. 1.14.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과 – 6630, 6718호 ※ 회계과 – 26138호	‘19. 5.29.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 공사 준공 ※ 회계과 – 36956호	‘19. 7.16.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관