정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동문동주민센터~자산교 도로개설
② 추진배경	동문우체국 ~ 주민센터 확장 및 자산교 재가설과 연계한 도로 확장으로 원도심 주거환경 개선 및 학생 보행환경 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 종화동 1085번지 일원 ○ 사 업 량 : L=365m, B=8m → 12m ○ 사 업 비 : 9,020백만 원 (공사 2,070, 보상 및 기타 6,950)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 조민철 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵13. 7. ~ ‵24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행		‵13. 7. 15. ~ ‵15. 12. 24.		전동호 국장 김회근 과장 서유권 팀장 조정선 주무관
○ 도로확장사업 추진방안 검토 보고 ※ 도로과 - 8189호		‵18. 7. 29.		권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정용역 시행 ※ 도로과 – 8249호		‵18. 7. 31.		김기채 과장 김정아 계약심사팀장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 도시관리계획(시설:도로)결정 (변경)신청 ※ 도로과 – 10246호		‵18. 9. 21.		문태선 과장 서범규 팀장 정상기 주무관
○ 실시설계 및 설계용역 시행 및 계약 ※ 도로과 – 10625호		‵18. 10. 5.		산하종합기술(주)
○ 도시관리계획(도로)결정(변경) 용역 준공 ※ 도로과 – 13805, 13811호 ※ 회계과 – 62223호		‵18. 12. 21.		문태선 과장 서범규 팀장 정상기 주무관

○ 도시관리계획(도로) 변경결정 완료 ※ 도시계획과 - 27071호	‵18. 12. 24.	문태선 과장 서범규 팀장 정상기 주무관
○ 도시계획시설사업(도로) 실시계획인가신청 ※ 도로과–423호	‵19. 1. 10.	서유권 과장 배도선 팀장 정상기 주무관
○ 편입토지 등 보상을 위한 주민설명회 개최 ※ 도로과-1338호	‵19. 2. 20.	서유권 과장 배도선 팀장 이재종 팀장 정상기 주무관 배 경 실무원
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-6263,7957호	‵19. 2. 19. ‵19. 6. 26.	서유권 과장 배도선 팀장 정상기 주무관
○ 편입용지 및 지장물 실태조사 ※ 도로과-7175,7196,7292호	‵19. 6. 17. ~ ‵19. 6. 18.	서유권 과장 배도선 팀장 이재종 팀장 배 경 실무원
○ 지적 분할 측량(추가) ※ 도로과-10110, 10660호	‵19. 8. 14. ~ ‵19. 9. 22.	서유권 과장 이재태 팀장 김강혁 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 도로과-12028호	‵19. 9. 27. ~ ‵19. 10. 14.	서유권 과장 이덕연 팀장 이재태 팀장 배 경 실무원
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-12993호	‵19. 10. 21.	이덕연 팀장 이재태 팀장 김강혁 주무관
○ 실시계획인가 완료 ※ 도로과-15179호, 도시계획과-25454호	‵19. 12. 9.	장세길 과장 김문환 팀장 하인대 주무관
○ 감정평가 ※ 도로과-12848호	‵19. 10. 17. ~ ‵19. 11. 15.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 도시계획시설 사업인정(변경)에 관한 주민의견 등의 의견청취 공고 ※ 도로과-14115호	‵19. 11. 15.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 제1회 지방토지수용위원회 토지수용 재결신청 ※ 도로과-16164호, 도로과-47호	‵19. 12. 31. ‵19. 1. 2.	장세길 과장 서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 ※ 도로과-760호	‵20. 1. 17.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 제2회 지방토지수용위원회 토지수용 재결신청 ※ 도로과-2540호	‵19. 2. 26.	장세길 국장 서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-2664	‵19. 2. 27.	서유권 과장 이재태 팀장 김강혁 주무관
○ 도시계획시설 사업인정(변경)에 관한 주민의견 등의 의견청취 공고 ※ 도로과-2747호	‵20. 3. 2.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 도시계획시설 사업인정(변경)에 관한 의견청취 결과제출 ※ 도로과-3601호	‵20. 3. 17.	서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 실무원
○ 편입토지등에대한 손실보상비 집행 ※ 도로과-4152호	‵20. 3. 26.	장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 실무원
○ 계약심사 요청 ※ 도로과-6842호	‵20. 5. 22.	서유권 과장 이재태 팀장 김강혁 주무관
○ 도로개설공사(총괄 및 1차) 착공계 ※ 도로과-11105호	‵20. 8. 19.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 감리,비산농도 측정 용역 계약의뢰 ※ 도로과-12440호	‵20. 9. 23.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 철거 및 처리용역 변경 계약 의뢰 ※ 도로과-12492호	‵20. 9. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 감리용역 착수계 ※ 도로과-13211호	‵20. 10. 14.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 비산농도 측정용역 착수계 ※ 도로과-13212호	‵20. 10. 14.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 감리용역 준공계 ※ 도로과-15305호	‵20. 12. 2.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 준공계 ※ 도로과-15342호	‵20. 12. 3.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 비산농도 측정용역 준공계 ※ 도로과-15614호	‵20. 12. 9.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 가연성폐기물처리용역 착수계 ※ 도로과-15826호	‵20. 12. 14.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 완료계 ※ 도로과-15841호	‵20. 12. 15.	강 균 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 감독공무원 변경 검토보고 ※ 도로과-1227호	‵21. 1. 29.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 도로개설공사 준공계(1차분) ※ 도로과-1903호	‵21. 2. 16.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 도로개설공사 착수계(2차분) ※ 도로과-2632호	‵21. 3. 5.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 가연성폐기물처리용역 준공계 ※ 도로과-4300호	‵21. 4. 9.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 가로등 설치공사 시행 ※ 도로과-4608호	‵21. 4. 15.	임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ GIS DB 구축용역 시행 ※ 도로과-5677호	‵21. 5. 11.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ GIS DB 구축용역 계약심사 완료 ※ 도로과-6229호	‵21. 5. 25.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 도로개설공사(총괄 및 2차분) 일시정지 ※ 도로과-8003호	‵21. 7. 2.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 가로등 설치공사 일시정지 ※ 도로과-9888호	‵21. 8. 13.	강 균 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ GIS DB 구축용역 일시정지 ※ 도로과-10819호	‵21. 9. 7.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 도로개설공사(총괄 및 2차분) 일시정지 해지 및 공사기간 연장 ※ 도로과-14418호	‵21. 12. 13.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 도로개설공사(총괄분)외 2건 변경계약체결 알림 ※ 도로과-4883호	‵22. 5. 2.	오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 공사(2차분, 건설폐기물처리용역) 일시정지 ※ 도로과-6273호	‵22. 6. 7.	오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 통신선로 이설 부담금 집행 ※ 도로과-10583호	‵22. 9. 22.	오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 실정보고 제출(2차분) ※ 도로과-12047호	‵22. 10. 26.	조태익 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도시계획과-26458호, 도로과-13778호	‵22. 12. 6.	조태익 주무관
○ 가로등 설치공사 감독공무원 변경 알림 ※ 회계과-8177호, 도로과-2215호	‵23. 3. 3.	최영민 주무관
○ 2차분에 대한 현장 실정보고(제4회) 제출 ※ 도로과-2705호	‵23. 3. 14.	최영민 주무관
○ 일시정지 해지 및 설계변경 검토보고(총괄및2차분) ※ 도로과-2885호	‵23. 3. 15.	김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 박형열 담당관 한진숙 과장 서은주 팀장 김진욱 팀장 이광재 팀장 최영민 주무관
○ 설계변경 계약심사 요청 ※ 도로과-2924호	‵23. 3. 20.	오정환 과장 이광재 팀장 최영민 주무관
○ 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림(2차분) ※ 회계과-17924호, 도로과-4527호	‵23. 4. 25.	최영민 주무관
○ 건설폐기물 처리계획서 제출 ※ 도로과-4661호	‵23. 4. 27.	오정환 과장 박상진 팀장 조영문 주무관
○ 청구건(2차분) ※ 도로과-5790호	‵23. 5. 30.	최영민 주무관
○ 동문동주민센터~자산교 도로개설공사 안전관리계획서 검토 의뢰 ※ 도로과-7292호	‵23. 7. 4.	오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 동문동 주민센터~자산교 도로개설공사 설계안전성 검토 용역 시행 ※ 도로과-7626호	‵23. 7. 11.	심근하 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 동문동 주민센터~자산교 도로개설공사 설계안전성 검토 용역 긴급 계약의뢰 ※ 도로과-7627호	‵23. 7. 11.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 동문동주민센터~자산교 도로개설공사(총괄및2차분) 공기연장 검토보고 ※ 도로과-7920호	‵23. 7. 18.	이경종 국장 심근하 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 동문동주민센터~자산교 도로개설공사(총괄 및 2차분) 외 1건 공사기간 연장 요청 ※ 도로과-7927호	‵23. 7. 18.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 관급자재 검사기관 변경 검토보고 ※ 도로과-8228호	‵22. 7. 24.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 잔여지 활용 주민의견 수렴결과 알림 ※ 도로과-8288호	‵23. 7. 26.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 관급자재 검사기관 변경 요청 ※ 도로과-8537호	‵23. 8. 1.	윤대근 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 변경계약(기한 연장) 체결 알림 ※ 도로과-8624호	‵23. 8. 3.	최영민 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 착수계 제출 ※ 도로과-8679호	‵23. 8. 3.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 도로과-8742호	‵23. 8. 4.	최영민 주무관
○ 지장물(KT 통신주) 이설 요청 ※ 도로과-9343호	‵23. 8. 21.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 변경계약 체결 알림 ※ 도로과-10325호	‵23. 9. 13.	최영민 주무관
○ 전기사용 및 사용전 점검 신청 ※ 도로과-10336호	‵23. 9. 14.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 가로등 전기시설부담금 집행 ※ 도로과-10515호	‵23. 9. 18.	심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 가로등 설치 공사 준공검사 감독공무원 지정 ※ 도로과-10978호	‵23. 10. 4.	최영민 주무관
○ 도로개설 설계안전성검토 수수료 집행 ※ 도로과-11009호	‵23. 10. 5.	심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 변경계약(기한 연장) 체결알림 ※ 회계과-52683호	‵23. 10. 25.	최영민 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 일시정지 알림 ※ 회계과-53723호	‵23. 10. 31.	최영민 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 일시정지 해지 및 변경계약(기한 연장)알림 ※ 회계과-57296호	‵23. 11. 16.	최영민 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도시계획과-26926호	‵23. 11. 16.	최영민 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 완료 검사조서 제출 ※ 도로과-13129호	‵23. 11. 22.	심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도로개설 공사 민원에 대한 조치계획 제출 ※ 도로과-13668호	‵23. 12. 4.	심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 건설폐기물 처리용역 변경계약 체결알림 ※ 회계과-66803호	‵23. 12. 22.	최영민 주무관
○ 건설폐기물 처리용역 준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-66977호	‵23. 12. 26.	최영민 주무관
○ 실정보고에 대한 검토 결과 알림 ※ 도로과-14613호	‵23. 12. 26.	심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 변경계약 의뢰 ※ 도로과-14639호	‵23. 12. 26.	심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ (2차분)준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-67557호	‵23. 12. 27.	최영민 주무관
○ 품질시험(재귀반사성능) 결과 알림 ※ 전라남도도로관리사업소-19597호	‵23. 12. 28.	최영민 주무관
○ (2차분)준공검사 기한 연장 요청 ※ 도로과-14807호	‵23. 12. 29.	심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ (1,2,3회ES) 물가변동으로 인한 계약금액조정 검토용역 시행 ※ 도로과-37호	‵24. 1. 2.	심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 한진숙 과장 김진욱 팀장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ (총괄 및 2차분) 변경계약(설계변경) 체결알림 ※ 회계과-566호	‵24. 1. 4.	최영민 주무관
○ 착수계(1,2,3회ES) ※ 도로과-654호	‵24. 1. 23.	조민철 주무관
○ (1,2,3회ES) 물가변동으로 인한 계약금액조정 검토용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-2702호	‵24. 1. 23.	조민철 주무관
○ (1,2,3회ES) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토용역 준공계 제출 ※ 도로과-1575호	‵24. 2. 6.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ (1,2,3회ES) 물가변동으로 인한 계약금액조정 검토용역 준공검사조서 제출 ※ 도로과-1688호	‵24. 2. 8.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ (1,2,3회ES)물가변동으로 인한 계약금액 조정신청 검토결과 보고 ※ 도로과-2100호	‵24. 2. 20.	김종기 부시장 염승열 국장 명호남 과장 강행숙 과장 김진욱 팀장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 하자보수 요청 ※ 도로과-6393호	‵24. 5. 27.	명호남 과장 결재 정진희 김장 대결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 하자보수 보완 요청 ※ 도로과-7263호	‵24. 6. 15.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 물가변동(ES) 정산 검토보고 ※ 도로과-7441호	‵24. 6. 18.	명호남 과장 강행숙 과장 김진욱 팀장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-32614호	‵24. 6. 20.	조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 준공계 ※ 도로과-7851호	‵24. 6. 27.	조영문 주무관
○ 하자보수 요청 ※ 도로과-789호	‵24. 7. 24.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 실시계획(변경)인가 신청서 제출 ※ 도로과-4348호	‵24. 10. 29.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 동문동주민센터-자산교 도로개설 공사에 대한 착공계(하자보수) 제출 ※ 도로과-4590호	‵24. 11. 5.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 동문동주민센터-자산교 도로개설 공사 준공검사원(하자보수) 제출 ※ 도로과-6604호	‵24. 12. 31.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 동문동주민센터-자산교 도로개설 공사 하자보수 준공 검사조서 제출 ※ 도로과-106호	‵25. 1. 3.	명호남 과장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ ｢동문동주민센터 ~ 자산교 도로 개설공사｣ 토지이동 신청(지목변경, 합병) ※ 도로과-8600호	‵25. 8. 7.	박성식 과장 황규석 팀장 문태영 주무관