중점관리 대상사업 내역서(준공)

① 정책사업명	동문우체국~동문동주민센터 도로 개설공사
② 추진배경	관문지구 행복주택 건설과 연계한 도로 확장으로 원도심 교통체증 해소
③ 사업개요	○ 위 치 : 관문동 454번지 일원 ○ 사 업 량 : L=170m, B=12m ○ 사 업 비 : 1,700백만 원
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 김강혁 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 5. ~‘19. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 도로 확장공사 추진방안 검토 ※ 도로과 - 5693호		‘17. 5.17.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 문태선 과장 서유권 팀장 김동언 주무관
○ 도시관리계획(도로)변경결정 용역 시행 ※ 도로과 - 5867호		‘17. 5.21.		문태선 과장 김용우 회계과장 윤석호 계약1팀장 서유권 팀장 김동언 주무관
○ 도시관리계획(도로)변경결정 용역 착수 ※ 도로과 - 6682호		‘17. 6.10.		산하종합기술(주)
○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) 신청 ※ 도로과 - 7988호		‘17. 7.11.		김기채 과장 서범규 팀장 김동언 주무관
○ 도시관리계획(도로)변경결정 용역 준공 ※ 도로과 – 11218호		‘17. 9.28.		산하종합기술(주)
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청 ※ 도로과 - 11532호		‘17.10.13.		김기채 과장 서범규 팀장 김동언 주무관
○ 도로개설공사 집행 계획 수립 ※ 도로과 - 1731호		‘18. 2.12.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관

○ 도로개설공사 편입용지 및 지장물 실태조사 계획 ※ 도로과 - 1730호	‘18. 2.13.	김기채 과장 서범규 도로시설팀장 이돈주 팀장 김현식 주무관 김숙진 실무원
○ 공사 계약 및 착공 ※ 회계과 – 10519호 ※ 도로과–1759, 2777호	‘18. 3. 8. (3. 15.)	송병구 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김현식 주무관
○ 편입토지 등 손실보상 계획 수립 ※ 도로과-4068호	‘18. 4.11.	주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 이돈주 팀장 김숙진 실무원
○ 공사 일시정지 검토 보고 및 일시정지 ※ 도로과-6555호 ※ 회계과-6577호	‘18. 6. 8. (6.14.)	조일수 국장 송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 정상기 주무관
○ 도시계획시설(도로)실시계획 변경인가 신청 ※ 도로과-9227호	‘18. 8.28.	문태선 과장 서범규 팀장 정상기 주무관
○ 공사 일시정지 해지 검토 및 일시정지 해지 ※ 도로과-13557호 ※ 회계과-62311호	‘18.12.17. (12.24.)	김기채 국장 양기원 국장 문태선 과장 박은규 회계과장 김정아 계약심사팀장 홍주성 계약2팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 정상기 주무관
○ 공사 일시정지 ※ 도로과-1589호 ※ 회계과-5494호	‘19.2.11. (`19.2.11.)	김기채 국장 양기원 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 정상기 주무관

○ 공사일시정지 해지 ※ 도로과 – 11510호 ※ 회계과 – 22405호	‘19. 5. 9.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 정상기 주무관
○ 설계변경 ※ 도로과 – 11154호 ※ 회계과 – 47469호	‘19.9.6.	김기채 국장 양기원 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이재태 팀장 고숙재 주무관 김강혁 주무관
○ 공사 준공 ※ 화계과 – 52660호	‘19.10.18.	㈜유성기업 강대권