중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	문수동 허문마을 도시계획도로 개설 (완료)
② 추진배경	여문지구 일방통행에 따른 흥화아파트 진출입 불편 해소를 위한 우회도로 개설
③ 사업개요	○ 위 치 : 문수동 869-2번지 일원 ○ 사 업 량 : L=75m, B=6m ○ 사 업 비 : 1,400백만 원 (공사 200, 보상 및 기타 1,200)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 김준현 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 1. ~‘19. 9.
<그간 주요 추진내용>
○ 공사 실시설계용역 주민설명회 개최 ※ 도로과-113호		‘18. 1.17.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 실시계획인가 신청 ※ 도로과-972호		‘18. 1.25.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 감정평가 및 보상협의 ※ 도로과-3476호		‘18. 4. 2. ‘18. 4.24.		김기채 과장 이돈주 팀장 유경상 팀장 정상현 주무관
○ 공사 집행계획 수립 ※ 도로과-4840호		‘18. 5. 2.		조일수 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 공사 계약 의뢰 및 도시계획시설 (도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-4907, 4951호		‘18. 5. 3.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 공사 착공 ※ 도로과-5181호, ㈜대도종합건설		‘18. 5.25.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 공사 일시정지 ※ 도로과-6318, 6323호 ※ 회계과-29316호		‘18. 6. 8.		조일수 국장 송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김준현 주무관
○ 공사 일시정지 해지 및 변경 계약 ※ 도로과-10958, 10962호 ※ 회계과-49246호		‘18.10.14. (10.16.)		김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김준현 주무관
○ 2018년도 지방토지수용위원회 심의 재결을 위한 조서 제출 ※ 도로과-11243호		`18.10.22.		문태선 과장 손용봉 팀장 김숙진 실무원
○ 수용재결에 따른 보상협의 및 공탁안내 ※ 도로과-12735호		`18.11.27.		문태선 과장 손용봉 팀장 김숙진 실무원
○ 공사 일시정지 ※ 도로과-504, 543호 ※ 회계과-634호		`19. 1. 14. (1. 15.)		김기채 건설교통국장 양기원 행정안전국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 김준현 주무관
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과-8063, 8109호 ※ 회계과-8237호		`19. 7. 1.		김기채 건설교통국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 김준현 주무관
○ 공사 준공 ※ 도로과-12304호, ㈜대도종합건설		‘19. 9. 29.		서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관