정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(완료)화양면 용문사 진입로 확장
② 추진배경	협소한 도로 확장으로 주민 교통불편 해소 및 주거환경 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 화양면 용주리 용문사 입구 ○ 사 업 량 : L=512m, B=6m ○ 사 업 비 : 1,400백만 원(공사비 700, 보상비 및 기타 700)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설6급 황규석 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘19. 2.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 및 도시관리계획 변경용역 시행 및 계약체결 의뢰 ※ 도로과-2118, 2180호		‘17. 2.21.		조일수 국장 문태선 과장 김용우 회계과장 윤석호 계약1팀장 서유권 팀장 전세용 주무관
○ 실시설계 및 도시관리계획 변경용역 준공 ※ 회계과-8047호		‘17. 7.11.		김용우 과장 장지문 계약2팀장 김성욱 주무관
○ 도로의노선지정공고 (실시계획인가 포함)		‘17.10.12.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 황규석 주무관
○ 실태조사 및 보상 협의 ※ 도로과-1747, 2543, 5881호		‘18. 2.14. ~ 5.28.		김기채 과장 이돈주 팀장 김숙진 실무원
○ 공사계약 의뢰 및 체결 ※ 도로과-4234호 ※ 회계과-5173호		‘18. 4.18. (5. 8.)		송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 주무관

○ 공사 일시정지 ※ 도로과-6203, 6209호 ※ 회계과-6261호	‘18. 6. 5. (6. 7.)	조일수 국장 송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 주무관
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과-9175, 9197호 ※ 회계과-9664호	‘18. 8.27. (9. 7)	양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 홍주성 계약2팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 설계변경 시행 및 계약 ※ 도로과-12846, 12857호 ※ 회계과-12914호	‘18.11.30. (12. 3.)	김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 공사 준공 * 준공검사 조서	‘19. 2.25.	서유권 과장 배도선 팀장 황규석 차장