정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미평동주민센터~구)미평역 도로개설-완료[2018-26]
② 추진배경	미평 근린공원을 이용하는 시민들의 접근성 개선으로 공원 활용성 제고 및 도시계획도로 개설로 재난대비 및 주민 교통 편익 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 미평동주민센터~구)미평역 ○ 사 업 량 : 도로개설 L= 70m B=25m ○ 사 업 비 : 1,200백만 원 (공사비 300, 보상비 및 기타 900)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설6급 황규석 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17.10. ~‘19. 4.
<그간 주요 추진내용>
○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 집행계획 수립 ※ 도로과-11502호		‘17.10.12.		김기채 과장 김용우 회계과장 윤석호 계약1팀장 서범규 팀장 황규석 팀장
○ 도시관리계획(미평공원) 결정(변경) 고시		‘18. 2. 2.		김기채 과장 서범규 팀장 황규석 주무관
○ 공사 집행계획 수립 및 계약의뢰 ※ 도로과-3989, 4012호		‘18. 4.11. (4.12.)		최종선 부시장 조일수 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 황규석 팀장
○ 여수도시계획시설(도로,공원) 사업실시계획(변경)인가		‘18. 4.17.		김기채 과장 서범규 팀장 황규석 주무관

○ 공사 일시중지 ※ 도로과-5779호, 5787호 ※ 회계과-26144호	‘18. 5.24. (5. 25.)	장세길 과장(대결) 고재익 과장(대결) 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 공사 일시중지 해지 및 변경계약 ※ 도로과-7427, 7432, 7632호 ※ 회계과-34842호	‘18. 7. 6. (7. 9./7.12.)	송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 설계변경 시행 및 계약 ※ 도로과-11182, 11339, 11376호 ※ 회계과-50929호	‘18.10.18.(10.23.)	고재영 부시장 김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 공사 일시정지 ※ 도로과-12823, 12840호 ※ 회계과-57525호	‘18.11.29. (11.30.)	김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-13881호	‘18.12.26.	문태선 과장 서범규 팀장 황규석 팀장
○ 공사설계변경 계약 및 일시중지 해지 ※ 도로과-2641호 ※ 회계과-9978호	‘19. 3. 5. (3. 7.)	양기원 행정안전국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 황규석 차장