중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	전라좌수영 동헌 외곽도로 개설(준공)
② 추진배경	여수공고 진입도로 일부가 전라좌수영 동헌 복원사업구역에 편입되어 학생 및 주민 통행불편 해소를 위한 대체(우회) 도로 개설
③ 사업개요	○ 위 치 : 동산동 427-5번지 일원 ○ 사 업 량 : L=95m, B=8m ○ 사 업 비 : 2,300백만 원 (공사 850, 보상 및 기타 1,450)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 한상범 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵18. 2. ~‵22. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 및 도시관리계획(도로) 결정(변경) 용역 집행계획 수립 ※ 도로과-600, 655호		‵18. 1. 17.		김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 도시관리계획(도로) 변경 결정 및 실시설계용역 계약 ※ 도로과-680호 ※ 도로과-1147호		‵18. 1. 18. (1. 30.)		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 도시관리계획(도로) 변경 결정 용역 및 실시설계용역 착수 ※ 도로과-1364호 ※ 도로과-1756호		‵18. 2. 2. (2. 13.)		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 ※ 도로과-4172, 4289호 ※ 회계과-19296		‵18. 4. 17. (4. 19.)		이돈주 팀장(대결) 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정 신청 ※ 도로과-4237호		‵18. 4. 18.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관

○ 도시관리계획(도로) 결정 용역 준공 ※ 도로과-4967호	‵18. 5. 4.	김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 실시설계 용역 준공 ※ 도로과-6971호	‵18. 6.26.	김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-8123호	‵18. 8. 8.	김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 신청 ※ 도로과-9640호	‵18. 9. 6.	김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 지적 분할측량 ※ 도로과-12829호 ※ 한국국토정보공사 여수지사-4960호(‘18.12.21)	‵18. 11. 29. (‵19. 1. 4.)	문태선 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 감정평가 시행 ※ 도로과-5914호	‵19. 5. 23.	서유권 과장 이재종 팀장 배 경 주무관
○ 편입토지 등 보상비 산정 및 집행계획 ※ 도로과-7407호	‵19. 6. 12.	고재영 부시장 김기채 국장 박은규 회계과장 서유권 과장 손하진 계약1팀장 배도선 도로계획팀장 이재종 도로행정팀장 김준현 주무관 배경 실무원
○ 편입토지 보상협의 요청 ※ 도로과-7395, 8069, 8680호	‵19. 6. 13. ‵19. 6. 29. ‵19. 7. 12.	서유권 과장 이재종 도로행정팀장 이덕연 도로행정팀장 배경 실무원
○ 지장물 철거공사 착수 ※ 도로과-15433호	‵19. 12. 13.	서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관

○ 손실보상협의 완료보고 ※ 도로과-1627호	‵20. 2. 9.	서유권 과장 이덕연 팀장 배경 실무원
○ 석면 폐기물 처리 용역 착수계 ※ 도로과 – 1730호	‵20. 2. 12.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 석면 폐기물 처리 용역 준공계 ※ 도로과 – 3660호	‵20. 3. 17.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 결과 제출 ※ 도로과 – 3903호	‵20. 3. 20.	서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 주무관
○ 가연성 폐기물 처리 용역 착수계 ※ 도로과 – 5100호	‵20. 4. 14.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 가연성 폐기물 처리 용역 준공계 ※ 도로과 – 7405호	‵20. 6. 2.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 매장문화재 시굴조사용역 착수계 ※ 도로과 – 7420호	‵20. 6. 4.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 지장물 철거공사 준공계 ※ 도로과-7596호	‵20. 6. 8.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 지장물 철거공사 폐기물처리 용역 준공계 ※ 도로과-7841호	‵20. 6. 12.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 매장문화재 시굴조사용역 일시정지 ※ 도로과-9937,9975,9998,10008호	‵20. 7. 28.	강 균 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 매장문화재 정밀발굴조사용역 계약심사의뢰 ※ 도로과-12689호	‵20. 9. 29.	강 균 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 매장문화재 시굴조사용역 완료계 ※ 도로과 – 12908호	‵20. 10. 7.	강 균 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 매장문화재 정밀발굴조사용역 착수계 ※ 도로과 – 14388호	‵20. 11. 11.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 매장문화재 정밀발굴조사용역 완료계 ※ 도로과 – 1186호	‵21. 1. 28.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 문화재 현상변경 허가신청 ※ 도로과 – 2227호	‵21. 2. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 도로개설(총괄 및 1차분) 시행 계획 ※ 도로과 – 5811호	‵21. 5. 13.	서은수 부시장 임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사 계약심사 완료 ※ 도로과 – 6765호	‵21. 6. 7.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사(총괄 및 1차분) 착공 ※ 도로과 – 7595호	‵21. 6. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사(총괄 및 1차분) 선금 지급 결정 ※ 도로과 – 7619호	‵21. 6. 24.	강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 국가지정문화재 주변 현상변경 허가 ※ 도로과 – 8137호	‵21. 7. 6.	강 균 과장 고영준 과장 황여진 팀장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사(2차분) 계약 의뢰 ※ 도로과 – 11480호	‵21. 9. 27.	강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(2차분) 착공 ※ 도로과 – 12455호	‵21. 10. 21.	강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ GIS DB 구축 용역 착공 ※ 도로과 – 14014호	‵21. 12. 2.	강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(1차분) 준공 ※ 도로과 – 14727호	‵21. 12. 20.	강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(1차분) 준공 ※ 도로과 – 14727호	‵21. 12. 20.	강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 지적분할 측량 의뢰 ※ 도로과 – 3166호	‵22. 3. 21.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과 – 4230호	‵22. 4. 15.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(2차분) 준공 ※ 도로과 – 4389호	‵22. 4. 20.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(3차분) 착공 ※ 도로과 – 4848호	‵22. 4. 29.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 관련부서 협의의견 조치계획 제출 ※ 도로과 – 5495호	‵22. 5. 16.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(총괄 및 3차분) 준공 ※ 도로과 – 6855호	‵22. 6. 20.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관