[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서교동 공영주차장 신축
② 추진배경	○ 국토교통부 행복주택사업 부지제공으로 주차면적이 축소 되어 주차전용건축물 신축으로 주차면 확보 ○ 전통시장 주변의 주차난 해소 및 지역상권 활성화
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 서교동 153번지 일원 ○ 사 업 량 : 주차전용건축물 1동 - 부지 3,450㎡, 건물 5,825㎡-2+1층, 주차 241면 ○ 사 업 비 : 5,400백만 원(특 5, 국 17.5, 시 31.5) ○ 공사기간 : `19. 5. ~ `19. 12. ※ 용역 기간 :‘18. 3. 6. ~ 12. 31.
④ 사업부서	여수시 교통과		⑤ 담당자	시설7급 김경열 행정5급 고영준
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	`18. 1 ~ `19.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 주차장내 행복주택 부지 선정		`16. 9.21.	국토교통부
○ 지방재정 투자심사		`17. 1.24.	여수시(자체심사)
○ 추진 방침결정 ※ 교통과-9824호		`17. 2.16.	주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 김용필 과장 김춘수 팀장 강한빛 주무관
○ `18년 주차환경개선사업 결정		`17. 5. 1.	국토교통부
○ 기본계획 변경 (주차 125면→241면)		`18. 6. 8.	주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 장광일 과장 천민호 팀장 김지아 주무관
○ 실시설계 용역 완료 ※ 회계과-62145호		`18.12.24.	김기채 국장 장광일 과장 천민호 팀장 김지아 주무관
○ 공사 착공 ※ 회계과-20862호		‘19. 5. 1.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 고영준 과장 양준호 팀장 김경열 주무관
○ 공사 준공 ※ 회계과-67302호		‘19.12.22.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 고영준 과장 양준호 팀장 김경열 주무관

<기재항목>

① 정책사업명 : 온-나라시스템 상의 단위과제카드명과 정책사업명 일치 권고

② 추진배경 : 정책의 추진계기 등 발단에 대해 상세하게 적시

③ 사업개요 : 사업목적, 추진내용 등 사업 전반에 대해 개괄

④ 사업부서 : 소속 기관명, 부서명(과 단위) 기재

⑤ 담당자 : 現 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과 함께 기재

⑥ 선정기준 : 국정과제 / 시민신청 / 10억 원 이상 사업 / 5천만 원 이상 연구용역 /

자치법규 제(개)정 및 폐지 / 기타 中 택1

⑦ 사업기간 : 사업의 시작 및 (예상)종료 시점 기재

※ <그간 주요 추진내용> : 중점관리 대상사업으로 선정되기 이전 진행되어 온 주요 추진사항 및 기타 주요내용 등을 기재

※ 일시 및 관련자 : 최종결재 날짜 기준으로 내림차순, 결재라인 직급순으로 실명 기재