정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시치매안심센터 신축
② 추진배경	○ 우리 시 노인 10명 중 1명이 치매로 추정, 예방과 조기 발견 지속적 관리 필요 ○ 치매 고위험군 시기부터 확진이후 전체 돌봄 ․ 치료 과정에서 환자와 가족들을 체계적으로 통합 지원
③ 사업개요	○ 사업목적 : 치매안심센터 확충 치매관리 인프라 보강 ○ 위 치 : 여수시 봉강동 323-11, 10번지 ○ 사 업 비 : 3,450백만 원 ○ 사업내용 : 3층/1동 연면적 876.7㎡
④ 사업부서	여수시 보건사업과		⑤ 담당자		의료기술7급 김용현 의료기술5급 김경호
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 1.~‘19. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 여수시치매안심센터 설치안 ※ 건강증진과-22461호		‘17.10.17.		주철현 시장 최종선 부시장 장기생 보건소장 이주리 과장 서현숙 팀장 우현숙 주무관
○ 공유재산관리계획 심의 의결		‘18. 3.29.		여수시의회
○ 치매안심센터 신축 기본 계획 수립 ※ 보건사업과-4437호		‘18. 4. 9.		최종선 부시장 장기생 보건소장 차미정 과장 서현숙 팀장 김용현 주무관
○ 치매안심센터 신축 부지 매입 ※ 보건사업과-5823호		‘18. 5. 3.		주철현 시장 최종선 부시장 장기생 보건소장 차미정 과장 서현숙 팀장 김용현 주무관
○ 치매안심센터 신축공사 기본 및 실시설계 용역 계약 ※ 보건행정과-21561호		‘18. 6.21.		장기생 보건소장 정혜정 과장 최영철 팀장 김종원 주무관

○ 치매안심센터 신축공사 계약 체결	‘18.12.14.	장기생 보건소장 정혜정 과장 최영철 팀장 김종원 주무관
○ 치매안심센터 신축공사 착공 ※ 보건사업과-16326호	‘18.12.20.	김경호 과장 서현숙 팀장 김용현 주무관
○ 치매안심센터 신축공사 준공 ※ 보건사업과-8530호	‘19. 6.12.	고재영 부시장 장기생 소장 김경호 과장 서현숙 팀장 김용현 주무관