정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노후관 교체 및 유수율 제고사업
② 추진배경	안전하고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급하고 전국 평균 유수율 달성을 위하여 관망 개선 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 급수구역 전지역 ○ 총사업비 : 863억원 (시비, ‛22년 31억원) ○ 사업규모 : L=393㎞, 블록화 63 (기 교체 135㎞) ○ 사업기간 : ‛08. 1. ~‛25. 12.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설 9급 장희재 시설 5급 이광재
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‛08. 1. ~‛25. 12.
<그간 주요 진내용>
○ 2020년까지 블록 구축 및 노후관 교체 L=144km		‛08. 1. ~ ‛20. 12.
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 추진계획 수립 ※ 상수도과-2712		‛18. 2. 6.		정종태 단장 하헌옥 과장 강성원 과장 주영근 팀장 이유영 팀장 김재영 주무관
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 계약 체결 ※ 수도행정과 - 2946		‛18. 4. 12.
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 선금 지급 ※ 수도행정과 - 3625		‛18. 5. 8.		정종태 단장 하헌옥 과장 주영근 팀장 최동환 주무관
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 기성금 지급 ※ 수도행정과 - 5119		‛19. 6. 26.		김정남 단장 강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관

○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고용역 완료 ※ 수도행정과-10058	‛19. 12. 16.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕지구 누수적출 지점 관로 보수공사 시행 및 계약의뢰 1~4차 ※ 상수도과-4958 (1차.‘19. 3.14.) ※ 상수도과-7666 (2차.‘19. 4.24.) ※ 상수도과-14995 (3차.‘19. 8.12.) ※ 상수도과-16512 (4차.‘19. 9. 4.)	‛19. 3. 14.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕지구 누수적출 지점 관로 보수공사 계약체결 1~4차 ※ 상수도과-5241 (1차.‘19. 3.20.) ※ 상수도과-8946 (2차.‘19. 5.14.) ※ 상수도과-15648 (3차.‘19. 8.12.) ※ 상수도과-17167 (4차.‘19. 9. 4.)	‛19. 3. 20.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕지구 누수적출 지점 관로 보수공사 완료 ※ 상수도과-6860 (1차.‘19. 4.11.) ※ 상수도과-7666 (2차.‘19. 4.24.) ※ 상수도과-16512 (3차.‘19. 8.22.) ※ 상수도과-17167 (4차.‘19. 9.16.)	‛19. 4. 11.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 유수율 제고사업 용역 계약의뢰 (토목, 기계, 전기ㆍ계측, 폐기물처리) ※ 상수도과 - 16054	‛19. 8. 28.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 유수율 제고사업 낙찰자 결정 (토목, 기계, 전기ㆍ계측, 폐기물처리) ※ 수도행정과 -7568 ※ 수도행정과 -7586	‛19. 9. 26.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 유수율 제고사업 계약 및 착공 ※ 수도행정과-7798	‛19. 10. 4.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 유수율 제고사업 준공 ※ 수도행정과-10025	‛19. 12. 9.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관

○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비사업 행정절차 이행 ※ 상수도과 - 16689(‘19. 9. 6.) - 일상감사완료 ※ 상수도과 - 17317(‘19. 9. 18.) - 계약심사의뢰	‛19. 9. 6.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비사업 계약심사 완료 ※ 회계과 -48493	‛19. 9. 26.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비사업 착공 ※ 수도행정과-9604	‛19. 12. 3.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 둔덕정수장 계통 블록시스템 정비사업 준공 ※ 수도행정과-2655	‛20. 3. 16.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 추진계획 수립 ※ 상수도과-2084	‛19. 1. 31.	김정남 단장 강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 일상감사 및 계약심사 완료 ※ 감사담당관-753, 회계과-4725 ※ 회계과-26211	‛19. 2. 1.	김정남 단장 강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고 용역 계약의뢰 ※ 상수도과-13611	‛19. 7 23	김정남 단장 강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 학용정수장 계통 블록시스템 정비 및 유수율 제고용역 계약 및 착수 ※ 수도행정과-6621	‛19. 8. 22.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관

○ 노후관로 정비공사 실시설계 용역 추진계획 수립 ※ 상수도과-18351	‛18. 10. 15.	정종태 단장 하헌옥 과장 강성원 과장 주영근 팀장 이유영 팀장 유재영 주무관
○ 노후관로 정비공사 실시설계 용역 계약체결 ※ 수도행정과-9757	‛18. 12. 24.
○ 여수시 원도심권 배.급수 노후관로 정비공사 실시설계 용역 선금 지급 ※ 수도행정과-1839	‛19. 3. 11.	김정남 단장 강 균 과장 주영길 팀장 최준홍 주무관
○ 우선 발주분 일상감사 및 계약심사완료 ※ 감사담당관-3621, 회계과-28356	‛19. 6. 10.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 국동 남초교 일원 노후관 교체 공사 및 폐기물처리용역 계약의뢰 ※ 상수도과-11213 (토목 및 폐기물) ※ 상수도과-13896 (GIS-DB 구축 용역)	‛19. 6. 19.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 국동 남초등학교 일원 노후관로 교체공사 계약체결 ※ 수도행정과-6475 (토목) ※ 수도행정과-6568 (폐기물) ※ 수도행정과-6707 (GIS-DB)	‛19. 8. 16.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 국동 남초교 일원 노후관로 교체공사 등 착공 ※ 상수도과-17813 (토목) ※ 상수도과-17814 (폐기물처리) ※ 상수도과-17815 (GIS DB)	‛19. 9. 25.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 국동 남초교 일원 노후관로 교체공사 기성금 지급 ※ 수도행정과-551	‛20. 1. 17.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관

○ 국동 남초교 일원 노후관로 교체공사 준공 ※ 수도행정과-551	‛20. 1. 17.	오정환 과장 김승주 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 흥화@ 일원 노후관로 교체공사 등 계약의뢰 ※ 상수도과-14665 (토목, 폐기물) ※ 상수도과-14664 (GIS DB)	‛19. 8. 7.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 문수동 흥화@ 일원 노후관로 교체공사 및 폐기물처리용역 계약체결 ※ 수도행정과-7297	‛19. 9. 18.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 문수동 흥화@ 일원 노후관로 교체공사 등 착공 ※ 상수도과-17810 (관로교체) ※ 상수도과-17684 (폐기물처리)	‛19. 9. 25.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 문수동 흥화@ 일원 노후관로 교체공사 GIS-DB 구축 용역 착수 ※ 수도행정과-7760	‛19. 10. 2.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 남면 금오도 정수장 계통 유수율 향상 검토방안 및 추진계획수립 ※ 상수도과-15903	‛19. 8. 26.	강 균 과장 주영길 팀장 김준권 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 일상감사 완료 ※ 감사담당관-834	‛20. 1. 31.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 계약심사 완료 ※ 회계과-16445	‛20. 3. 24.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관

○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 시행 및 계약의뢰 ※ 상수도과-6549	‛20. 4. 1.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 착공 (토목, GIS, 전기ㆍ계측, 폐기물처리) ※ 상수도과-9841	‛20. 5. 21.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 기술자문 완료 (토목) ※ 상수도과-2771	‛21. 2. 8.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 일상감사 완료 ※ 감사담당관-1543	‛21. 3. 5.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 계약심사 완료 ※ 상수도과-6576	‛21. 4. 2.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 계약의뢰 ※ 상수도과-6576	‛20. 4. 6.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 시행 및 계약의뢰 ※ 상수도과-6549	‛20. 4. 1.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사 착공 (토목, GIS, 전기ㆍ계측, 폐기물처리) ※ 상수도과-9841	‛20. 5. 21.	강 균 과장 주영길 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 기술자문 완료 (토목) ※ 상수도과-2771	‛21. 2. 8.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관

○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 계약심사 완료 ※ 상수도과-6576	‛21. 4. 2.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 계약의뢰 ※ 상수도과-6576	‛21. 4. 6.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 기술자문 심의 요청 ※ 상수도과-3750	‛21. 2. 23.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 일상감사 완료 ※ 상수도과-9716	‛21. 5. 18.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 계약심사 완료 ※ 상수도과-10301	‛21. 5. 28.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 계약의뢰 ※ 상수도과-10433	‛21. 5. 31.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 착공(착수) ※ 상수도과-12390(GIS-DB) ※ 상수도과-12454(노후관 교체) ※ 상수도과-12455(폐기물 처리)	‛21. 6. 28.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 GIS-DB구축 선금 지급 ※ 수도행정과-6986	‘21. 6. 28.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 선금 지급 ※ 수도행정과-6974	‛21. 6. 29.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관

○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 GIS-DB구축 용역 착수 ※ 상수도과-9370	‛21. 5. 12.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 착공 ※ 상수도과-10821	‛21. 6. 4.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 폐기물 처리 용역 착수 ※ 상수도과-11143	‛21. 6. 9.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 선금 지급 ※ 수도행정과-6167	‛21. 6. 10.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 폐기물 처리 용역 선금 지급 ※ 수도행정과-6643	‛21. 6. 22.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도 직포마을 노후관로 교체공사 준공 ※ 상수도과-12533(노후관 교체) ※ 상수도과-12536(폐기물 처리 용역)	‛21. 6. 22. ‛21. 6. 29.	오정환 과장 김기흥 팀장 문태영 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 일상감사 완료 ※ 감사담당관-5774	‛21. 7. 28.	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 외 2건 일시정지 통보 ※ 수도행정과-9692	‘21. 8. 30	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 계약심사 완료 ※ 회계과-44726	‛21. 9. 1.	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 계약의뢰 ※ 상수도과-18270	‛21. 9. 16.	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 수도행정과-12175	‘21.10.27.	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 외 2건 일시정지 해지 및 변경계약 사항 통보 ※ 수도행정과-21316	‘21.11.2.	오정환 과장 황용순 팀장 박채훈 주무관
○ 학용정수장계통 블록시스템 정비 및 유수율 성과 검증 결과보고 ※ 상수도과-24228	‘21.12.9.	김지선 단장 오정환 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 외 5건 감독공무원 변경 알림 ※ 수도행정과-377	‘22.1.11.	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-6903	‘22.1.21	김지선 단장 이돈주 과장 주영근 과장 송향자 팀장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 폐기물 처리 용역 선금 지급 ※ 수도행정과-2042	‘22.2.17	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(2단계) 시행계획 보고 ※ 상수도과-4427	‘22.2.18	박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 과장 주영근 과장 송향자 팀장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(2단계) 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-2746(계약체결 및 감독공무원 지정) ※ 상수도과-4961(계약의뢰)	‘22.3.3	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(2단계) 선금 지급 ※ 수도행정과-3030	‘22.3.11	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 설계변경 검토 보고(2회) ※ 상수도과-11234	‘22.5.16	김지선 단장 이돈주 과장 주영근 과장 송향자 팀장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 남면 안도, 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 변경 계약의뢰 ※ 상수도과-11247(설계변경 검토보고) ※ 상수도과-11375(변경 계약의뢰)	‘22.5.17	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 물가변동에 따른 계약금액 조정 ※ 수도행정과-940(조정 검토보고 접수) ※ 상수도과-11771(조정 검토보고) ※ 상수도과-11825(승인통보)	‘22.5.24	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 설계변경 검토 보고(3회) ※ 상수도과-12204	‘22.5.27	김지선 단장 이돈주 과장 주영근 과장 송향자 팀장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 학동 공동구 상수관로 급수체계 개선공사 실시설계 용역 계약의뢰 ※ 상수도과-12559(계약의뢰) ※ 상수도과-12451(시행)	‘22.6.2.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신@ 일원 노후관로 교체공사 (1단계) 일시정지 의뢰 ※ 상수도과-13160(일시정지 검토보고) ※ 상수도과-13177(계약의뢰)	‘22.6. 10.	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 GIS-DB 용역 일시정지 의뢰 ※ 상수도과-13364(일시정지 검토보고) ※ 상수도과-13473(계약의뢰)	‘22.6. 14.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사 준공 ※ 수도행정과-7424(준공검사공무원 지정) ※ 상수도과-14123(준공계 접수)	‘22.6. 17.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 남면 안도 직포마을 노후관로 교체공사(2단계) 준공 ※ 수도행정과-7406(준공검사공무원 지정) ※ 상수도과-14549(준공계 접수)	‘22.6. 27.	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(1차분) 기성금(1회) 지급 ※ 수도행정과-7543	‘22.6. 30.	주영근 과장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 관급자재 대금 환수 요청 ※ 상수도과-15395	‘22. 7. 6.	주영근 과장 송향자 팀장 황용순 팀장 양인석 주무관
○ 2022년 여수시 돌산읍 누수탐사용역 일상감사 ※ 상수도과-21123(요청) ※ 감사담당관-7657(통보)	‘22. 9. 16.	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 2022년 여수시 돌산읍 누수탐사용역 계약심사 ※ 상수도과-21385(요청) ※ 회계과-44959(통보)	‘22. 9. 19.	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 2022년 여수시 돌산읍 누수탐사용역 계약의뢰 ※상수도과-21628(요청)	‘22. 9. 22.	주영근 과장 황용순 팀장 정준호 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 일상감사 ※ 상수도과-22311(요청) ※ 감사담당관-8075(통보)	‘22. 9. 30.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 계약심사 ※ 상수도과-24024(요청) ※ 회계과-51148(통보)	‘22. 10. 21.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 2022년 여수시 돌산읍 누수탐사용역 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-12636	‘22. 11. 1.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-14762	‘22. 12. 21.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 설계변경 및 일시정지 해지 검토보고 ※ 상수도과-28757	‘22. 12. 20.	정기명 시장 박현식 부시장 한광민 단장 조계윤 과장 장내근 팀장 주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사 등 4건 변경계약 ※ 상수도과-28848(의뢰) ※ 수도행정과-14865(체결)	‘22. 12. 20.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(1차분) 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 상수도과-28757	‘22. 12. 30.	주영근 과장 황용순 팀장 박철성 주무관
○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사 실시설계 용역 일상감사 ※ 상수도과-904(제출) ※ 감사담당관-450(통보)	‘23. 1. 11.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사 계약심사 ※ 상수도과-1349(제출) ※ 감사담당관-618(통보)	‘23. 1. 16.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사 실시설계 용역 계약체결 ※ 수도행정과-1834(통보)	‘23. 2. 13.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 실정보고 제출 ※ 상수도과-11575(제출) ※ 상수도과-12858(설계사의견)	‘23. 5. 10.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄 및 2차분) 변경계약 ※ 수도행정과-7429(통보)	‘23. 6. 15.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄 및 2차분) 준공 ※ 상수도과-15025(접수) ※ 수도행정과-7606(준공공무원 지정)	‘23. 6. 19.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 실정보고 승인 ※ 상수도과-16036	‘23. 6. 29.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 학동 수자원공사 일원 노후관로 교체공사 실시설계 용역 준공 ※ 상수도과-16490(접수) ※ 수도행정과-8549(준공공무원 지정)	‘23. 7. 4.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 2022년 여수시 돌산읍 누수탐사용역 준공 ※ 상수도과-16552(접수) ※ 수도행정과-8591(준공공무원 지정)	‘23. 7. 5.	김정남 과장 유재영 팀장 박철성 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 외2건 변경계약 통보 ※수도행정과-16487(통보)	‘23. 12. 26.	김정남 과장 유재영 팀장 서영표 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 외1건 변경계약(2회) 통보 ※수도행정과-1223(통보)	‘24. 1. 24.	장현철 과장 전명수 팀장 서영표 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(1차분)준공공사 공무원 지정 통보 ※수도행정과-1522(통보)	‘24. 1. 30.	장현철 과장 전명수 팀장 서영표 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 수도행정과-1922(통보)	‘24. 2. 7.	장현철 과장 전명수 팀장 서영표 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분) - 선금 지급 결정 통보 ※ 수도행정과-3711(통보)	‘24. 3. 18.	장현철 과장 전명수 팀장 서영표 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사 – 감독공무원 변경 알림 ※ 수도행정과-9303(통보)	‘24. 7. 12.	이광재 과장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분)-설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-18141	‘24. 8. 6.	김문환 단장 박영춘 과장 이광재 과장 정은성 팀장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄,2차분) –변경계약 통보 ※ 수도행정과-12210(통보)	‘24. 9. 10.	이광재 과장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분) 실정보고 승인 ※ 상수도과-23871	‘24. 10. 14.	이광재 과장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분)-기성(1차)검사 통보 ※ 수도행정과-13658(통보)	‘24. 10. 16.	이광재 과장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분)-기성금(1차) 결정 알림 ※ 수도행정과-14071(통보)	‘24. 10. 22.	이광재 과장 전명수 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(2차분)-기간연장 ※ 2025. 1. 8. : 기간연장 검토 ※ 2025. 1.10. : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 1.16. : 변경계약 체결	‘25. 1. 16.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 최상록 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄 및 2차분)-설계변경 검토 보고(2회) ※ 2025. 1.21. : 설계변경 검토 ※ 2025. 1.22. : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 2.10. : 변경계약 체결	‘25. 2. 10.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 최상록 팀장 정용웅 주무관
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로 교체공사(총괄 및 2차분)-준공 ※ 2025. 2. 21. : 준공계 접수	‘25. 2. 21.	이광재 과장 최상록 팀장 정용웅 주무관