정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수 원도심권 하수관로 정비사업
② 추진배경	원도심권의 기존 합류식 하구관거로 인해 연안오염 및 악취발생에 따른 민원이 빈번하여 연안오염 예방과 악취민원 해소 및 생활환경 개선을 위해 하수관로 정비공사 추진
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 서교, 고소, 미평, 신월동 등 ○ 사 업 량 : 관로 신설 L=16.1㎞, 배수설비 1식 ○ 사 업 비 : 25,374백만 원 ○ 사업기간 :‘18. 2. ~‘24. 4. - 실시설계용역 ㆍ 용 역 비 : 690백만 원 ㆍ 용역기간 :‘18. 2. ~‘20. 3.
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자	시설7급 위성현 시설5급 윤대근
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	‘18. 2. ~‘24. 4.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업수행능력평가 위원회 구성 및 운영 ※ 하수도과-969호		‘18. 1.16.	정종태 국장 박성재 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 ※ 하수도과-1928호		‘18. 1.31.	박성재 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약체결 ※ 하수도과 -2960호		‘18. 2.18.	정종태 국장 박성재 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ 대상구역 선정 평가 위원회 개최 ※ 하수도과 -18130호		‘18.10. 5.	정종태 국장 심근하 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관

○ 실정보고 승인(노선측량 등) ※ 하수도과-23022호	‘18.12.27.	고재영 부시장 정종태 국장 심근하 과장 윤대근 팀장 박상진 주무관
○ VE용역 계약 ※ 하수도과-1292호	‘19.1.22.	심근하 과장 김용만 팀장 홍경안 주무관
○ VE용역 준공	‘19.3.28.	심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설계안전성 검토용역 계약 ※ 하수도과-6354호	‘19.4.1.	심근하 과장 김용만 팀장 홍경안 주무관
○ 설계안전성 검토용역 준공	‘19.7.18.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 건설기술심의 ※ 전라남도 지역경제과-3932호	‘19.9.30.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 지방건설기술심의 조치계획서 제출 ※ 하수도과-22045호	‘19.11.8.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 재원협의 및 설계자문 요청 ※ 하수도과-22380호	‘19.11.13.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 통합건설사업관리용역 계약의뢰 ※ 하수도과-23156호	‘19.11.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 건설사업관리(총괄 및 1차분) 계약체결 ※ 하수도과-24305호	‘19.12.9.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 설치인가에 따른 협의 ※ 하수도과-25669호	‘19.12.24.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설계자문 및 재원협의 검토의견 조치계획서 제출 ※ 하수도과-25768호 ※ 하수도과-25769호	‘19.12.26.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관

○ 재원협의 및 총사업비 변경 결과 알림 ※ 하수도과-784호	‘20.01.14.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설치인가에 따른 협의 ※ 하수도과-807호	‘20.01.14.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 일상감사 요청 ※ 하수도과-3135	‘20.02.19.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설치인가에 따른 신청서 제출 ※ 하수도과-3155호	‘20.02.19.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 총괄 및 1차분 시행 ※ 하수도과-3391호	‘20.02.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 강성욱 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 하수도과-3867호	‘20.02.27.	정윤수 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 계약심의 요구서 검토보고 ※ 하수도과-4153호	‘20.03.02.	정윤수 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 계약심의위원회 심의 요청 ※ 하수도과-4177호	‘20.03.03.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 공공하수도 설치인가 신청 ※ 하수도과-4176호	‘20.03.03.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 농지보전부담금 납부 ※ 하수도과-4329호	‘20.03.04.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ GIS DB 구축 용역 계약심사 의뢰 ※ 하수도과-4399호	‘20.03.05.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원가심사 의뢰 요청 ※ 하수도과-4519호	‘20.03.06.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 일상감사 조치계획 제출 ※ 하수도과-4927호	‘20.03.12.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관

○ 공공하수도 설치 인가 사항 알림 ※ 하수도과-5545호	‘20.03.20.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 폐기물처리용역 계약심사 요청 ※ 하수도과-6192호	‘20.03.30.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 수밀 및 CCTV조사 용역 계약심사 요청 ※ 하수도과-7762호	‘20.04.21.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ GIS DB 구축 용역 계약심사 재의뢰 ※ 하수도과-9414호	‘20.05.18.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비공사총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 하수도과-9413호 ○ 폐기물처리용역 총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 하수도과-9417호 ○ 수밀시험 및 CCTV조사용역 총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 하수도과-9416호	‘20.05.18.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ GIS DB 구축 용역 총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 하수도과-9960호	‘20.05.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 1차분 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-10894호	‘20.06.05.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비공사 추진계획 알림 및 업무 협조 요청 ※ 하수도과-12785호	‘20.07.01.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비공사 낙찰자 결정 알림 ※ 하수도과-13218호	‘20.07.07.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 벌점 총괄표(건설기술용역사업자) 통보(원도심권 통합건설관리 용역) ※ 하수도과-13322호	‘20.07.08.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-13536호	‘20.07.10.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관

○ 원도심권 하수관로 정비공사 착공 알림 ※ 하수도과-13639호	‘20.07.13.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 건설사업관리기술인(토목분야) 투입 승인 ※ 하수도과-15524호	‘20.08.05.	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-17318호 ○ 공정관리 계획서 검토 결과 알림 ※ 하수도과-17319호 ○ 검측업무 작성 수립계획 승인 알림 ※ 하수도과-17321호	‘20.08.31.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 품질관리자 변경 승인 알림 ※ 하수도과-17577호	‘20.09.03.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 책임건설사업관리기술인 변경 승인 알림 ※ 하수도과-18006호	‘20.09.09.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수도 실시설계용역 외 3건 건설기술용역 평가 계획 보고 ※ 하수도과-18198호	‘20.09.10.	정윤수 단장 최홍식 과장 황규석 팀장(협조) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 사토 발생에 따른 사용여부 조회 ※ 하수도과-18642호	‘20.09.16.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 건설사업관리용역 실정보고 검토 ※ 하수도과-18679호	‘20.09.17.	정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 건설사업관리용역 실정보고 승인사항 알림 ※ 하수도과-18695호	‘20.09.17.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 도로점용(일시점용)허가 신청 ※ 하수도과-18715호	‘20.09.17.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 안전관리계획서 검토 계획 ※ 하수도과-19683호	‘20.10.05.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 안전관리계획서 검토 의뢰 ※ 하수도과-19830호	‘20.10.07.	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수도 실시설계용역 외 3건 건설기술용역 평가 의뢰 ※ 하수도과-21294호	‘20.10.29.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 품질관리자 변경 승인 알림 ※ 하수도과-22010호	‘20.11.09.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 설계도서 검토내용 의견서 제출 요청 ※ 하수도과-22009호	‘20.11.09.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 안전관리계획서 검토 결과 알림 ※ 하수도과-22025호	‘20.11.09	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 분류식 하수관로 보급을 위한 원도심권 하수관로 정비사업 추진안내 ※ 하수도과-23308호	‘20.11.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 하도급 적정성 검토보고 ※ 하수도과-23676호 ○ 하도급 계약관련 적정여부 알림 ※ 하수도과-23678호 ○ 하도급관리계획서(변경) 적정여부 알림 ※ 하수도과-23699호	‘20.12.01.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 안전관리계획서 검토 보완에 따른 재검토 요청 ※ 하수도과-24447호	‘20.12.10.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 안전관리계획서(보완) 검토 결과 통보 ※ 하수도과-24981호	‘20.12.17.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비사업 고소동일원 추진일정 안내 ※ 하수도과-25076호	‘20.12.18.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 현장실정에 대한 요약보고 ※ 하수도과-25148호	‘20.12.21.	최홍식 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 실정보고(사토장 위치 등) 승인사항 알림 ※ 하수도과-25160호	‘20.12.21.	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ GIS DB구축 용역(총괄 및 1차분) 공공측량 성과심사 의뢰(중간심사) ※ 하수도과-25637호	‘20.12.28.	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 강성욱 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비공사 2차분 시행 ※ 하수도과-3129호	‘21.02.16.	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 이영호 과장 이돈주 과장 조정선 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 매장문화재 발견신고 ※ 하수도과-3391호	‘21.02.19.	이영호 과장 조정선 팀장 강성욱 차장
○ 현장실정(매장문화재)에 대한 요약보고 ※ 하수도과-5813호	‘21.03.23.	서은수 부시장 김지선 단장 지홍섭 팀장 이돈주 과장 조정선 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 실정보고(매장문화재) 승인사항 알림 ※ 하수도과-5849호	‘21.03.23.	지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 강성욱 차장
○ 실정보고(새뜰마을 변경 등) 승인사항 알림 ※ 하수도과-7352호	‘21.04.12.	이영호 과장 조정선 팀장 강성욱 차장
○ 분야별 건설사업관리 기술인 변경 승인 알림 ※ 하수도과-10771호	‘21.05.27.	이영호 과장 조정선 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 현장실정(지장물이성 및 소운반 등)에 대한 보고 ※ 하수도과-18708호	‘21.09.10.	김지선 단장 이돈주 과장(협조) 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사(3차분) 및 폐기물처리 용역 등(2차분) 시행 ※ 하수도과-19981호	‘21.09.27.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 과장(협조) 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 하도급 계약 적정성 검토보고 ※ 하수도과-20047호	‘21.09.30.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 현장관리 철저요청 ※ 하수도과-20304호	‘21.10.05.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 관련 협조요청(여서동 텃골마을) ※ 하수도과-20462호	‘21.10.07.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 관련 협조요청 ※ 하수도과-20564호	‘21.10.08.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 1, 2차분 공기연장 요청 ※ 하수도과-21041호	‘21.10.15.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 도급업체 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 하수도과-23850호	‘21.11.23.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 품질관리자 변경 승인 알림 ※ 하수도과-25091호	‘21.12.07.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 및 마을하수도 통합건설사업관리 용역 3차분 시행 ※ 하수도과-2106호	‘22.01.27.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이영호 과장 이돈주 과장 이재태 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 4차분 시행 ※ 하수도과-5323호	‘22.03.15.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이영호 과장 이돈주 과장 이재태 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 4차분 관급자재 심의 요청 ※ 하수도과-9435호	‘22.05.04.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 현장실정ES 1회, 2회 검토 ※ 하수도과-12180호	‘22.06.13.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이영호 과장 이재태 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 현장실정(여서동정산 등)에 대한 요약보고 ※ 하수도과-13425호	‘22.06.29.	김지선 단장 이영호 과장 이재태 팀장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 등 계약기간 변경의뢰 ※ 하수도과-13776호	‘22.07.04.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 실정보고(ES, 여서동정산 등)승인사항 알림 ※ 하수도과-13777호	‘22.07.04.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 품질관리자 변경 승인 알림 ※ 하수도과-14117호	‘22.07.06.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사(4치분) 품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-15214호	‘22.07.21.	이영호 과장 이재태 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사건설기계 사용 승인 ※ 하수도과-17187호	‘22.08.19.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사설계변경에 대한 요약보고 ※ 하수도과-17426호	‘22.08.23.	한광민 단장 이영호 과장 주원평 팀장 조계윤 과장 송향자 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사건설기계 사용 승인 ※ 하수도과-17985호	‘22.08.31.	조균익 팀장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사차수별 조정에 따른 예정공정표 승인 ※ 하수도과-19371호	‘22.09.21.	조균익 팀장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사폐기물처리용역 물가변동 사항 승인 알림 ※ 하수도과-19487호	‘22.09.22.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-19855호	‘22.09.28.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사실정보고 사항 승인 알림 ※ 하수도과-19898호	‘22.09.28.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사공사기간 변경에 따른 인력배치 변경 승인 알림 ※ 하수도과-19906호	‘22.09.28.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사노후 상하수도 시설 교체 검토 요청 ※ 하수도과-23367호	‘22.11.27.	한광민 단장 황용순 팀장, 주영근 과장 (협조) 이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 예정공정표 변경에 따른 승인 알림 ※ 하수도과-24105호	‘22.11.29.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 하도급관리계획서(변경알림) ※ 하수도과-24316호	‘22.12.01.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 하도급업체 계약변경 승인 알림 ※ 하수도과-24632호	‘22.12.06.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-25133호	‘22.12.13.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비공사 GIS DB 구축용역(2차분) 공공측량 성과심사 의뢰(중간심사) ※ 하수도과-24468호	‘22.12.28.	이영호 과장 주원평 팀장 강성욱 차장
○ 원도심권 하수관로 정비 통합건설사업관리(총괄분) 변경 및 4차분 계약의뢰 ※ 하수도과-671호	‘23.1.10.	주영근 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 실정보고 승인(노후 상수관교체) ※ 하수도과-4938호	‘23.3.13.	주영근 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 실정보고 승인(노후 수로박스교체) ※ 하수도과-5566호	‘23.3.21.	주영근 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 분야별 건설사업관리기술인(토목) 변경 승인 요청에 대한 회신 ※ 하수도과-6087호, 6147호(승인알림)	‘23.3.27.	주영근 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비공사 계약금액 집행 및 작업 계획 수립 제출 지시 ※ 하수도과-6364호	‘23.3.29.	주영근 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 현장실정 보고 (관로추진공법 변경 외 2건) ※ 하수도과-7179호, 7208호(알림)	‘23.4.10.	김태횡 단장 주영근 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 현장실정 보고 (해태@일원 시공수량 정산 외 4건) ※ 하수도과-9626호, 9632호(알림)	‘23.5.11.	김태횡 단장 주영근 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 현장실정 보고 (대도맨션 인근 사업추가) ※ 하수도과-10321호, 10327호(알림)	‘23.5.22.	김종기 부시장 김태횡 단장 주영근 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 원도심권 하수관로 정비 설계변경 (총괄 3회, 3차 3회, 4차 3회, 관련용역 4건) ※ 하수도과-10321호, 10327호(알림)	‘23.6.13.	김태횡 단장 주영근 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 현장실정에 대한 보고 (원도심권 하수 관로 정비공사 중계펌프장 연결관로 공법 변경) ※ 하수도과-14834호 14838호(승인)	‘23.7.18.	배도선 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 품질시험 변경계획서(3최) 승인 통보 (원도심권 하수관로 정비공사 3차,4차분) ※ 하수도과-16567호	‘23.8.9.	배도선 과장 주원평 팀장 위성현 주무관
○ 공사기간 연장 검토보고 (원도심권 하수관로 정비공사 총괄 및 4차분) ※ 하수도과-21567호	‘23.10.26.	김종기 부시장 오정환 단장 배도선 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 현장실정 검토보고 (해태아파트 인근 우수관 이설공사 정산 외 1건) ※ 하수도과-25023호	‘23.12.13.	배도선 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관
○ 현장실정 검토보고 (대도맨션 인근 시공수량 정산 외 5건) ※ 하수도과-25633호	‘23.12.20.	배도선 과장 주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 위성현 주무관