중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	오천동 주민생활도로 개설(완료)
② 추진배경	도시계획도로 개설로 주민생활환경 개선 및 주민 교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 오천동 342-1번지 일원 ○ 사 업 량 : 도로개설 L=630m, B= 8m ○ 사 업 비 : 5,370백만 원(공사비 2,025, 보상 및 기타 3,345)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설6급 최상록 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘19. 10. ~‘21. 4.
<그간 주요 추 진내용>
○ 실시설계용역 완료		‘05. 2.17.		명성인 과장 손재규 팀장 김태용 주무관
○ 도시계획시설사업(도로) 실시 계획 인가		‘14. 3.14.		김영옥 과장 조장훈 팀장 박성 주무관
○ 편입토지 등 손실보상 계획 수립 ※ 도로과-4545, 8802호		‘17. 4.17. (7.31.)		조일수 국장 문태선 과장 김용우 회계과장 윤석호 계약1팀장 이종창 팀장 박규연 주무관
				조일수 국장 김기채 과장 김재진 계약심사팀장 윤석호 계약1팀장 이돈주 팀장 박규연 주무관
○ 실태조사 계획 수립 ※ 도로과-3079호		‘18. 3.22.		김기채 과장 이돈주 팀장 정상현 주무관

○ 실시설계용역 집행계획 수립 및 계약 ※ 도로과-6773, 6854호 ※ 회계과-33354호	‘18. 6.20. (7. 2.)	김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 홍주성 계약2팀장 서범규 팀장 오민주 주무관 김현식 주무관
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과-7525호	‘18. 7. 4.	김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정 (변경)신청 ※ 도로과-10355호	‘18. 9.28.	문태선 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-10633호(‘18.10.25.)	‘18.10.10.	문태선 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 실태조사 및 보상협의 ※ 도로과-10812, 11506, 11562, 11563, 11898호	‘18.10.25. ~ 11. 6.	문태선 과장 손용봉 팀장 유정헌 주무관
○ 실태조사 및 보상협의 ※ 도로과-12084호	‘18.11. 6.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김숙진 실무원
○ 손실보상비 집행 ※ 도로과-3024호	‘19. 3. 11.	김기채 국장 박은규 과장 서유권 과장 오병구 팀장 이재종 팀장 한성민 실무원
○ 공사시행 ※ 도로과-9425호	‘19. 7. 30.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-12760호	‘19.10.16.	서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 공사착공 ※ 도로과-12779호	‘19.10.16.	서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 지정폐기물 처리용역 착수 ※ 도로과-14560호	‘19.11.26.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정 의견청취 처리검토 ※ 도로과-15335호	‘19.12.12.	서유권 과장 이영호 팀장 한성민 실무원 임영수 주무관
○ 실시계획(변경)인가 협의의견 조치계획(결과) 제출 ※ 도로과-15539호	‘19.12.17.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 공사 및 폐기물처리 등 일시정지 검토 ※ 도로과-15650호	‘19.12.18.	서유권 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 폐기물처리용역 등 실정보고에 따른 시행계획 검토 ※ 도로과-16035호	‘19.12.27.	고재영 부시장 장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-164호	‘20. 1. 6.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 편입토지 등에 대한 잔여지 손실보상비 집행 ※ 도로과-1842호	‘20. 2. 10.	장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이덕연 팀장 배 경 실무원
○ 공사 및 폐기물처리용역 등 일시정지 해지 의뢰 및 해지 통보 ※ 도로과-2238호, 회계과-11576호	‘20. 2. 20. ‘20. 3. 3.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축 용역 계약 의뢰 ※ 도로과-4950	‘20. 4. 10.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 계약체결 및 감독 공무원 지정 알림 ※ 도로과-5318	‘20. 4. 20.	박은규 과장 손하진 팀장 정일권 팀장 임영수 주무관 정선영 주무관
○ 착수계(오천동 주민생활도로 개설공사 지하시설물 GIS DB 구축 용역) ※ 도로과-5556	‘20. 4. 23.	정일권 팀장 임영수 주무관
○ 지정폐기물 철거공사 등 6건 변경계약 의뢰 ※ 도로과-7745	‘20. 6. 11.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 편입토지의 잔여지 손실보상비 집행 ※ 도로과-9871	‘20. 7. 24.	강 균 과장 조계윤 과장 김미옥 팀장 김희신 팀장 배 경 실무원
○ 보안등 이설공사 계약의뢰 ※ 도로과-10863	‘20. 8. 18.	강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 착공계(오천동 주민생활도로 보안등 이설공사) ※ 도로과-11394	‘20. 8. 28.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 오천동 주민생활도로 개설공사 편입토지 등에 대한 소유권이전 등기수수료 집행 ※ 도로과-14077	‘20. 11. 3.	강 균 과장 조계윤 과장 이영호 팀장 손하진 팀장 김희신 팀장 배 경 실무원
○ 착공계(오천동 주민생활도로 개설공사 2차분) ※ 도로과-14998	‘20. 11. 25.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 제1회 기성 검사원 제출 건(오천동 주민생활도로 개설공사) ※ 도로과-16196	‘20. 12. 23.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 오천동 주민생활도로 개설공사 지정폐기물 철거공사 준공계 제출 ※ 도로과-1153	‘21. 1. 27.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 오천동 주민생활도로 개설공사 지정폐기물 처리용역 완료계 ※ 도로과-1517	‘21. 2. 24.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 오천동 주민생활도로 개설공사 (1차분) 준공계 ※ 도로과-3424	‘21. 3. 23.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 오천동 주민생활도로 개설공사 (2차분) 준공계 ※ 도로과-4052	‘21. 4. 5.	강 균 과장 정준호 주무관