정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산읍 신기마을 하수도 시설공사
② 추진배경	농어촌지역에서 발생된 생활하수를 적정 처리하여 남해안의 적조발생 예방 및 청정해역 보존
③ 사업개요	○ 사업목적 : 농어촌거주 주민들의 생활환경 개선 ○ 위 치 : 돌산읍 신기마을 ○ 사 업 비 : 4,280백만 원(국비 2,996 시비 1,284) ○ 사업내용 : 하수처리장 Q=120㎥/일, 관로 2.5㎞
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자		시설8급 문홍주 시설5급 이영호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘21.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 추진 방침 ※ 하수도과-1381호		‘17. 1.18.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 국장 김기채 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약의뢰 ※ 하수도과-5494호		‘17. 3.21.		김기채 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 하수도시설 설치인가 협의 ※ 하수도과-7517호		‘18. 4.23.		박성재 과장 윤대근 팀장 고영란 주무관
○ 재원협의 및 총사업비 변경 ※ 수질총량관리과-6042호		‘18. 9. 6.		심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관

○ 계약심사 요청 ※ 하수도과-19251호	‘18.10.25.	심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 공공하수도 설치인가 신청 ※ 하수도과-19686호	‘18.11.01	심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 시행계획 ※ 하수도과-19743호	‘18.11.02.	권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 단장 심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 계약체결 의뢰 ※ 하수도과-20239호	‘18.11.12.	심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 계약체결 및 착공 ※ 하수도과-21297호	‘18.11.29.	정종태 단장 심근하 과장 박태열 팀장 우희원 주무관
○ 공사(전기) 발주계획 ※ 하수도과-1827호	‘19. 1.30.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 계약 의뢰(전기 및 계측제어) ※ 하수도과-2222호	‘19. 2.11.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 계약체결(전기) 및 착공 ※ 하수도과-4638호	‘19. 3.12. (‘19. 3.18.)	심근하 과장 김용만 팀장 정일석 팀장 홍경안 차장 김대성 주무관 윤선태 주무관
○ 건설폐기물 처리 신고서 제출 ※ 하수도과-6036호	‘19. 4. 1.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 폐기물처리용역 계약 해제·해지 통지 ※ 하수도과-11266호	‘19. 6.17.	심근하 과장 김용만 팀장 홍경안 차장
○ 폐기물처리용역 정산서류 제출 요청 ※ 하수도과-13282호	‘19. 7.12.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 폐기물처리용역 계약체결 ※ 하수도과-16976호	‘19. 9. 3.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관

○ 처리장 위치변경 검토보고 ※ 하수도과-17088호	‘19. 9. 5.	김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 하수도과-20624호	‘19.10.23.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 현장 실정보고 검토 ※ 하수도과-22287호	‘19.11.12.	고재영 부시장 김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 실정보고 승인사항 알림 ※ 하수도과-22320호	‘19.11.13.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 기성검사공무원 지정 통보 ※ 하수도과-22972호	‘19.11.21.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 1회 기성대가 확정 알림 ※ 하수도과-23274호	‘19.11.26.	김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 지적(분할)측량 수수료 집행 ※ 하수도과-23337호	‘19.11.26.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 지적공부정리 신청 ※ 하수도과-23424호	‘19.11.27.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 일시정지 검토 ※ 하수도과-23779호	‘19.11.29.	김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 1차분, 폐기물처리 용역 일시정지 요청 ※ 하수도과-23785호	‘19.12.02.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 폐기물처리용역 일시정지 ※ 하수도과-23808호	‘19.12.02.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관

○ 총괄 및 1차분 일시정지 ※ 하수도과-23807호	‘19.12.02.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 전기공사 일시정지 검토 ※ 하수도과-24078호	‘19.12.05.	김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 전기공사 일시정지 요청 ※ 하수도과-24110호	‘19.12.05.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 전기공사 일시정지 통보 ※ 하수도과-24134호	‘19.12.05.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 설계변경 용역 시행 검토 ※ 하수도과-256호	‘20.01.06.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계변경 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-305호	‘20.01.07.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 산림조사 의뢰 ※ 하수도과-3361호	‘20.02.20.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설치 변경인가에 따른 협의 ※ 하수도과-5931호	‘20.03.25.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설치 변경인가에 따른 협의(수정) ※ 하수도과-6202호	‘20.03.30.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-6293호	‘20.03.31.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소하천 점용허가신청서 제출 ※ 하수도과-7859호	‘20.04.22.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 산지전용허가 요청 ※ 하수도과-7950호	‘20.04.23.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 처리장 위치 변경에 따른 설계변경 자료 통보 ※ 하수도과-8533호	‘20.05.04.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 신기마을 하수도 시설공사 설치인가(변경) 신청 ※ 하수도과-12864호	‘20.07.01.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 도로점용(굴착) 허가 신청 ※ 하수도과-13116호	‘20.07.06.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 산지전용허가 보완서류 제출 ※ 하수도과-13115호	‘20.07.06.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 대체산림자원조성비 납부 ※ 하수도과-14066호	‘20.07.16.	최홍식 과장 김동석 과장(협조) 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 1차분 일시정지 해지 및 설계변경(1회) 검토 ※ 하수도과-15941호	‘20.08.10.	김용필 국장(대결) 오정환 과장(대결) 최홍식 과장 백동선 팀장(협조-대결) 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 외 1건 일시정지 해지 및 변경계약 요청 ※ 하수도과-15955호	‘20.08.11.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 일시정지 해지 및 설계변경(1회) 알림 ※ 하수도과-16074호	‘20.08.12.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 현장 실정보고 검토 ※ 하수도과-16455호	‘20.08.19.	정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 실정보고 승인사항 알림 ※ 하수도과-16456호	‘20.08.19.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 정보 비공개 결정 통보 ※ 하수도과-18007호	‘20.09.09.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 수밀시험 및 CCTV조사 용역 계약심사 의뢰 ※ 하수도과-18878호	‘20.09.20.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 추진 관련 민원사항 알림 ※ 하수도과-19638호	‘20.10.02.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축 용역 시행 ※ 하수도과-19669호	‘20.10.05.	최홍식 과장 김동석 과장(협조) 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 수밀시험 및 CCTV조사 용역 시행 ※ 하수도과-19662호	‘20.10.05.	정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 반복 및 중복민원 종결 처리 검토 ※ 하수도과-19810호	‘20.10.07.	정윤수 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ CCTV조사 및 수밀시험 용역 등 2건 계약의뢰 ※ 하수도과-20239호	‘20.10.14.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 (1차분) 관급자재(철근) 변경계약 요청 ※ 하수도과-20237호	‘20.10.14.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 출장결과보고서(신기마을 민원관련 주민 회의 참석) ※ 하수도과-20539호	‘20.10.19.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 도로점용(굴착)허가 변경 요청 ※ 하수도과-21159호	‘20.10.28.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 물가변동 검토 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-21287호	‘20.10.29.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(1차분) 하도급 변경 계약 검토결과 알림 ※ 하수도과-21368호	‘20.10.29.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 건축협의 요청 ※ 하수도과-21663호	‘20.11.02.	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 고충민원 관련 자료제출 ※ 하수도과-22505호	‘20.11.09.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 1차분 기간연장 검토 ※ 하수도과-23691호	‘20.11.27.	정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 강성욱 주무관(협조) 김동언 주무관
○ 1차분 관급자재(GRP펌프장 맨홀) 구입 요청(수정) ※ 하수도과-23782호	‘20.12.01.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사(1차분) 및 폐기물처리용역 변경계약(기간연장) 요청 ※ 하수도과-23780호	‘20.12.02.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사(1차분) 및 폐기물처리용역 변경계약체결 사항 알림 ※ 하수도과-23878호	‘20.12.03.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 ※ 하수도과-24339호	‘20.12.07.	서은수 부시장 정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토결과 회신 ※ 하수도과-24396호	‘20.12.10.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사(1차분) 하도급 계약 변경 검토 ※ 하수도과-24541호	‘20.12.10.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 전기공사 일시정지 해지 및 관급 납품기한 연장 검토보고 ※ 하수도과-24804호	‘20.12.15.	정윤수 단장 최홍식 과장 백동선 팀장(협조) 김희경 팀장(협조) 김동언 주무관(협조) 윤선태 주무관

○ 전기공사 일시정지 해지 및 납품기한 연장 요청 ※ 하수도과-24827호	‘20.12.15.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사(1차분) 하도급 계약(변경) 검토결과 제출 ※ 하수도과-24882호	‘20.12.16.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ CCTV조사 및 수밀시험 용역 현장대리인 변경 검토 ※ 하수도과-24884호	‘20.12.16.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ CCTV조사 및 수밀시험 용역 현장대리인 변경 검토결과 통보 ※ 하수도과-24935호	‘20.12.16.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(1차분) 외 1건 원인행위 재확정 계획 ※ 하수도과-522호	‘21.01.11.	김지선 단장 이돈주 과장(협조) 이영호 과장 송향자 팀장(협조) 조정선 팀장 윤선태 차장(협조) 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 현장 실정보고 및 설계변경(2회) 검토 ※ 하수도과-1774호	‘21.01.27.	서은수 부시장 김지선 단장 이돈주 과장(협조) 이영호 과장 송향자 팀장(협조) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 현장 실정보고 및 설계변경(2회) 승인사항 알림 ※ 하수도과-1836호	‘21.01.28.	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 외 1건 변경계약(2회) 요청 ※ 하수도과-2632호	‘21.02.08.	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관

○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 시행 ※ 하수도과-3189호	‘21.02.16.	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 이돈주 과장(협조) 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 계약의뢰 ※ 하수도과-3393호	‘21.02.19.	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 폐기물처리용역 계약의뢰 ※ 하수도과-3392호	‘21.02.19.	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 관련 기술사용협약 체결 ※ 하수도과-4568호	‘21.03.08.	김지선 단장 지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 관련 기술사용협약서(안) 송부 ※ 하수도과-4618호	‘21.03.08.	지홍섭 팀장(전대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-4736호	‘21.03.09.	지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 하도급 계약 검토 ※ 하수도과-5561호	‘21.03.18.	지홍섭 팀장(전대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사(2차분) 하도급 계약 검토 결과 제출 ※ 하수도과-5570호	‘21.03.19.	지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김동언 주무관

○ 총괄 및 2차분 설계변경(1회) 검토보고 ※ 하수도과-12191호	‘21.6.14.	서은수 부시장 김지선 단장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이영호 과장 조정선 팀장 윤선태 차장, 박송인차장(협조) 김동언 주무관
○ 총괄 및 2차분 설계변경(2회) 검토보고 ※ 하수도과-14540호	‘21.7.15.	이영호 과장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 2차분 설계변경 및 공기연장 검토보고 ※ 하수도과-17067호	‘21.8.19.	박현식 부시장 김지선 단장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 2차분 관급자재 및 전기공사 공기연장 검토보고 ※ 하수도과-17155호	‘21.8.20.	김지선 단장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 원도․하도급 시공계획(변경)검토 ※ 하수도과-19299호	‘21.9.16.	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 (총괄 및 2차분)실정보고 검토(Ⅲ) ※ 하수도과-21450호	‘21.10.21.	권오봉 시장 박현식 부시장 이돈주과장(대결) 송향자 팀장, 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 전기공사 공사기간 연장 및 실정보고 검토 ※ 하수도과-21662호	‘21.10.22.	이돈주과장(대결) 송향자 팀장 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 하도급계약(변경) 및 예정공정표 변경 검토 ※ 하수도과-22538호	‘21.11.4.	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 및 폐기물처리용역 변경 시행 ※ 하수도과-24660호	‘21.12.01.	김지선 단장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 실정보고(정산변경)검토보고 ※ 하수도과-26316호	‘21.12.21.	김지선 단장 송향자 팀장, 이돈주과장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 하도급계약(변경) 및 예정공정표 변경 검토 ※ 하수도과-26624호	‘21.12.24.	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 신기마을 하수도 시설공사 총괄 및 2차분 준공검사 결과보고 ※ 하수도과-26752호	‘21.12.27.	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관