정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	전라선 철도폐선부지 공원화사업
② 추진배경	KTX 운행에 따른 노선 변경으로 발생된 폐선부지를 공원조성 사업으로 복원하여 차별화된 웰빙문화 휴식공간 조성
③ 사업개요	○ 사업목적 : 전라선 옛 철길 공원조성 ○ 위 치 : 전라선 구 여수역(마래터널) ~ 구 율촌역 구간 ○ 사 업 비 : 107,700백만 원(2019년 5,000백만 원) ○ 사업내용 : 도시공원 조성 8개소, L=21.4km, A=552,280㎡ - 근린공원 : 6개소 A=456,560㎡(산책로, 자전거도로, 운동시설) - 문화공원 : 2개소 A=95,720㎡(자전거도로, 열차모형카페, 공연장)
④ 사업부서	여수시 공원과		⑤ 담당자		시설6급 김 혁 행정5급 조계윤
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘14. 1. ~‘23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 미평공원, 선원뜨레공원 조성 사업 실시계획 인가 신청서 제출		‘15. 5. 8.		김용우 과장 정종곤 팀장 최우진 주무관
○ 미평공원, 선원뜨레공원 조성 사업 실시계획 인가		‘15.10. 1.		김영옥 과장 박형욱 팀장 하인대 주무관
○ 추진방침 ※ 공원과-1906호		‘16. 2.22.		주철현 시 장 이승옥 부시장 김세곤 국장 김용우 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 철도폐선부지 공원조성 (1단계) 실시설계 완료		‘16. 3.23.		김용우 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 미평공원 조성사업 계약 의뢰 ※ 공원과-7316호		‘16. 6.22.		김용우 과장 최석원 팀장 임기형 주무관

○ 미평공원 조성사업 계약 체결	‘16. 7.26.	이경우 국장 김용우 과장 박홍상 팀장 정혜경 주무관
○ 철도폐선부지 조성사업 (미평공원/1단계) 착공	‘16. 8. 2.	장두한 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 미평공원 조성사업 준공	‘17.10.21.	김학섭 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 원학동공원~양지바름공원 (도시계획과) 착공	‘17.10.24.	장세길 과장 김문환 팀장 선명진 주무관
○ 오림터널공원 조성사업 준공	‘17.11.10.	김학섭 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 만흥공원 조성사업 준공	‘18. 1.22.	김학섭 과장 최석원 팀장 임기형 주무관
○ 전라선 옛 철길공원(1단계 2차분) 개통식 계획 ※ 공원과-9489호	‘18. 9.13.	성동범 단장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 전라선 옛 철길공원(1단계 2차분) 개통식	‘18. 9.19.	150여명(시장, 의장, 시의원, 공무원 및 지역주민)
○ 전라선 옛 철길공원 조성사업 준공 전 합동점검 결과보고 ※ 공원과-9489호	‘18.11. 2.	성동범 단장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 여수 도시계획시설사업 완료보고서 제출에 따른 준공검사 실시 ※ 공원과-13179호	‘18.12.13.	남성채 과장 유홍은 팀장 오은하 팀장

○ 전라선 옛 철길공원(선원뜨레 공원) 조성사업 실시설계(보완)용역 시행 ※ 공원과-884호	‘19. 1.29.	남성채 과장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 전라선 옛 철길공원 화장실 설치 실시설계 용역 시행 계획 ※ 공원과-1007호	‘19. 1.30.	남성채 과장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 이생욱 팀장 박정호 주무관
○ 전라선 옛 철길공원(1단계) 암반사면 정비사업 실시설계용역 시행 ※ 공원과-2028호	‘19. 2.26.	남성채 과장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 실시설계용역 집행계획 ※ 공원과-2680호	‘19. 3.12.	문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 전라선 옛 철길공원 조성사업(선원뜨레공원 역사부지 공원조성 외 1건) 시행계획 ※ 공원과-7043호	‘19. 6.10.	고재영 부시장(대결) 문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 남성채 과장 최석원 팀장 김 혁 주무관
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업(토목) 착공	‘19. 8. 1.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업(건축) 착공	‘19. 8. 9.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업(전기) 착공	‘19. 8. 9.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장

○ 2019년도 제3회 여수시 기술자문위원회 자문결과 알림(전라선 옛 철길공원 1단계 암반사면 정비사업) ※ 건설과-10588호	‘19. 8. 9.	주영근 건설과장 윤대근 지역개발팀장 백종환 주무관
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업 석면폐기물 철거공사 및 처리용역 시행 ※ 공원과-10958호	‘19. 8.28.	조계윤 과장 한숙영 계약심사팀장(대결) 오병구 계약2팀장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업 석면폐기물 철거공사 착공	‘19. 9.10.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업 석면폐기물 처리용역 착수	‘19. 9.10.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업 석면폐기물 처리용역 준공	‘19.10.17.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 기술자문위원 확인서 제출(전라선 옛 철길공원(1단계) 암반사면 정비사업) ※ 공원과-13790호	‘19.10.29.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원(원학동공원) 진입로 정비사업 시행 ※ 공원과-15147호	‘19.11.26.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장

○ 선원동 무선마을 과선교 개수공사 실시설계용역 준공	‘19.11.26.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원(1단계) 암반사면 정비사업 계약체결 의뢰 ※ 공원과-15315호	‘19.11.28.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원 조성(2단계) 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 시행 ※ 공원과-15674호	‘19.12. 5.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 조계윤 과장 최석원 팀장 유경숙 주무관
○ 전라선 옛 철길공원 (선원뜨레공원 역사부지) 조성사업 석면폐기물 철거공사 준공	‘19.12. 6.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장
○ 전라선 옛 철길공원(1단계) 암반사면 정비사업 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-66030호 ○ 전라선 옛 철길공원(1단계) 암반사면 정비사업 착공	‘19.12.18. ‘19.12.20.	조계윤 과장 최석원 팀장 김 혁 차장