중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	묘도 창촌 도로개설
② 추진배경	도시계획도로 개설로 긴급 재난대비 및 주민교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 묘도동 창촌마을일원 ○ 사 업 량 : 도로개설 L=1.2km ○ 사 업 비 : 8,044백만 원(공사비 3,994, 보상비 등 4,050)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 강성수 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘14. 1. ~‘20. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 완료		‘14. 2.21.		김영옥 과장 문태선 팀장 곽 원 주무관
○ 공사 추진방안 수립 ※ 도로과-850호		‘16. 1.25.		주철현 시장 이승옥 부시장 전동호 국장 김회근 과장 장익 팀장 강성욱 주무관
○ 공사 계약의뢰 및 체결 ※ 도로과-1607호 ※ 도로과-2498호, 회계과-10807호(3.10.)		‘16. 2.18. (3.10.)		이경우 안전행정국장 문태선 과장 양기원 회계과장 김지주 계약1팀장 유경상 팀장 이명희 주무관 강성욱 주무관
○ 1구간 공사착공		‘16. 3.16.		문태선 과장 유경상 팀장 강성욱 주무관
○ 1구간 공사준공 및 도로개통 ※ 도로과-8563호(7.25.) ※ 도로과-8730호(7.28.)		‘17. 7.24. (7.25.)		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 김기채 과장 유경상 팀장 마동현 주무관

○ 2구간 감정평가 및 보상협의 ※ 도로과-7780, 9177, 10728, 10932, 10933, 11094, 12105, 12130,13627호	‘18. 7.17. ~	김기채 과장 이돈주 팀장 이혜진 주무관
○ 토지수용 재결신청서 열람 공고 ※ 도로과-3358	‘19. 3.18.	서유권 과장 이재종 팀장 문지환 주무관
○ 공사시행 ※ 도로과-9426	‘19.7.29.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 공사착공 ※ 도로과-11471	‘19.9.16.	서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 여수도시계획시설(도로)사업 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-12419	‘19.10.7.	서유권 과장 이덕연 팀장 문지환 주무관
○ 추가 지장물 손실보상비 집행 ※ 도로과-1184	‘20.1.30	서유권 과장 이덕연 팀장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 송문종 차장 문지환 주무관
○ 계약기간 연장 검토보고 ※ 도로과-2377	‘20.2.24.	장세길 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 강성수 주무관
○ 실정보고에 따른 시행계획 보고 ※ 도로과-3383	‘20.3.11.	서은수 부시장 장세길 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 서유권 과장 이영호 팀장 강성수 주무관
○ 설계변경 계약심사 요청 ※ 도로과-3809	‘20.3.19.	서유권 과장 이영호 팀장 강성수 주무관