(서식1)

정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2014 - 25

담당부서

작성자

(해양관광수산국 관광과)

(최종광/659-3891/

choijk94@korea.kr)

정 책 명

묘도 봉화산 전망공원 조성

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 우리시 국가 산단, 율촌 산단, 이순신대교 등을 한눈에 조망할 수   있는 관광명소로 개발 필요성 대두

○ 추진기간 : 2011. 10. ～ 2014. 09.

○ 총사업비 : 2,500백만원

○ 주요내용 : 공원조성 1,360㎡, 진입로 1,343m, 봉수대복원 1식 등

○ 추진경과

- ´11. 06. 17. : 지방재정 투융자 심사

- ´11. 10. 31. : 공유재산 관리계획 반영

- ‘12. 02. 14. : 봉화산 문화재 발굴조사 완료

- ‘12. 04. 17. : 공사착공(경도건설)

- ‘12. 11. 21. : 여수 도시관리계획(도로, 공원)결정 및 지형도면 고시

- ‘13. 03. 20. : 실시계획인가 고시

- ´13. 05. 01. : 분할측량 성과 반영 보상계획 열람 공고

- ´13. 10. 29. : 보상 협의 요청(1차)

- ‘13. 12. 19. : 보상 협의 요청(2차)

- ´14. 02. 06. : 실시계획 변경 인가 승인

- ‘14. 03. 18. : 보상 협의 요청(3차)

- ‘14. 05. 16. : 재결 수용 열람공고

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 7급 명주완(성명)

- 최종 결재자 : 시     장 김충석(성명)

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시장	김충석		‘11.10.~ 현재	정책최종결정
․ ․
부시장	정병재	행정3급	‘11.10.~’12.12.	검토자
부시장	이호경	행정3급	‘13.01.~ 현재	검토자
․ ․
국장	이창규	행정4급	‘11.10.~’13.06	검토자
국장	이노철	행정4급	‘13.06.~ 현재	검토자
․ ․
과장	강승원	행정5급	‘11.10.~’14.01	검토자
과장	강성원	행정5급	‘14.02.~ 현재	검토자
․ ․
팀장	심근하	시설6급	‘11.10.~’13.01	검토자
팀장	정원완	시설6급	‘13.02.~’14.01	검토자
팀장	송신현	시설6급	‘14.02.~ 현재	검토자
․ ․
담당자	명주완	시설7급	‘11.10.~’13.01	공사감독
담당자	심근하	시설7급	‘13.02.~ 현재	공사감독
․ ․

다른기관 또는

민간인 관련자

○설계자

- (주)우빈기술개발 조연우

추진실적

○ ‘13. 03. 20. : 실시계획 변경 인가

○ ‘14. 02. 06. : 실시계획 변경 인가

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개