정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제 등록번호	2014-04	담당부서 작성자	안전행정 체육지원과 (박재천/659-3267)
정 책 명	진남종합테니스장 건립
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 진남종합테니스장내 사계절 이용이 가능한 전천후 실내 코트를 건립하여 시민 건강증진 및 전지 훈련팀 유치 - 국제규모의 운동시설 확충 및 인프라 구축으로 각종 대회를 유치하여 지역경제 활성화에 기여 ○ 위 치 : 오림동 104번지 일원(진남체육공원 내) ○ 총사업비 : 85억원(지특 25.5, 시비 59.5) ○ 사업내용 : 실내코트(2면/2,958㎡), 실외코트 10면 조성 ○ 주요내용 - 기본계획(타당성) - 기본 및 실시설계 - 실내(2면) 및 실외코트장(10면) 조성
추진경과 및 사업관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 09. 3.24 : 종합테니스장 건립계획 수립 - 관련자 : 오현섭 시장, 정해균 부시장, 양임승 국장, 임정원 과장, 박성재 팀장 ○ 10. 8.24 : 테니스장 부지선정 및 타당성 용역 - 관련자 : 김충석 시장, 정인화 부시장, 정학근 국장, 임정원 과장, 강동규 팀장 ○ 12. 11.20 : 테니스장 부지조성 착공(토목) - 관련자 : 김충석 시장, 정인화 부시장, 정학근 국장, 임정원 과장, 강동규 팀장 ○ 13. 4.25 : 기본 및 실시설계용역 실시(건축) - 관련자 : 김충석 시장, 이호경 부시장, 오경희 국장, 박철수 과장, 김동호 팀장 ○ 14. 3.26 : 공사 추진(건축) - 관련자 : 김충석 시장, 이호경 부시장, 김태규 국장, 박철수 과장, 김동호 팀장 ○ 15. 5.23 : 종합테니스장 준공식 - 관련자 : 주철현 시장, 이승옥 부시장, 김두인 국장, 이영철 과장, 김종승 팀장
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 타당성 조사용역 - 용 역 사 : 한양건축사사무소 ○ 부지조성공사 설계 - 용 역 사 : (주)우영기술단 ○ 건축설계 - 용 역 사(주)우빈기술개발건축사사무소 ○ 부지조성공사(토목공사) - 시 공 사 : 제후건설(주) ○ 실내코트 건립 및 실외코트 조성공사 - 시 공 사 : 인동종합건설(주) ○ 전기공사 : (주)대신이엔에스 ○ 소방공사 : (주)금화소방설비 ○ 통신공사 : (주)우리정보 ○ 폐기물처리 : (주)그린환경건설, (주)대신기공, (주)대신환경, (주)녹색환경산업, (유)삼려환경 ○ 건축감리 : 유로건축사사무소 김용균 ○ 전기감리 : (유)한국전기설계감리 김철호 ○ 소방감리 : SF ENC 유태국
추진실적	○ 추진실적 현황 - ‘09. 3. 24 : 종합테니스장 건립계획 수립 - ‘09. 10. 16 : 지방재정투융자심사 - ‘09. 11. 16 : 중기지방재정계획 수립 반영 - ‘10. 8. 24 : 기본계획(타당성) 용역 완료 - ‘10. 12. 20 : 지방재정투융자사업 재심사 - ‘11. 4. 12 : 공유재산관리계획 심의 의결 - ‘12. 7. 3 : 사전재해영향성 검토(토목) - ‘12. 7. 25 : 여수시 설계자문위원회 자문 - ‘12. 8. 30 : 일상감사 완료(토목) - ‘12. 9. 14 : 전라남도 계약심사 완료(토목) - ‘12. 10. 22 : 실시계획인가 고시 - ‘12. 11. 20 : 부지조성 공사 착공 - ‘14. 3. 6 : 전남도 계약심사 완료(건축) - ‘14. 3. 10 : 실내코트 건립공사 발주 - ‘14. 3. 13 : 일상감사 완료(건축), 건축협의 요청 - ‘14. 3. 26 : 공사 착공(건축) - ‘14. 12. 19 : 공사 준공 - ‘15. 4. 30 : 하드코트 완료