정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-49	담당부서 작성자	건설교통국/건설방재과 최영민/659-4052
정 책 명	장수지구 소규모 농촌용수개발사업
사업개요	□ 추진배경 ○ 안정적인 용수공급 및 영농편의 도모 ○ 효율적인 농업생산기반 조성 □ 사업개요 ○ 사업기간 : ’13.12. ~ ’17. 1. ○ 위 치 : 여수시 화양면 장수리 1131번지 일원 ○ 사 업 량 : 저수지 축조 (L= 169m, H= 12m) ○ 사 업 비 : 4,660백만 원 - 순공사비 3,146, 자재비 385, 용지매수 687, 기타 442 ○ 시 공 사 : 두원건설(주) 김선진 등 2개사
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진상황 ○ 사업신청 : ’11. 5.30. ○ 기본 및 실시설계용역 : ’12. 2.22. ~ ’13. 6.18. ○ 기본계획 수립(전라남도) : ’3.13. ○ 시행계획 승인(전라남도) : ’9.10. ○ 총괄 및 1차분 착공 : ’13.12.20. ○ 2차분 착공 : ’14. 4.16. ○ 1차분 준공 : ’15.10.14. ○ 3차분 착공 : ’15.12.10. ○ 2차분 준공 : ’16. 6.30. ○ 3차분(총괄) 준공 : ’17. 4.24. ○ 준공식 개최 : ’17. 4.28.