정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2014-22

담당부서

작성자

환경복지국/생활자원과

(최상록/659-4886/c3786@korea.kr)

정 책 명

만흥 비위생매립지 정비구역 위생매립장 조성사업

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 비위생적으로 매립된 쓰레기를 굴착, 선별하여 위생처리하고, 동 구역을 위생매립장으로 조성하여 쓰레기 매립 용량 확보 및 지역환경보전에 기여

○ 추진기간 : 2012. 5. 18 ~ 2014. 5. 17

○ 총사업비 : 7,800백만원 (국비 2,340, 시비 5,460)

○ 주요내용 : 위생매립장 조성 A=52,095㎡

○ 추진경과

▪ 2008.  2. 15 : 만흥 비위생매립지 정비사업 착공

▪ 2011. 12. 26 : 만흥 비위생매립지 정비사업 준공

․사 업 량 : 폐기물 굴착ㆍ선별 95만㎥ (쓰레기 35%, 토사 65%)

진입로개설 324m / 위생매립장조성 11,605㎡

․사 업 비 : 212억원 (국비 50%, 시비 50%)

․사업기간 : 2008. 2. 15～2011. 12. 26

․시 공 사 : ㈜케이지건설 (책임감리 : ㈜경호엔지니어링외 1)

▪ 2012. 5. 17. : 만흥 비위생매립지 정비구역 위생매립장

조성사업 착공 (총괄 및 1차분)

▪ 2013. 2. 15. : 2차분 착공

▪ 2013. 5.  7. : 1차분 준공

○ 추진계획

▪ 2014.  5.   : 총괄 및 2차분 준공 예정

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

▪ 최초 입안자 : (직급) 시설7급 (성명) 김 경 우

▪ 최종 결재자 : (직위) 여수시장 (성명) 김 충 석

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 사업 관련자

구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시 장	김충석		2012.4.30 ~ 현재	정책 최종결정
부시장	정병재	행정3급	2012.4.30 ~2012.12.31	검토자
	이호경	행정3급	2013. 1. 1 ~ 현재	〃
국 장	김종현	행정4급	2012.4.30 ~2012.8.16	〃
	김양자	행정4급	2012.8.17 ~ 현재	〃
과 장	채종철	환경5급	2012.4.30 ~2013.1.31	〃
	송성현	환경5급	2013.2.1 ~2013.9.23	〃
	한원석	환경5급	2013.9.24 ~ 현재
팀 장	주영근	시설6급	2012.4.30 ~2013.1.31	〃
	한상진	환경6급	2013.2.1 ~ 현재	〃
담당자	김경우	시설7급	2012.4.30 ~2013.1.31	공사감독
	최상록	시설7급	2013.2.1 ~ 현재	〃

다른기관 또는

민간인 관련자

추진실적