도수관로 누수복구에 따른 단수계획

□ 누수개요

◦ 위     치 : 여수시 화치동 1163-30번지 도수관로 유량계실 후단

◦ 누수원인 : 도수관로(D=800mm, 도복장 강관)의 이음용접부위

및 제수밸브 플랜지에서 노후로 인한 부식으로 누수 발생

□ 복구계획

◦ 2011. 05. 24 : 도수관로 긴급복구(9시간)

- 09:00 ~ 10:00 (1시간) : 관내수량 드레인 실시(약 1600톤)

- 10:00 ~ 12:00 (2시간) : 기존관로 철거

- 12:00 ~ 13:00 (1시간) : 강관절단(D=800mm)

- 13:00 ~ 15:00 (2시간) : 플랜지용접(D=800mm)

- 15:00 ~ 16:00 (1시간) : 제수밸브 설치(플랜지 접합)

- 16:00 ~ 18:00 (2시간) : 단관 및 이음관 접합

□ 급수중단 홍보 계획

◦ 급수중단일시 : 2011. 05. 24.(화) 10:00 ~ 17:00(7시간)

◦ 급수중단지역 : 학용정수장 계통 전지역(구여천시)

※ 덕양 일부지역, 죽림지구, 무선주공APT 제외

◦ 급수중단원인 : 화치동 도수관로(D=800mm) 긴급복구공사

◦ 홍 보 기 간 : 2011. 05. 18 ~ 23(7일간)

◦ 홍 보 매 체 : MBC, KBS, 유선방송, SMS 서비스, 각 동사무소

앰프 방송 등.

□ 문의처 : 여수시청 상수도과 ☏ 061)690-2918, 2919