제2010 - 20호 2010년 10월 27일	중앙동 회보	【시 정 방 침】 1. 세계박람회 성공개최 1. 참여하는 화합시정 1. 풍요로운 지역경제 1. 교육중흥 인재육성 1. 함께사는 복지사회 1. 관광문예 체육진흥
■발행인: 중앙동장 ■발행처: 여수시 종화로 21(중앙동 30) ☎690-2610

회람

본 회보는 공문서로서의 효력을 갖습니다.

	차 례
Ⅰ. 2012여수세계박람회 추진상황 1 Ⅱ. 2010년 주요현안사업 3 Ⅲ. 2010년 10월 주요 동정사업 5 1. 업무 추진실적 5 2. 업무 추진계획 8 Ⅳ. 2010년 10월 주요시정 홍보 10 Ⅴ. 미담수범사례 15 Ⅵ. 건의 및 민원사항 16

Ⅰ. 2012여수세계박람회 추진상황 및 계획

주요사업	세부사업	추진상황 및 계획
박람회장 조성	부지조성공사	- 오수･우수관 터파기 및 P.C BOX 설치 - 박람회장 내 지장물 철거(항운노조 건물 등) 및 폐기물 처리완료
	전시관 등 건립 공사	- 아쿠아리움 1층 골조공사 완료 및 2층 골조공사 추진 - 한국관･부제관 등 기초 파일공사 완료 구조물공사 추진 - 주제관 및 기타 항만시설 정비사업 기초 보강공사 시행 - 국제관 계약 및 착공(10월말) - BIG-O 조성사업 파제제 지반보강 및 준설공사 시행 - 고급숙박시설(대명레저) 타워동 벽체 타설 등 골조공사 추진
	조성 현황	- 아쿠아리움(10.3), Big-O(10.7), 한국관․부제관․지자체관(10.8), 주제관(10.9), 국제관(10.10) 착공 - 엑스포타운(1,442세대) VIP용 호텔(282실, 10.7~12.2) 조성 중
엑스포타운 조성	아파트 건립 공사(1,2블럭)	- 건축 기초파일 항타(25%) 및 숙박시설(101, 202, 203동 등) 기초타설
	부지조성공사	- 부지조성(1,2블록 제외) 토공사 및 종고초교 인근 방음펜스 설치
교통인프라 구 축	광역교통망	- 전주~광양(‘12), 목포~광양(’12) 고속도로, 전라선 KTX 복선 전철화(익산~여수, ‘11) 정상추진
	연계교통망	- 국도 17호선 대체 우회도로(여수~순천, ‘12), 여수산단 진입도로(’12) ※ 현재 국대도 17호선 70%, 여수산단진입도로 42%

□ 박람회 조감도

Ⅱ. 2010년 주요현안사업 추진상황

□ 박람회장 주진입로변 경관개선사업(2차)실시설계용역(도시디자인과)

○ 용역범위 : L=3.88km(서교동 교차로 ~ 경찰서 ~ 박람회장, 해양공원 일대)

○ 과업내용 : 경관저해요인 개선 실시설계(노후 보도, 간판정비, 가로녹화 등)

○ 용 역 비 : 44백만원(국비 22, 시비 22)

○ 기    간 : ‘10. 10. 11 ~ ‘11. 1. 11.(3개월간)

○ 향후계획

- ‘11. 1. ~ 2. : 도로굴착 심의 등 행정절차 이행

- ‘11. 3. ~ 9. : 공사착공 및 시행

□ 여객선터미널 ~ 교동국제상사 도로 확․포장공사(도시계획과)

○ 추진상황

- ‘08. 05. ~ ‘10. 09. : 토지, 지장물 보상(900백만원) 및 지장물 10동 철거

- ‘10. 09.           : 중토위 심의 후 소유권(여수시) 이전 완료

○ 향후계획

- ‘10. 11.           : 지장물(3동) 수용재결․보상 후 철거 실시

- ‘11. 상반기       : 예산확보 후 공사 실시

○ 공사기간 : 착공일로부터 5개월간

□ 구)삼양사 뒤편 절개지 복구공사(건설과)

- ‘10. 08. ~ 현재 : 매주 1 ~ 2회 동장 현장방문(위로 및 추진상황 설명)

- ‘10. 10.        : 지반 거동에 따른 건축물 안전대책 수립 시까지 공사중단

□ 여수구항 정비공사(2단계)(여수지방해양항만청)

○ 추진상황(중앙동 친수문화공간)

- ‘10. 08. ~ 현재 : 공사 착공 및 매립예정지역 폐기물 제거 및 블록거치 작업 중

○ 향후계획

- ‘12. 02.    : 공사 준공

□ 여수 향토음식 특화거리 조성공사(원도심개발과)

○ 공사개요

- 향토음식 특화거리 조성 : L=408m, B=8.0m

- 하수관거 정비 : L=957m, 배수설비 68개소, 관추진공 L=87m

- 상수도관 교체 : L=410m, D=100~150mm, 급수전 75가구

- 전선 지중화 작업 병행 추진

○ 추진상황

- ‘10. 10. 20 : 공사착공

○ 금후계획

- ‘10. 11. 12. : 사업구간 내 도시가스 공급여부 결정

- ‘11. 08. 15. : 공사 준공(‘11. 05. 거북선대축제 이전 공사 준공 계획)

□ 고소동 마을안길 난간 설치공사(건설과)

○ 사업대상지 및 사업량

- 고소동 28-2번지 일대(삼일교회 건너편) : 32m

- 고소동 627번지(좌수영 대첩비각 인근) : 22m(담장 정리 포함)

- 고소동 8번지(중앙초 건너편) 및 147번지(1․2통 경계) : 10m

○ 향후계획

- ‘10. 11.    : 공사 착공 및 준공

□ 고소아파트 도시가스 설치 사업

○ 추진상황

- ‘10. 10. 11. : 2010년도 공동주택 보조사업 확정

- ‘10. 10. 22. : 도시가스 설계 의뢰

- ‘10. 10. 23 : 도시가스 추진위원회 구성(20명)

○ 향후계획

- ‘10. 10. 27. ~ 10. 29. : 설계도서 검토 및 자체심의

- ‘10. 11. ~            : 돌산가스와 계약해지 협의 완료 후 공사 시작

Ⅲ. 2010년 10월 주요 동정업무

【추진실적】

○ 2010년 여수시민의 날 및 시민체육대회 참가

- 일  시 : ‘10. 10. 15.(금) ~ 10. 16.(토)

- 참가종목 및 인원 : 11개 종목 105명 출전

- 성  적 : 종합 18위(12,874점), 탁구 3위

※ 2011년도 상위 입상 목표 설정 필요

○ ‘10년 노인의 달 맞이 새마을부녀회 경로위안행사 개최

- 일    정

연번	일 시	장 소	참여인원	대상마을(통)	비 고
계		6 개소	1,033
1	10. 19(화) 11:30	소문난 숯불갈비	147	1, 2통	고소A 경로당
2	10. 20(수) 11:30	고려식당	89	9통	한마음 경로당
3	10. 20(수) 11:30	대성식당	235	7~ 8, 10~11통	중앙 경로당
4	10. 21(목) 11:30	고려식당	115	5, 6통	한신A 경로당
5	10. 22(금) 11:30	대성식당	172	3, 4통	고소경로당
6	10. 25(월) 11:30	원앙식당	275	12, 13, 14통	교동경로당

- 내    용 : 기념행사, 중식 제공 등 경로위안행사

※ 2011년도 통합 추진 필요

○ 쓰레기불법투기 야간단속

- 3회 실시(10월 첫째, 둘째, 셋째 주) 및 수시단속

- 17건 현장지도(3건 적발보고, 10건 증거물 미확보, 현장계도 4건)

○ 기업과 함께하는 아름다운 고소골목 가꾸기 사업 완료

- 일    시 : ‘10. 10. 14(목) 10:00

- 장    소 : 중앙동 4통 고소3길 일원

- 내    용 : 18세대 도색, 벽화 8점, 타일벽화 220점 영구전시, 저소득가정

집수리 1동, 빈집 앞 울타리 설치 1동

○ 10월 중 방역소독 실시

- 일제방역 : 1회(전역 연막소독)

○ 영화 오픈세트장 유치 제안에 따른 주민의견 수렴

- 일    시 : ‘10. 10. 20.(수) 15:00 ~ 16:00

- 장    소 : 중앙동 4통 공용주차장 인근

- 참    석 : 30명(주민23, 동장 외 직원5, 전남영상위원회1)

- 영화제목 : 그녀가 날 봐요(주연 : 박보영)

- 오픈세트장 제안 장소 : 고소동 벽화거리 주변 간이 주차장

- 의견수렴 결과 : 조건부 세트장 건립 찬성

○ 2010 노인일자리 시 자체 2차 사업 신청 접수 및 선발

- 신청기간 : ‘10. 10. 18 ~ 10. 22

- 신청인원 : 61명

- 사업인원 : 33명 (공익형 29, 복지형 4)

- 대상자 확정 : ‘10. 10. 26.

※ 재산상황, 노인일자리 참여 횟수 등에 의해 대상자 확정

- 노인 일자리 사업 추진 : ‘10. 11. 01. ~ 12. 31.

○ 현장민원 처리 결과

분 야	제 목	일 시	내 용
교 통	진남관 공영주차장 펜스 정비	‘10 .10. 18.(월)	○ 중앙동 529번지 진남관 아래 공영주차장에 설치된 펜스의 일부 파손으로 차량 주차 시 안전사고 위험 및 주민통행 불편초래(7통) ○ 주차장 내 파손된 펜스 정비 완료
도 로	여객선터미널 앞 침하도로 정비	‘10 .10. 20.(수)	○ 교동 682번지 여객선터미널 앞 도로 침하 및 파손으로 사고위험 및 차량통행 불편(13통) ○ 침하도로 아스콘 재포장 정비 완료
보안등	보안등 신설	‘10 .10. 21.(목)	○ 교동 620번지 교동주차장 앞이 어두워 야간 안전사고 우려 및 주민통행에 불편 초래(14통) ○ 우범지역 보안등 신설로 주민불안 해소

【업무계획】

□ 칭찬 1. 1. 1. 운동 추진(최상섭)

○ 일  시 : ‘10년 10월부터 매월

○ 내  용 : 1통 별로 1달에 1명씩 칭찬주자 선정

○ 협  조 : 매월 20일까지 칭찬주자 선정 제출

○ 제출내용 : 【붙임 1】

□ 9통장 모집 및 위촉(최상섭)

○ 모집기간 : ‘10. 10. 18. ～ 10. 31.(14일간)

○ 대상자 서류검토 및 면접 :  ‘10. 11. 01. ～ 11. 02.

○ 신임통장 결정 및 통보 : ‘10. 11. 03.

○ 신임통장 위촉장 수여 : ‘10. 11. 04.

※ 직무대행자 : 조영심

□ 2010년 민방위 보충 비상소집(2차)훈련 추진(정원빈)

○ 훈련일시 : ‘10. 10. 29.(금) 07:00

○ 응소장소 : 중앙동사무소

○ 소집인원(대상) : 32명, 5년차 이상 ~ 40세(1970년생)중 비상소집훈련 불참자

○ 훈련내용 : 민방위대원 임무 및 역할 고지, 각종 비상사태 시 행동요령 교육

○ 협조사항 : 비상소집 통지서 본인에게 직접 전달 : 10.28.(목) 한

□ 민원 24 참여 안내(이정옥)

○ 참여방법

- 『민원24』홈페이지(www.minwon.go.kr)접속 후 회원가입

○ 협조사항

- 아이디, 이름, 생년월일, 가입일자를 민원담당자(이정옥)에게 통보

- 회원 가입 시 주소는 여수시로 등록

○ 통별 참여현황

통별	인구수	목표수	‘10. 10. 27. 이후 실적	총실적	달성율(%)	비고
총계	6,491	140
1통	540	10
2통	488	10
3통	460	10
4통	482	10
5통	609	10
6통	658	10
7통	314	10
8통	430	10
9통	408	10
10통	403	10
11통	293	10
12통	426	10
13통	496	10
14통	484	10

□ 탄소포인트제 참여 안내(김동진)

통별	세대수	목표수 (100%)	‘10. 10. 27. 이후 실적	총실적 (2009실적포함)	달성율	비고
총계	2,704	2,704		896	33%
1통	238	238		94	39%
2통	213	213		18	8%
3통	192	192		53	28%
4통	207	207		60	29%
5․6통	433	433		433	100%
7통	135	135		45	33%
8통	165	165		17	10%
9통	194	194		24	12%
10통	179	179		20	11%
11통	128	128		34	27%
12통	190	190		32	17%
13통	237	237		29	12%
14통	237	237		37	16%

Ⅳ. 2010년 10월 중 주요시정 홍보

□ 2010 인구주택 총조사 인터넷조사 참여 안내(박영현)

○ 인터넷 조사기간 : ‘10. 10. 22.(금) ~ ’10. 10. 31.(일)

○ 참여방법 : 인구주택 총조사 홈페이지(www.census.go.kr)에 접속 후 조사표 응답

○ 인터넷조사 참여자 인센티브

- 초․중․고 재학학생 봉사활동 확인서 2시간 발급

- 참여가구 대상 경품 추첨 지급

○ 우리동 인터넷조사 참여 목표 : 총 조사가구의 30%

※ 방문면접조사 : ‘10. 11. 1. ~ 11. 15.(인터넷조사 미 참여 가구)

□ 여수MBC 시민상 공모 안내(최상섭)

○ 접수기한 : ‘10. 10. 04.(월) ~ ’10. 11. 20.(토)

○ 수상자격 : 국적 불문하고 전남동부광양만권 거주하는 지역민

○ 시상인원 : 단체 1팀, 개인 3명

○ 후보자 추천 접수

- 여수MBC 홈페이지에서 추천서를 다운받아 작성하여 우편 또는 메일 발송

○ 접수처 : 전남 여수시 문수동 101-1번지 여수MBC 정책심의팀 061)650-3320

snhong@ysmbc.co.kr

□ 11월중 “엑스포 아카데미-시민교양강좌”개최 안내(정원빈)

○ 일시/장소 : ‘10. 10. 25.(목) 15:30/진남문예회관

○ 강    사 : 송 길 원

○ 강좌내용 : 행복력으로 만드는 행복세상

○ 협조사항 : 강좌 주민참여 및 안내

□ 이순신광장 지하주차장 유료화 안내(정원빈)

○ 시    기 : ‘10. 10. 01.(금)부터

○ 주차요금 : 소형 - 30분 당 500원, 1일 5,000원, 1달 50,000원

□ 전라남도형 예비 사회적기업 지정 공모(최상섭)

○ 목   적 : 정부의 일자리 창출과 생산적인 복지의 동시실현이 가능한 사회적 기업 육성․지원

○ 공모기간 : ‘10. 10. 14. ~ 10. 28.(14일간)

○ 접 수 처 : 노사산단협력담당관실(1청사)

○ 신청방법 : 직접 또는 우편(마감일까지 도착분에 한함)

○ 지정시 혜택 : 인건비(최저임금 수준) 등 지원

□ 2010년 하반기 자전거 무료 이동수리반 운영 안내(김동진)

○ 자전거 무료 이동 수리반을 운영하여 우리시 방치자전거의 재활용 및 자전거소유자들의 불편을 해소하고 자전거이용 활성화에 기여하기 위함

○ 일시/장소

일 자	‘10. 11. 11.(목)	‘10. 12. 02.(목)
장 소	한신아파트 앞	동사무소 앞
운영시간	09:00 ~ 18:00

○ 대    상 : 일반 시민이 보관 중인 고장 난 자전거

○ 정비내용 : 자전거 타이어수리, 브레이크 수리 등 자전거 경정비 등

□ 가을철 가스안전사고 예방홍보(김동진)

○ 가을철을 맞이한 『휴대용 가스렌지 올바른 사용법』안내 : 【붙임】

□ 여자만 갯벌 노을 사진 콘테스트 개최(선은경)

○ 응모기간 : ‘10. 10. 23 ~ 11. 1(10일간) 18:00

○ 응모내용 : 여자만의 갯벌․노을축제 관련내용

○ 응모방법 : 인터넷 접수(여수시 홈페이지 http://yeosu.go.kr 접속 후 팝업창 활용)

□ 소나무재선충병 발생에 따른 소나무류반출금지구역 안내(김동진)

○ 반출금지 구역 : 율촌면, 삼일동, 주삼동, 소라면

○ 행위제한 사항

- 소나무재선충병 감염목의 이동금지

- 6개월이 경과되지 않은 훈증 처리목의 훼손 및 이동금지

- 산지전용허가지등에서 생산되는 소나무류의 사업장 외 이동금지

- 굴취된 소나무류의 이동금지

- 소나무 및 잣나무 원목 이동금지

○ 위반 시 벌칙 : 1천만원 이하의 벌금

□ 2011년 『그린홈 2012호 보급사업』홍보(김동진)

○ 2011년 그린홈 2012호 보급 사업계획(안)

- 사 업 명 : 그린홈 2012호 보급사업

- 사업규모 : 150세대(예상)

- 지원대상 : 단독주택 및 10호 이상 마을 공동체(그린빌리지)

- 지원비율 : 약 67%(국비50, 도비7, 시비10) / 자부담 33%

○ 안내문 : 【붙임】

□ 비보호 좌회전 교차로 시행 안내(정원빈)

○ 시  행  일 : ‘10. 10. 5 ~ 30일까지 단계적 추진

○ 시행교차로 : 36개 교차로 71개소

○ 제 외 대 상 : 교통량이 많아 시행이 곤란한 교차로

○ 교차로 진입순서

- 기  존 : 직진 및 좌회전 신호 개별, 동시 부여

- 변  경 : 직진 신호만 부여(좌회전 신호 없음, 비보호로 진입)

※ 교차로 진입순서 : 직진신호 시 반대편 진입 차량 없을 시 좌회전함

(횡단보도 이용하는 보행자 예의 주시 필요)

□ 10월중 이순신광장 상설공연 안내(선은경)

일 자	시 간	공 연 내 용	비고(주관)
10/30 (토)	16:30~17:00	ꋻ강강술래 공연	여수시문화원
	17:00~19:00	ꋻ관현악, 비보이, 하모니카, 판소리, 7080공연	(사)민예총여수지부

□ 진남관 망해루 ‘풍류여행’ 홍보(선은경)

○ 공연기간 : ‘10. 09. 19. ～ 11. 21. 매주 일요일 오후 3시30분

○ 공연장소 : 진남관 망해루

○ 공연내용 : 줄풍류, 정가(가곡․가사․시조), 전통무용, 산조,  판소리, 가야금병창

□ 도로변 입간판 단속 강화 안내(김동진)

○ 도시디자인과 광고물정비계에서 진남로 상가, 중앙시장, 교동시장등 상점가 인근 도로변의 입간판 단속을 강화할 예정이니 상점가 주민들에게 적극 홍보

□ 불법 주ㆍ정차 집중 지도단속 안내(정원빈)

○ 단속기간 : ‘10. 11. 01. ~ 지속적

○ 단속시간 : 매일 07:00 ~ 22:00

○ 단속장소 : 교동사거리, 중앙동로터리, 여객선 터미널 앞, 중앙동사무소 앞,

○ 단속대상 : 도로교통법 제32조 및 제33조에 의한 모든 위반차량

- 교차로, 횡단보도, 건널목이나 보도와 차도가 구분된 도로의 보도

- 교차로의 가장자리 또는 도로의 모퉁이로부터 5m이내의 곳

- 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 10m이내의 곳

□ 기초노령연금 수급자 집중 발굴 기간 안내(진  랑)

○ 목    적 : 기초노령연금 수급이 가능함에도 불구하고 본인이 인지하지 못하거나 정보의 부족 등으로 적기 신청을 못하는 수급가능대상자 발굴

○ 대    상 : 기초노령연금 미신청자 및 미 해당자 중 소득․재산이 감소한 경우

○ 운영기간 : ‘10. 10. 01. ~ 10. 31.(1개월)

○ 접 수 처 : 중앙동 주민센터

○ 조사내용 : 노인세대 소득(연금, 근로, 기타소득), 재산사항(일반․차량․금융재산) 등

○ 구비서류

- 본인접수 : 신분증, 통장, 도장

- 대리접수 : 신청자의 신분증, 통장, 인감도장 및 위임자의 신분증, 도장

- 기타사항 : 노인부부세대의 경우 신청 대상자의 배우자도 신분증과 도장을 지참하여 함께 내방

□ 계절인플루엔자 예방접종 추진 안내(정원빈)

○ 접종기간 : ‘10. 10. 11 ~ 약품소진 시까지

- 무료 : ‘10. 10. 11부터, 유료 : ‘10. 10. 18부터

○ 접종대상 : 45,000명 (만 5세 부터 성인)

○ 무료접종 : 65세 이상 노인, 의료수급권자, 장애1․2급, 복지시설생활자 등

○ 접종장소 : 보건소, 중부지원과, 보건지소, 보건진료소

○ 중앙동 접종장소 : 중부보건지원과, 매주 목요일

□ 도서지역 ‘리사이클 2010’ 행사 안내(김동진)

○ 목  적 : 도서지역 폐자원 수거시스템 완성 및 도서지역의 폐자원 수거․운반

○ 기념식 : ‘10. 11. 03.(수) 15:00 ~ 16:00, 여수종포해양공원

○ 참  석 : 환경부 장관, 협회장, 생산자단체 대표, 도시자, 시장, 사령관 등

○ 주  최 : 환경부 자원순환국

○ 주    관 : 한국전자산업환경협회, LG, 삼성, 대우, 위니아, 캐리어

Ⅴ. 미담수범사례

□ 쓰레기 불법투기 지역 마이카 화분 배치

○ 신진샷시(교동 678-9) 대표 문철현은 쾌적하고 아름다운 도시이미지 제고를 위하여 손수 제작한 마이카 화분을 쓰레기 불법투기지역에 배치함으로써 전통시장을 찾는 많은 시민들에게 다양한 볼거리를 제공하고 청결한 생활환경을 조성하는 데 크게 기여함.

Ⅵ. 건의 및 민원사항

건의(민원) 일 시		10. . .		건의(민원)분 야			건의(민원)지 역	통
건의자	성 명					전화번호
	주 소
현실태
문제점
대 책
기타사항

【붙임 1】

칭찬 주자 조서

(1) 성 명	(한자)
(2) 주민등록번호 (생년월일)							-	(8) 통명
(4) 본 적
(5) 주 소
(6) 직 업 :					(7) 연 락 처 :
(9) 칭찬요지 (50자내외)
○ ○ ○ ○
(10)기타 특이사항 :

【붙임 2】

2011년 그린홈 2012호 보급사업 안내

□ 사업규모 : 150세대 예상 ⇒ 에너지관리공단 접수 순(예산범위 내)

□ 지원대상 : 단독주택, 10가구 이상 마을 공동체(그린빌리지)

○ 단독주택 : 건축물대장상 용도가 단독주택에 신․재생에너지 설비 설치

○ 그린빌리지 : 단독주택 조건 충족, 동일마을 10가구 이상 설치

□ 지원금액 : 설치용량별 차등지원(설치비 약 10%)

□ 사업추진 절차

전문기업		설치계약 체결		시설 설치․확인		보조금 신청 및 지급
		설치계약 체결 (전문기업↔건축주) ⇓ 지원신청(기업) ⇓ 지원대상 통보(시)		▪시설 설치 (전문기업) ▪적합여부 확인 - 사용전점검(한전) - 설치확인(에관공)
▪설치희망자 발굴
						▪신청(전문기업) ▪예산 범위 내 지급 (시⇒전문기업)
설치 희망자
▪전문기업 선택

※ 전문기업과 설치자 계약 시 일련의 절차는 전문기업에서 대행

□ 설치비

(2010년 기준)

에너지원	설치 용량	설치비(만원)			연간 에너지 절감액	비고
		총 설치비	지원금 (국․도․시)	자부담
태양광 (전기)	3㎾	1,500	1,000	500	-월 400㎾h 사용시 : 80만원 -월 600㎾h 사용시 : 190만원
태양열 (온수)	30㎡	2,400	1,700	700	-도시가스 사용시 : 110만원 -등유 사용시 : 170만원

♠ 출처 : 에너지관리공단(알기 쉬운 그린홈 안내가이드)

※  2011년 설치비는 다소 차이가 있을 수 있음

□ 읍․면․동 협조사항

○ 반회보 및 이통장 회의 시 그린홈 2012호 보급사업 홍보

□ 지원안내 : 기후보호과 에너지관리팀장(690-2429, 8434)

에너지관리공단 신재생에너지 센터(031-260-4672~4)

【붙임 3】