3		신덕지구 연안정비

해양항만레저과 박수현(659-3972)

실태		□ 태풍·해일 등에 연안 침식 발생
추진방향		□ 침식연안 정비 및 친수공간 조성
기대효과		□ 여수의 아름다운 해변 경관 정비 및 시민·관광객 친수시설 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 신덕피서지(신덕동) 및 모사금 해수욕장(오천동) 일원

◦ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

◦ 사업규모 : 호안정비 L=340m, 해안산책로 L=625m

◦ 사 업 비 : 30억원 (국비 17억, 시비 13억)

◦ 공 정 률 : 40%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2017년까지	2018년 이후	비 고
계	30	13	17
국 비	17	9	8
도 비
시 비	13	4	9
기 타

사업진행 현황

◦ 신덕지구 연안정비사업 실시설계 용역 착수	: 2016. 2. 23.

◦ 신덕지구 연안정비사업 실시설계 용역 준공	: 2017. 6. 22.

◦ 신덕지구 연안정비사업 1차분 착공	: 2017. 6. 26.

◦ 신덕지구 연안정비사업 2차분 착공	: 2018. 3.

◦ 신덕지구 연안정비사업 1차분 준공	: 2018. 6.

위 치 도

전경사진