4		자연친화형 연등천 조성

건설과 김용채(659-4037)

실태		□ 도심을 관통하는 연등천이 각종 악취 및 시설이 노후되어 하천의 본래의 기능을 하지 못하고 자정능력을 상실
추진방향		□ 사람과 자연이 통하는 생태계 복원 아름다운 인내천(人內川) □ 수변공간 상시 이용시설 및 호안보수
기대효과		□ 원도심을 관통하는“연등천“을 시민들이 쾌적하고 건강하게 이용 할 수 있도록 수변공간과 연계한 친수공간 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 하천정비 L= 5.9km(둔덕제1석교 ~ 남산교)

◦ 사업기간 : 2015. 6 ~ 2021. 12.

◦ 사업규모 : 수변산책로 4.0km, 목재데크 217m, 호안블럭 658m, 징검다리 9개소, 진입계단 18개소 등

◦ 사 업 비 : 75억원

◦ 공 정 률 : 39.5%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2017년까지	2018년 이후	비 고
계	75	29	46
국 비	5	5	-
도 비	2	2	-
시 비	68	22	46
기 타

사업진행 현황

◦ 실시설계용역	: '15. 2. ~ 7.

◦ 문수삼거리~둔덕제1석교 구간(1.8km) 완료	: '15. 5. ~ '17. 9.

위 치 도

전경사진