5		웅천 ~ 소호 도로개설

도로과 마동현(659-4072)

실태		□ 웅천택지개발사업 준공으로 시가지 도로의 교통 정체가 극심함에 따라 웅천에서 소호구간을 해상교량으로 연결하여 교톨량을 분산사켜 교통소통 원활을 기하고자 함
추진방향		□ 도로개설 L=1,154m, B=22.5~26m(4차로)
기대효과		□ 웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 차량분산으로 인한 시가지 교통소통원활

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동~소호동

◦ 사업기간 : 2018.7.30.~2022.7.28.

◦ 사업규모 : L=1,154m, B=22.5~26.0m(4차로)

교량 L=550m(사장교 220, PSC거더교 330)

◦ 사 업 비 : 668.41억원

◦ 공 정 률 : 1%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2017년까지	2018년 이후	비 고
계
국 비
도 비
시 비	668.41	26.77	641.64
기 타

사업진행 현황

◦ 노선결정(해상교량 형식)	: 2015. 11. 24.

◦ 기본계획 및 측량용역 완료	: 2016. 12. 16.

◦ 일괄입찰 공고(조달청)	: 2017.  4. 20.

◦ 실시설계 적격자 선정(조달청)	: 2017. 10. 13.

◦ 실시설계 완료	: 2018.  3. 11.

◦ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시	: 2018.  7.  5.

◦ 시설공사 착공	: 2018.  7. 30.

◦ 시설공사 준공	: 2022.  7. 28.

위 치 도

전경사진