13		율촌면 농어촌지방상수도 확충사업(3단계)

상수도과 유재영 (659-4909)

실태		□ 농어촌 미급수지역의 수원고갈 및 식수난으로 인한 수돗물 공급 시급
추진방향		□ 조기에 수돗물이 공급될 수 있도록 예산 확보하여 사업 추진
기대효과		□ 양질의 수돗물 공급으로 식수난 해소 및 보건위생환경 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면, 율촌면 일원

◦ 사업기간 : 2015. 8. ~ 2018. 11.

◦ 사업규모 : 관로 58.4km

◦ 사 업 비 : 69.7억원(국비 48.79, 도비 6.27, 시비 14.64)

◦ 공 정 률 : 78%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2017년까지	2018년 이후	비 고
계	69.7	37.13	32.57
국 비	48.79	26.00	22.79
도 비	6.27	3.34	2.93
시 비	14.64	7.79	6.85
기 타

사업진행 현황

◦ 실시설계 용역 완료	: 2013.  3. 28.

◦ 총괄 및 1차분 계약	: 2015.  8.  7.

◦ 1차분(L=5.5km) 착공	: 2015.  8.  7.

◦ 1차분 준공	: 2016.  2.  2.

◦ 2차분(L=17.1km) 착공	: 2016.  2. 29.

◦ 2차분 준공	: 2016. 12. 22.

◦ 3차분(L=16.9km) 착공	: 2017.  2.   1.

◦ 3차분 준공	: 2017. 11. 30.

전경위성사진 (위치포함)