109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 여수시에서 2016년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
1	농업에너지이용효율화사업 신재생에너지시설(지열)	2,500		2,500		2017	2016	70
2	여수 충무지역 새뜰마을사업	4,693		729	3,964	2019	2016	10
3	여수진남상가 주차장 건립	5,400		2,400	3,000	2017	2016	30
4	가고 싶은 섬 낭도 가꾸기	4,400	800	1,200	2,400	2019	2016	30
5	수산물처리 저장시설건립	7,900			7,900	2018	2016	10
6	지방어항 서도항 시설 확충	7,000		625	6,375	2019	2016	40
7	만흥동 마래터널 앞 도로 확장	2,600	560	1,240	800	2017	2016	80
8	여수시 장애인 국민체육센터 건립	9,000		8,000	1,000	2017	2015	26
9	여수시육아종합 지원센터 건립	3,844		3,844		2018	2015	22
10	여자만 연안생태 휴양마을 조성	9,000		34	8,966	2018	2015	10
11	여수 광림지역 새뜰마을 조성	8,513	1,572	1,474	5,467	2018	2015	40
12	화양면 소장 ~ 굴구지 도로확장	2,600	240	2,360		2017	2015	80
13	여수국가산업단지 혁신지원센터 구축	8,000	1,000	2,200	4,800	2018	2015	10
14	신덕지구 연안정비	3,000		635	2,365	2019	2015	10

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

투자심사사업 1

사업명

농업에너지이용효율화사업

신재생에너지시설(지열)

담당자

농업정책과 이병용 (☎659-4421)

□ 사업목적 및 필요성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016.  09. 16 – 2017. 06. 30

○ 위    치 : 여수시 소라면 관기리 1181-2 일원

○ 사업내용 : 첨단유리온실 수직밀폐형 지열 냉난방시스템 설치

○ 사 업 량 : 16,200㎡(1,527㎾)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	0	2,500
국 비	1,500		1,500
시 도 비	50		50
시군구비	450		450
지 방 채	0
민간자본	500		500
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 02. : 농림축산식품부 지원 사업 신청

○ 2016. 05. : 지열사업 사업대상자 확정

○ 2016. 09. : 설계 용역 계약 체결

○ 2016. 12. : 설계서 승인 통보

□ 향후계획

○ 2017. 01. : 건축공사 계약체결, 공사 발주 및 착공

○ 2017. 06. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

투자심사사업 2

사업명

여수 충무지역 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 박가영  (☎659-4560)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열악한 주거환경 개선

○ 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2019

○ 위 치 : 여수시 충무동 일원

○ 규 모 : 소공원조성, 재래식화장실 정비, 집수리, 주민역량강화,

마을기업육성, 마을 소통길 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,693		729	428	3,536
국 비	3,201		510	300	2,391
시 도 비	422		66	39	317
시군구비	1,070		153	89	828
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016년 새뜰마을사업 공모 선정                     : 2016. 2. 3.

□ 향후계획

○ 주민협의체 구성                                    : 2017. 5.

○ 마스터플랜 수립 주민설명회                         : 2017. 6.

○ 마스터플랜 수립 승인요청(국토부)                   : 2017. 7.

○ 거점형 공간 조성(다목적커뮤니센터 등)              : 2018. 1.~

○ 휴먼케어 및 주민역량강화 교육                      : 2018. 2. ~ 2019. 12.

○ 기반시설 확충(우수시설 정비 등)                    : 2018. 3. ~ 2019. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 6,700백만원⇒4,693백만원 변경

투자심사사업 3

사업명

여수진남상가 주차장 건립

담당자

지역경제과  하성준  (☎659-3268)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심권의 중요한 상권인 진남상가의 협소한 주차 공간 확보를 통한 쇼핑객과 관광객의 주차불편 해소 통한 상가 및 원도심권 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.  5. ~ 2017. 12. (19개월)

○ 위 치 : 여수시 교동 221번지 외 2필지(222, 216)

○ 규 모 : 부지 1,032㎡, 연면적 1,800㎡/철골조 지상 2층, 주차 70면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,400	-	2,400	3,000	-
국 비	3,250	-	1,450	1,800	-
시 도 비	2,100	-	900	1,200	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	50	-	50	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016.  3.  7. : ’16년 주차환경개선사업 선정(중소기업청)

○ 2016.  5. 20. : ’16년 제1회 추경예산 반영(24.2억원)

○ 2016.  6.  2. : 자부담 납부(52백만원)

○ 2016.  6. 16. : 부지매입 완료(24억원)

□ 향후계획

○ 2017.  5. : ’17년 제1회 추경예산 확보(30억원)

○ 2017. 10. : 공사 착공

○ 2017. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 효율적인 부지활용 및 주차 대수 확보를 위한 연접부지 추가 매입 검토

(당초) 4,500백만원 → (변경) 5,400백만원

투자심사사업 4

사업명

가고 싶은 섬 낭도 가꾸기

담당자

섬자원개발과 임인수 (☎659-3987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 고유 생태자원의 보존과 회복 및 매력적인 섬 문화 관광자원화를 통한 섬 부가가치 창출

◦ 주민과 지자체가 함께하는 섬 가꾸기를 추진하여 주민 자발적인 참여 유도 및 마을소득 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 여수시 화정면 낭도 일원

○ 내 용 : 탐방로 조성 L=3.2㎞, 마을회관 리모델링 1식, 중학교 리모델링 1식,

규포 어가민박, 갯가길 및 경관조성, 야영장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,400	800	1,200	800	1,600
국 비
시 도 비	4,000	800	800	800	1,600
시군구비
지 방 채
민간자본	400		400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015. 8. : 가고 싶은 섬 낭도 가꾸기 사업 기본계획 수립

○ 2015. 6. : 가고 싶은 섬 낭도 가꾸기 실시설게 완료

○ 2016. 7. 28. : 복지회관 및 간이매표소 리모델링 완료

□ 향후계획

○ 2017. 7. : 마을환경 정비 (A=142㎡)

○ 2017. 7. : 탐방로 조성 및 하이킹코스 정비

○ 2017. 7. : 갯가길 조성 L=2.8㎞

○ 2018. 1. : 중학교 리모델링 1식

○ 2019. 1. : 해수욕장 정비 및 야영장 조성 1식

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사사업 5

사업명

수산물처리저장시설건립

담당자

수산경영과 박상영 (☎659-3911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형선망 고등어잡이 어선의 위판 유도를 위한 냉동냉장 처리시설 확충

○ 생산자와 소비자간 가격 격차를 줄여 적정 어가 유지로 영세 어업인보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2018. 2.

○ 위 치 : 여수시 봉산동 100-7 외 4필지

○ 규 모 : 연면적 4,562.27㎡, 지상5층 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,900	0	0	7,900	0
국 비	2,280	0	0	2,280	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,280	0	0	2,280	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	3,340	0	0	3,340	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 10. 21. : 지방재정 투자심사 조건부 승인(전남도)

○ 2016. 11. 21. : 2017년 ～ 2021년 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

○ 2017. 3.  7. : 어항개발사업 시행 허가(여수지방해양수산청)

○ 2017. 5. 24. : 실시설계용역 및 건축허가 완료

○ 2017. 6.  7. : 보조금 교부결정

○ 2017. 6. 26. : 사업 착공

○ 2018. 2. : 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사사업 6

사업명

서도항(지방어항)시설 확충

담당자

섬자원개발과 차재원 (☎659-3991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태풍 및 해일 내습 시 어항 피해발생 대비

○ 정온 수역 확보하여 어선의 대피장소 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.

○ 위    치 : 삼산면 서도리 827-9 서도항

○ 사 업 량 : 방파제 L=165m, 물양장 L=200m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000		625	1,250	5,125
국 비	5,600		500	1,000	4,100
시 도 비
시군구비	1,400		125	250	1,025
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2010. 6.    : 서도항 기본계획 재정비 시행 및 전남도 협의

○ 2015. 8. 4.  : 용역 계약심사 결과 통보

○ 2015. 9. 1.~ 2015. 11. 28 : 수심 및 현황 측량용역

○ 2015. 9. 23. : 실시설계용역 착공

○ 2015. 9. 30. ~ 12. 28. : 토질조사용역

○ 2016. 3. 24. : 사전재해영향성검토서 협의

○ 2016. 4. 22. : 2016년 제3회 여수시 설계자문 위원회개최

○ 2016. 6. 15. : 계약심사결과 통보 (전라남도→여수시)

○ 2016. 6. 23. : 총사업비 변경승인

○ 2016. 7. 11. : 계약심의결과 통보

○ 2016. 11. 4. : 총괄 및 1차분 착공

□ 향후계획

○ 2017. 5. : 2차분 공사 착공

○ 2018.  1. : 3차분 공사 착공

○ 2019. 12. : 공사 준공

투자심사사업 7

사업명

만흥동 마래터널 앞 도로확장

담당자

도로과 김동언 (☎659-4077)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마래터널과 군부대 앞까지 도로폭이 4~5m(1차로)로 차량 교행이 어려워 교통정체 및 안전사고 위험 상존

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10. ~ 2017. 7.

○ 위 치 : 만흥동 162-5번지 일원

○ 규 모 : L= 320m, B= 8.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	560	1,240	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 및 실시계획인가	: 2014. 10. ~ 2016.  3.

○ 계약체결 및 착공	: 2016. 4. 22.

○ 보상 추진	: 2016. 4. ~ 2017. 4.

□ 향후계획

○ 준공	: 2017. 7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사사업 8

사업명

여수시 장애인 국민체육센터 건립

담당자

체육지원과 신현식 (☎659-3268)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 체육활동 여건을 조성하여 체육활동 욕구 충족 및 여가 선용 기회 제공

○ 장애인 복지향상 및 문화․소통공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 여수시 오림동 102번지 일원(진남체육공원 주차장)

○ 규 모 : 연면적 4,249㎡, 지상3층 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,000백만원(국비 5,000, 시비 4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	0	0	1,000	0
국 비	5,000	0	398	1,000	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,000	0		0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

○ 2015.  4. 29. : 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정(문화체육관광부)

○ 2016.  2. ~ 11. : 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료

□ 향후계획

○ 2017.  1.  4. : 착공

○ 2017.  7. : 2층벽체 및 3층 바닥 콘크리트 타설 완료

○ 2017. 12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 기본계획 변경(안) 검토 보고[체육지원과-7685(2016. 5.26.)]

사유 : 내부 경사로 추가 설치에 따른 시비 추가 반영( 1,000백만원)

투자심사사업 9

사업명

여수시육아종합지원센터건립공사

담당자

여성가족과  박해원  (☎659-3761)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저출산 문제의 극복을 위하여 가족‧공동체의 육아기능 보완과

창의적인 놀이체험 공간 등을 활용한 육아종합지원센터를 설치

함으로써 종합적이고 체계적인 육아서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.1 ～ 2018. 12.

○ 위 치 : 여수시 융천동 1820-1번지(노유자 부지)

○ 규 모 : 부지1,547㎡(연면적 1,400㎡/ 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,844백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,844		866	2,978
국 비	1,000			1,000
시 도 비	300			300
시군구비	2,544		866	1,678
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 공유재산관리계획 의결     : 2016. 5. 20.

○ 건립부지 매입             : 2016. 5. 31.

□ 향후계획

○ 건축설계 공모 당선작 선정 : 2017. 7

○ 건축설계 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 7. ～ 2017. 10.

○ 공사착공                   : 2017. 12.

○ 준공                       : 2018. 12.

□ 사업변경 내역

○ (당초) 3,000백만원 → (변경) 3,844백만원 : 공사비 증액

투자심사사업 10

사업명

여자만 연안생태 휴양마을 조성사업

담당자

관광과 황용순 (☎659-3882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 갯벌, 섬, 낙조 등 관광자원을 연계한 연안생태 휴양 마을을 조성

○ 여자만과 여자도를 연계하는 휴양과 힐링 관광지로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 여수시 소라면 복산리 일원

○ 규 모 : 수변공원조성, 정소공원, 생태마을 정비, 복합관광센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,000	-	34	5,000	3,966
국 비	4,250	-	17	2,500	1,733
시 도 비
시군구비	4,250	-	17	2,500	1,733
지 방 채
민간자본	500				500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013.  9.    : 남해안관광클러스터조성사업 반영(문체부 사업)

○ 2015.  6. 19. : 기본계획수립 용역 준공

○ 2015.  7. 28. : 지방재정 투융자 심사 완료(전남도)

○ 2016.  1. 11. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2017.  8. : 실시설계 준공

○ 2018. 12. : 공사 준공

투자심사사업 11

사업명

여수 광림지역 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 박가영 (☎659-4560)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 달동네 판자촌, 노후주택 등 열악한 주거환경 개선

○ 쾌적한 주거환경 정비로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 여수시 광림동 일원

○ 규 모 : 소방도로개설, 우수시설정비, 안길조성, 오수관정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,513백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,513	1,572	1,474	1,729	3,738
국 비	4,936	1,100	990	1,210	1,636
시 도 비	634	141	127	155	211
시군구비	2,943	331	357	364	1,891
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 국토부 마스터플랜 승인                               : 2016.  8.  5.

○ 새뜰마을사업 소방도로 착수                           : 2016. 12.  1.

□ 향후계획

○ 새뜰마을사업 건축, 토목공사 실시설계용역 착수        : 2017.  3.

○ 순환형 임대주택 및 다목적커뮤니센터 매입(2가구중 1)  : 2017.  3. ~ 6.

○ 집수리 수요조사                                       : 2017.  5. ~ 6.

○ 지원대상가구 및 시공업체 선정                        : 2017. 10. ~ 11.

○ 집수리 시행                                           : 2018.  1.

○ 소방도로 개설 2차분 완료	: 2018.  2.

○ 소방도로 개설 잔여분 및 기반시설 등 완료	: 2018.  2. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 9,300백만원 ⇒ 8,513백만원 변경

투자심사사업 12

사업명

화양면 소장～굴구지 도로확장

담당자

도로과 황규석 (☎659-4076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민 숙원사업 해결 및 마을진입도로 확장으로 정주의식 고취

○ 도로기반시설 정비로 주민 교통편의 제공 및 국제해양관광 중심 도시건설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2017. 7.

○ 위 치 : 화양면 나진리 소장마을 일원

○ 규 모 : L= 1,300m, B= 7.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	240	2,360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역	: 2013.  3.

○ 도로 노선지정 공고	: 2015. 11.

○ 보상 추진	: 2016.  1. ~ 6.

○ 착공	: 2016.  4.

□ 향후계획

○ 준공	: 2017.  7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

투자심사사업 13

사업명

여수국가산업단지 혁신지원센터 구축

담당자

산단지원과  김경석 (☎659-3636)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 분산된 산단관련기관 집적화를 통한 협업체계 구축 및 기업지원

종합 플랫폼 구축으로 기업하기 좋은 환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 9. ~ 2018. 12.(3년)

○ 위 치 : 여수시 주삼동 426번지(삼동지구)

○ 규 모 : 부지 4,086㎡(1,236평)/ 건축물 5,700㎡(1,724평)

- 지상 6층,  주차공간(지하 1층, 지상 1,500㎡)/

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(국비4,000, 시비2,000, 산단공2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	1,000	2,200	4,800
국 비	4,000	1,000	1,500	1,500
시 도 비		-
시군구비	2,000		500	1,500
지 방 채
산 단 공	2,000		200	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 혁신지원센터 구축사업 신청(전남도․여수시→산업부)  : 2015. 7. 29.

○ 혁신지원센터 구축사업 대상단지 최종 선정          : 2015. 9. 15.

○ 혁신지원센터 구축사업 관계기관 협약 체결          : 2015. 12. 28.

○ 삼동지구 실시계획 인가(익산청)                     : 2016. 11. 7.

□ 향후계획

○ 혁신지원센터 구축사업 실시설계 용역        : 2017. 3. ~ 2017. 8.

○ 건축공사 착공                              : 2017. 10. ~ 2018. 11.

○ 준공 및 관련기관 입주                      : 2018. 12.

투자심사사업 14

사업명

신덕지구 연안정비

담당자

해양항만레저과 정준호(☎659-3972)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 사업은 신덕지구 연안정비사업으로 태풍 해일 등에 노출되어 훼손이 우려되는 연안을 보호하고, 침식된 연안은 호안재정비를 통해 안전한 연안구역으로 조성하며

○ 해안산책로 개설을 통하여 지역주민 해안이용의 편의를 제공 및 여가휴식을 위한 친수공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 전남 여수시 신덕동,오천동

○ 규 모 : 호안정비 L=340m, 해안산책로 L=625m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		635	642	1,723
국 비	1,688		445	450	793
시 도 비
시군구비	1,312		190	192	930

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 2. 23 : 신덕지구 연안정비사업 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2017. 6. 22 : 신덕지구 연안정비사업 실시설계용역 준공

○ 2017. 6. 26 : 신덕지구 연안정비사업 착공

○ 2017. 6. 27 : 신덕지구 연안정비사업 폐기물처리용역 착수

○ 2018. 4. 21 : 신덕지구 연안정비사업 1차분 준공

○ 2019. 6. 15 : 신덕지구 연안정비사업 최종 준공

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경	비고
사업규모	연안정비 L=450m	호안정비 L=340m, 해안산책로 L=625m
총사업비	65억	30억
사업기간	2016. 1. ~ 2019. 12.	2016. 1. ~ 2019. 12.

※ 해양수산부 실시계획 협의 과정에서 총사업비, 사업규모 변경

10-2. 지방채 발행사업

우리 여수시에서 2016년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 - 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 여수시에서 2016년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	2005년도 하수관거정비	푸른여수지키미(주)	39,865	25,601	3,898	54,392	2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30.
	2008년도 하수관거정비	여수맑은물사랑(주)	46,760	10,862	4,523	37,482	2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13.
BTO	음식물자원화시설 설치사업	㈜여수엑스포환경	11,349	11,015	2,519	41,762	2010. 1. 15. ~ 2025. 1. 14.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

▢ 하수관거정비사업

⚪ 민간사업자가 관리운영권 행사의 방법으로 약정한 기간 동안 지자체 등에 시설을    임대하고, 약정된 임대료 수입을 통해 투자비 회수(국비 70%, 시비 30%)

⚪ 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

⚪	시설임대료 = 총민간투자비	×	수익률
			1-(1+수익률)-(임대기간)

▢ 음식물자원화시설 설치사업

⚪ BTO 사업의 재정부담액은 연간 음식물 처리량에 톤당 단가를 곱한 금액. 매년 일정 규모의 사용료가 지출 되므로 재정부담이 큼.

※ 2016년 이후 연간 음식물 처리량은 2015년 처리량을 대입했으며, 톤당 단가는 소비자 물가지수 평균 변동률(2.3%)을 적용함.

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

2005년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과  박상진(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기간 : 2006. 7. 31. ~ 2010. 3. 30.

○ 위치 : 6개처리 분구(학동, 화장, 신월, 여도, 둔덕, 세구지)

○ 민간사업자 : 푸른여수지키미(주)

○ 총사업비 : 39,865백만원

○ 사업규모 : L=47.7㎞, 배수설비 4,036개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익 보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	2016년	2017년	2018년 이후
계	83,891	25,601	3,898	3,986	50,406
국 비	57,809	17,641	2,686	2,747	34,735
시 도 비
시군구비	26,082	7,960	1,212	1,239	15,671
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2010. 3. 31. ~ 2030. 3. 30. (20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

사업명

2008년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수도과  박상진(☎659-4986)

□ 사업개요

○ 기  간 : 2010. 12. 14. ~ 2014. 2. 13.

○ 위  치 : 6개처리분구(연등, 여서, 웅천, 여천, 소호, 수정)

○ 민간사업자 : 여수맑은물사랑(주)

○ 총사업비 : 46,760백만원

○ 사업규모 : L=34.76㎞, 배수설비 4,403개소

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자액	2016년	2017년	2018년 이후
계	91,952	10,862	4,523	4,437	72,130
국 비	59,024	6,973	2,903	2,848	46,300
시 도 비
시군구비	32,928	3,889	1,620	1,589	25,830
기 타

□ 추진단계

○ 운영기간 : 2014. 2. 14. ~ 2034. 2. 13. (20년)

□ 향후계획

○ 매분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

사업명

여수시 음식물자원화시설 설치사업

담당자

도시미화과  김수정(☎659-3846)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적 처리

○ 음식물류 폐기물의 자원재활용(퇴비 생산)으로 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 기      간 : 2008. 8. ~ 2010. 1(신설)/ 2012. 2. ~ 2012. 4.(증설)

○ 위      치 : 여수시 진달래길 310-157(월내동)

○ 민간사업자 : (주)엑스포환경

○ 총사업비   : 11,349백만원

○ 사업규모   : 90톤(2016년 증설)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 세후 실시 수익률 5.41%/ 2010. 1. 15. ~ 2025. 1. 14.(운영기간 15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	55,296	11,015	2,519	2,983	38,779
국 비
시 도 비
시 비	55,296	11,015	2,519	2,983	38,779
기 타

□ 추진단계

○ 시설 운영 중

□ 향후계획

○ 사용료는 매년 물가상승분 반영(2016년 단가 : 86,552원/톤, 2017년 단가 : 87,391원/톤)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : 시설증설 2012년 60→75톤/일  2016년 75→90톤/일

○ 공사비 : 11,349백만원(국비 1,620, 시비 658, 민자 9,071)