9		산단로(삼동~남수) 확장

도로과 주기옥 (659-4071)

실태		□ 여수국가산단 진입부 병목구간 정체로 출․퇴근 차량불편 초래
추진방향		□ 병목구간 정체 해소를 위해 도로 확장
기대효과		□ 사회기반시설 확충으로 물류비용 절감 및 경쟁력 제고

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 월하동 1141번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 5.26. ~ 2017. 8.25.

◦ 사업규모 : L=700m,  B=34m

◦ 사 업 비 : 50.5억원(공사비 45.5, 보상비 및 기타 5)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2015년까지	2016년	2017년이후
계	50.5	20.5	25.0	5.0
국 비
도 비
시 비	50.5	20.5	25.0	5.0
기 타

사업진행 현황

◦ 실시설계용역 완료	: 2014. 7.17.

◦ 착공(총괄 및 1차분)	: 2015. 5.26.

◦ 1차분 준공	: 2016. 5.25.

◦ 2차분 준공	: 2017. 1.12.

◦ 3차분 준공	: 2017. 8.25.

위 치 도

전경사진