14		여자만 갯노을길 조성

관광과 김 대 성 (659-3892)

실태		□ 순천에서 화양면 장수리 까지 연결되는 여자만 일주 해안변 도로가 단절되어 하이킹 관광을 할 때 기존 도로 통행이 불가피하여 안전사고 위험
추진방향		□ 여자만권을 다양한 해양 생태 체험공간과 순천만에서 고흥 팔영산으로 이어지는 여자만권을 광역 순환형 생태체험 하이킹 관광 루트(route)로 개발하기 위한 기반 시설 설치
기대효과		□ 관광인프라 구축으로 하이킹 족들을 우리 시로 유입하여 지역 경제의 활성화에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 율촌면 상봉리 ~ 화양면 이목리 일원

◦ 사업기간 : 2016. 6. 27. ~ 2019. 9. 7.

◦ 사업규모 : 해상데크 3개소(L=2,219m, B=2.9m), 숲길포장, 안내판 등

◦ 사 업 비 : 96억원(국비 48, 시비 48)

- 2015년 10억원, 2016년 9억원, 2017년 8억원 2018년이후 69억원

◦ 공 정 률 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2015년까지	2016년	2017년이후
계	96	19	0	77
국 비	48	9.5		38.5
도 비
시 비	48	9.5	0	38.5
기 타

사업진행 현황

◦ 2016.  3. 28. : 실시설계용역 최종보고

◦ 2016.  6. 27. : 총괄 및 1차분 사업착공

◦ 2017.  3. 20. : 2차분 사업착공(‘17.9.15. 준공예정)

◦ 2017.  4. 26. : 1차분 사업준공

◦ 2017.  6. 26. : 2차분 일시정지(관급자재 업체 선정 지연)

위 치 도

해상데크

전경사진 I

전경사진 II