16		율촌면 농어촌지방상수도 확충사업(3단계)

상수도과 김 강 혁 (659-4923)

실태		□농어촌 미급수지역의 수원고갈 및 식수난으로 인한 수돗물 공급 시급
추진방향		□조기에 수돗물이 공급될 수 있도록 예산 확보하여 사업 추진
기대효과		□양질의 수돗물 공급으로 식수난 해소 및 보건위생환경 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면, 율촌면 일원

◦ 사업기간 : 2015. 8. ~ 2018. 11.

◦ 사업규모 : 관로 58.4km

◦ 사 업 비 : 69.7억원(국비 48.79, 도비 6.27, 시비 14.64)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2015년까지	2016년	2017년이후
계	69.7	4.28	18.57	46.85
국 비	48.79	2.99	12.99	32.81
도 비	6.27	0.42	1.85	4.00
시 비	14.64	0.87	3.73	10.04
기 타

사업진행 현황

◦ 2013. 3. 28 : 실시설계 용역 완료

◦ 2015.  8.  7 : 총괄 및 1차분 계약

◦ 2015.  8.  7 : 1차분(L=5.5km) 착공

◦ 2016.  2.  2 : 1차분 준공

◦ 2016.  2. 29 : 2차분(L=17.1km) 착공

◦ 2016. 12. 22 : 2차분 준공

전경위성사진 (위치포함)