특수공시

특수공시 사업 목록

(2014. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분야별	사 업 명	총사업비	공정율
일반공공행정	1. 여서동 주민센터 신축	36.8	10%
	2. 학동지구 하수저류시설 설치	125	10%
	3. 미목권역 어촌종합개발	50	88%
문화및관광	4. 진남종합테니스장 건립	85	90%
	5. 진남야구장 조명타워 설치	10	100%
	6. 금오도 생태휴양 공간조성	10	100%
	7. 이충무공 어머니 사시던 곳 보수정비	6.5	70%
환경보호	8. 원도심 하수관거 정비	126	80%
사회복지	9. 노인사회활동 지원	101	100%
	10. 여수 시립 웅천어린이집 신축	21	100%
농림해양수산	11. 수산물 산지가공시설사업	19	100%
	12. 흥국사 산림공원 조성	6	100%
	13. 향토산업 육성사업(거문도해풍쑥)	30	24%
수송및 도로교통	14. 미평~만흥 도로 확장	230	50%
	15. 무선~여천초등학교 도로개설	100	20%
국토 및 지역개발	16. 찾아가고 싶은 섬(여자도)조성	25	25%
	17. 찾아가고 싶은 섬(백야도)조성	25	50%

1		여서동 주민센터 신축

회계과 김희영(659-3221)

실태		□건물 노후화로 누수 및 균열 등 현상이 심하며, 민원실 협소로 증가되는 여서지구 행정수요 충족에 어려움이 있음
추진방향		□현 여서동 주민센터 인근 주차장 부지를 매입하여 신축 추진
기대효과		□직원 근무환경 개선 및 민원 서비스 향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 여서동 386번지

◦ 사업기간 : 2014. 3. ~ 2015. 10.

◦ 사업규모 : 4층/ 1동, 연면적 1,743.12㎡

◦ 사 업 비 : 36.8억원(시비 36.8)

◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	36.8	-	6.8	30	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	36.8	-	6.8	30	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2014.  3. 22. : 지방재정 투․융자사업 심사 승인

◦ 2014.  4.  3. : 공유재산 관리계획 의결

◦ 2014.  9. 19. : 신축부지 매입

◦ 2014. 10. 30. : 설계용역 착수

◦ 2015.  2. 11. : 설계용역 완료

◦ 2015.  3. 26. : 공사착수

◦ 2015. 10. 21. : 공사준공 예정

위 치 도

조 감 도

2		학동지구 하수저류시설 설치

하수도과 차재원(659-4991)

실태		□ 집중호우시 상습적인 침수피해 발생으로 근본적인 침수방지 대책 필요
추진방향		□ 하수저류시설을 설치하여 침수예방과 주민생활 안정 도모
기대효과		□ 우수 저류시설 설치 및 관로를 정비하여 침수 피해를 예방하고, 지역 주민의 생활과 재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 학동지내(시청앞 거북선 잔디광장)

◦ 사업기간 : 2014. 01. ~ 2016. 12.

◦ 사업규모 : 하수저류시설 12,000㎥, BOX개량 L=370m,관로개선 L=732m, 유입박스 L=52m

◦ 사 업 비 : 125억원(국비 88 / 시비 37)

◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	125	-	42	36	47
국 비	88	-	30	25	33
도 비	-	-	-	-	-
시 비	37	-	12	11	14
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ ’14. 06. 26.  : 기본 및 실시설계 용역 완료

◦ ’15. 01. 26.  : 학동1지구 공공하수도(하수저류시설) 설치인가

◦ ‘15. 02. 04.  : 공사발주 공고

위 치 도

전경사진

3		미목권역 어촌종합개발

실태		□ 생활환경 불편에 따른 도시이동 가속화로 인한 고령화현상으로 지역사회 침체 가중
추진방향		□ 어업인의 의견을 적극 반영하는 하의상달식 계획수립 □ 기존 어항개발, 생산기반사업과 연계로 사업효과 극대화
기대효과		□ 어촌의 소득증진 및 생산기반시설, 관광기반시설 마련

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 화양면 용주리, 나진리, 서촌리, 이목리

◦ 사업기간 : 2011년～2015년

◦ 사업규모 : 방파제, 선착장, 어장진입로, 인양기 등 23개소

◦ 사 업 비 : 50억원(국비 35 / 도비 7.5 / 시비 7.5)

◦ 공 정 률 : 88%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년 까지	2014년	2015년	2015년이후
계	50	27	17	6	-
국 비	35	19	12	4	-
도 비	7.5	4	2.5	1	-
시 비	7.5	4	2.5	1	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2012. 01. : 2012년 어촌종합개발사업(미목권역) 사업추진(3개소)

◦ 2013. 01. : 2013년 어촌종합개발사업(미목권역) 사업추진(8개소)

◦ 2014. 01. : 2014년 어촌종합개발사업(미목권역) 사업추진(8개소)

◦ 2015. 01. : 2015년 어촌종합개발사업(미목권역) 사업추진(2개소)

◦ 2015. 08.  : 2015년 어촌종합개발사업 준공

위 치 도

전경사진

4		진남종합테니스장 건립

체육지원과 박재천(659-3267)

실태		□ 테니스 동호회 및 동호인 수를 감안한 테니스장 시설 확충 필요 - 동호회 75개, 동호인 30,000명임을 감안할 때 공공테니스장은 21면으로 수요 부족 해소 필요
추진방향		□ 체육시설 국제화 규격을 갖춘 전천후 공인테니스장 건립
기대효과		□ 전천후 공인테니스장 건립으로 시민 건강증진을 도모하고 전지 훈련팀 유치로 지역경제 활성화에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 오림동 104번지 일원

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 실내코트 2면(지상2층/1동, 연면적 2,998㎡), 실외코트 10면

◦ 사 업 비 : 85억원(국비 26 / 시비 59)

◦ 공 정 률 : 90%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	85	52	33	-	-
국 비	26	16	10	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	59	36	23	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2011.  4. : 공유재산관리계획 심의 의결

◦ 2012.  7. : 여수시 도시관리계획 결정(변경)

◦ 2012. 11. : 공사 착공

◦ 2015.  4. : 공사 준공

위 치 도

전경사진

5		진남야구장 조명타워 설치

체육지원과 박재천(659-3267)

실태		□ 전남유일의 야구장으로 각종 경기대회 개최 및 전지훈련장으로 사용되고 있으나 야간 이용이 어려움에 따른 시설 활용 불편 - 동호회 40개팀, 동호인 1,600명임
추진방향		□ 조명탑 설치로 체육인에게 야간 운동 기회 제공
기대효과		□ 야구장 조명타워 확충으로 야구인 저변확대 및 시민건강 증진 기여 □ 각종 국내 대회 유치 및 동․하계 전지훈련장 활용으로 지역경제 활성화에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 오림동 104번지 일원

◦ 사업기간 : 2014년

◦ 사업규모 : 조명탑 6기(4기-21.3m, 2기-24.4m),  전광판 설치(10.5m×7.0m, H=13.0m)
조명기구  1,500w 84등(내야 800LUX, 외야 500LUX)

◦ 사 업 비 : 10억원(국비 3 / 시비 7)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	10	-	10	-	-
국 비	3	-	3	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	7	-	7	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2014.  2. : 실시설계용역 완료

◦ 2014.  3. : 전남도 계약심사 등 완료

◦ 2014.  4. : 공사 착공

◦ 2014. 11. : 공사 준공

위 치 도

전경사진

6		금오도 생태휴양 공간조성

관광과 김대성(659-3892)

실태		□ 수려한 자연경관인 비렁길과 연계될 수 있는 관광인프라 구축 필요
추진방향		□ 잠재되어 있는 여수의 해양․생태 관광자원 개발
기대효과		□ 비렁길 탐방객이 쉬다 야영할 수 있는 시설을 조성하여 체류형 관광 유도로 지역경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 남면 금오도 일원 일원

◦ 사업기간 : 2014. 7. 8 ~ 2015. 3. 11

◦ 사업규모 : 폐교 리모델링 A=351.76㎡, 야영장 1식, 전기설비 1식

◦ 사 업 비 : 10억원(국비 4 / 시비 6)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	10	-	10	-	-
국 비	4	-	4	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	6	-	6	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ ‘14. 04. 03. : 생태휴양공간 조성사업 실시설계용역 준공

◦ ‘14. 05. 19. : 편입토지(폐교) 보상 협의 완료(교육지원청)

◦ ‘14. 07. 08. : 생태휴양공간(야영쉼터) 조성사업 착공

◦ ‘15. 02. 21. : 생태휴양공간(야영쉼터) 조성사업 준공(토목․건축, 전기)

◦ ‘15. 03. 10. : 생태휴양공간(야영쉼터) 조성사업 준공검사 완료

위 치 도

생태휴양공간

(야영장 5,868㎡)

7		이충무공 어머니 사시던 곳 보수정비

문화예술과 윤창열(659-4757)

실태		□ 시지정문화유산으로 지정된 이충무공 어머니 사시던곳의 건물보수 및 주변정비를 위한 사업 시행 필요
추진방향		□ 문화유산의 보존과 관광지 개발
기대효과		□ 이 충무공 문화유산 보존

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 충효길 25-5

◦ 사업기간 : 2014. 6. ~ 2015. 12.

◦ 사업규모 : 본채보수 1식, 사랑채 및 안내사 신축, 주변정비 등

◦ 사 업 비 : 6.5억원(시비 6.5)

◦ 공 정 률 : 70%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	6.5	-	4	2.5	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	6.5	-	4	2.5	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2014. 6. 27.  : 1차공사 착공(본채 보수, 안내사 신축 등)

◦ 2014. 12. 24. : 1차 보수공사 완료

◦ 2015. 2. 2.   : 2차공사 착공(사랑채 신축, 주변정비 등)

위 치 도

전경사진

8		원도심 하수관거 정비

하수도과 박가영(659-4988)

실태		□ 원도심지역 노후 하수관로로 인한 악취 및 생활하수 발생으로 주민 불편 사항 발생
추진방향		□ 분류식 하수관로 도입과 노후 하수관로 정비로 환경 개선
기대효과		□ 선진화된 하수관로 정비로 연안해역 수질오염 방지

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 중앙, 충무, 교, 신기, 쌍봉동 일원

◦ 사업기간 : 2010. 6. ～ 2015. 12.

◦ 사업규모 : 관로정비 L=21km, 배수설비 1식

◦ 사 업 비 : 126억원(국비 88.2 / 시비 37.8)

◦ 공 정 률 : 80%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	126	48.5	31.1	46.4	-
국 비	88.2	34	21.8	32.4	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	37.8	14.5	9.3	14	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ ‘11.  7.  30. : 2차분 착공

◦ ‘12.  6.   7. : 3차분 총괄 및 착공

◦ ‘14. 12.  30. : 진도 80%

위 치 도

전경사진

9		노인사회활동지원

노인장애인과 박영화(659-3716)

목 적		□ 노인이 활기차고 건강한 노후를 영위할 수 있도록 다양한 사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
참여대상		□ 만 65세 이상 기초연금수급자
기대효과		□ 다양한 사회활동을 통한 적극적 사회참여, 소득보충 및 건강증진 등으로 노인문제 예방 및 사회적 비용 절감

사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1. ～ 12

◦ 사업인원 : 3,954명(보조사업 2,404, 자체사업 1,550)

◦ 사 업 비 : 59억원(국 24 / 도 12 / 시 23)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	101	42	59	-	-
국 비	42	18	24	-	-
도 비	21	9	12	-	-
시 비	38	15	23	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2013. 12～1 : 인일자리(연중) 참여자 선발 및 사업시작

◦ 2014.  2～3 : 노인일자리(9개월) 참여자 선발 및 사업시작

◦ 2014.  8    : 혹서기 휴무

◦ 2014. 12.   : 사업평가 및 사업 종료

활동사진

10		여수 시립 웅천어린이집 신축

여성가족과 이정희(659-3761)

추진과정		□ 생명보험사회공헌재단에서 실시하는 어린이집 신축 공모 사업에 선정되어 16억원 상당 어린이집 기부채납
추진현황		□ 대지 622.8㎡, 연면적 703.04㎡, 지상3층, 정원 85명
기대효과		□ 출산, 육아부담으로 인한 여성의 경력단절 문제를 해소하고 일․가정 양립으로 저출산 문제 해결과 영유아에게 우수한 품질의 보육서비스 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천중앙로 54(웅천동)

◦ 사업기간 : ‘13. 12. 17. ～ ’14. 12. 30.

◦ 사업규모 : 지상3층/ 연면적 703.04㎡

◦ 사 업 비 : 21억원(시 5 / 민자 16)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년 까지	2014년	2015년	2015년이후
계	21	-	21	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	5	-	5	-	-
기 타	16	-	16	-	-

사업진행 현황

◦ 2013. 12. 17. : 생명보험사회공헌재단 공모사업에 선정

◦ 2014.  3. 13. : 협약식 체결

◦ 2014. 12. 30. : 어린이집 신축공사 준공

◦ 2015.  2. 11. : 기부채납(생명보험사회공헌재단 → 여수시)

◦ 2015.  6.  1. : 어린이집 개원

위 치 도

전경사진

11		수산물 산지가공시설사업

수산경영과 명순재(659-3911)

실태		□ 수산물 가공시설 대부분이 노후화에 따라 가공식품 판매부진 □ 수산물 가공시설 부족으로 산지수산물 적기 미처리
추진방향		□ HACCP등 국제위생 기준에 적합한 가공시설 현대화 추진
기대효과		□ 국민에게 안전하고 깨끗한 수산식품 공급

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 화양면 옥적리 275 외1

◦ 사업기간 : 2014년

◦ 사업규모 : 2개소(화양면 - 연면적 1,155㎡, 오천동- 연면적 501㎡)

◦ 사 업 비 : 18.63억원(국비 5.59 / 시비 5.59 / 자담 7.45)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	18.63		18.63	-	-
국 비	5.59	-	5.59	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	5.59		5.59	-	-
기 타	7.45	-	7.45	-	-

사업진행 현황

◦ 2014.  4. : 사업자 선정

◦ 2014.  5. : 보조금 교부결정

◦ 2014.  6. : 사업 착공

◦ 2014. 12. : 사업 준공

전경사진

화양면

전경사진(오천동)

12		흥국사 산림공원 조성

산림과 유경숙(659-4636)

실태		□ 여수국가산단 연관단지 조성사업 추진으로 흥국사입구(저수지주변) 상가건물이 철거된 상태로 방치되어 도시미관을 해치고 있어 주변과 어울리는 산림으로 복원이 절실함
추진방향		□ 수목식재 및 휴게시설 설치로 산림휴양공간 제공
기대효과		□ 영취산 진달래 축제장 및 흥국사와 연계하여 다양한 테마를 가진 산림휴양공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 중흥동 산191임 일원

◦ 사업기간 : 2014년

◦ 사 업 량 : 5ha

◦ 사 업 비 : 6억원(국비 3 / 시비 3)

◦ 공 정 률 : 100%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	6	-	6	-	-
국 비	3	-	3	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	3	-	3	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2014. 9.2. : 국가지정문화재 현상변경 등 허가 득

◦ 2014. 10. : 공사 착공

◦ 2015.  1. : 공사 준공

위 치 도

전경사진

13		향토산업 육성지원(거문도해풍쑥)

특산품육성과 임 강 주(659-4502)

실태		□ 도서 지역의 어족자원 감소와 건강에 대한 소비자 관심 증가로 거문도 해풍쑥의 경제적 가치 향상
추진방향		□ 거문도해풍쑥 홍보․마케팅 강화로 브랜드가치 향상과 힐링체험시설 건립을 통한 새로운 체험관광지 조성
기대효과		□ 거문도해풍쑥 명품 브랜드 육성 및 관련 농가 소득향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 삼산면 서도리, 돌산읍 금봉리 일원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년간)

◦ 사업규모 : 4개분야 18개 세부사업(경상사업 14, 자본사업 4)

◦ 사 업 비 : 30억원(국비 15 / 도비 1.8 / 시비 7.2 / 자담 6)

◦ 공 정 률 : 24%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	30	-	7.3	11.8	10.9
국 비	15	-	3.5	5.5	6
도 비	1.8	-	0.42	0.7	0.68
시 비	7.2	-	1.68	2.6	2.92
기 타	6	-	1.7	3	1.3

사업진행 현황

◦ 2013. 11. 6. : 향토산업육성사업 최종 선정(쑥 실용화 및 힐링체험사업)

◦ 2014. 1. 22. : 향토산업육성사업 향토사업단 구성 및 운영위원 위촉

◦ 2014. 1~12. : 향토산업육성 1년차 사업 추진(4개 분야 15개 세부사업)

◦ 2015. 1~12. : 향토산업육성 2년차 사업 추진(4개 분야 15개 세부사업)

- 사업단 역량강화 및 해풍쑥 연구개발, 홍보 마케팅, 힐링체험장 조성 등

위 치 도(삼산면 서도리 66-3)

전경사진

14		미평~만흥 도로 확장

도로과 황용순(659-4071)

실태		□ 해양경찰교육원, 만성리 해수욕장 등 진입로 협소로 교통체증 발생
추진방향		□ 간선도로망 확충으로 관내 주요시설 및 관광지 교통체증 해소
기대효과		□ 주요 관광지 진입로 확장으로 해양관광 도시 발전에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 미평동~만흥동

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 도로확장 L= 2.2km, B= 25m

◦ 사 업 비 : 230억원(시 230)

◦ 공 정 률 : 50%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년까지	2014년	2015년	2015년이후
계	230	81	120	29	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	230	81	120	29	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 만흥~오천 구간은 미평~만흥 완료 후 시행

사업진행 현황

◦ 실시설계용역 완료                      :  2006.  9. 9.

◦ 실시계획인가                           :  2007.  4. 7.

◦ 공사착공                               :  2013. 11.29.

◦ 공사완료 예정                          :  2015. 12.  .

위 치 도

L=2.2km, B=25m

전경사진

15		무선~여천초등학교 도로 개설

도로과 강 성 욱(659-4072)

실태		□ 국가산단에서 무선방면 도로가 없어 우회지역인 학동지역의 교통체증 심화
추진방향		□ 배후 주거지인 무선과 국가산단 간의 도로개설로 교통체증 해소
기대효과		□ 교통체증 해소 및 출퇴근 거리 감소에 따른 물류비용 절감

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 화장동 무선~주동 사거리

◦ 사업기간 : 2012~2017

◦ 사업규모 : 도로확장 L= 1.06km, B= 25m

◦ 사 업 비 : 100억원(시비100)

◦ 공 정 률 : 20%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년 까지	2014년	2015년	2015년이후
계	100	11	31	10	48
국 비
도 비
시 비	100	11	31	10	48
기 타

사업진행 현황

◦ 실시설계용역 완료	:  2012. 12.28.

◦ 실시계획인가	:  2013.  6.20.

◦ 공사착공	:  2015.  5. 9.

◦ 공사준공예정	:  2017. 11.18.

위 치 도

도 로 개 설

L=1,060m B=25m

쌍 봉 교

L=50m B=25m

전경사진

16		찾아가고 싶은 섬(여자도) 조성

섬자원개발과 김수구(659-3987)

실태		□ 낙후 도서지역 주민들의 소득증대를 위한 시설로 관광객 유입 및 어업기반시설 설치필요
추진방향		□ 도서지역 주민들의 소득증대 및 관광객 유치 기여
기대효과		□ 관광객 유입을 통한 일자리 창출로 소득이 증대됨으로써 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 화정면 여자리 일원

◦ 사업기간 : 2014. ~ 2017.

◦ 사업규모 : 수산물저장창고, 예술센터조성, 탐방로 조성

◦ 사 업 비 : 25억원(국비 20 / 도비 2.5 / 시비 2.5)

◦ 공 정 률 : 25%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년 까지	2014년	2015년	2015년이후
계	25	-	6.25	6.25	12.5
국 비	20	-	5	5	10
도 비	2.5	-	0.625	0.625	1.25
시 비	2.5	-	0.625	0.625	1.25
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황 및 계획

◦ 2013. 06. 10. : “찾아가고 싶은 섬” 가꾸기사업 공모 선정(행자부)

◦ 2014. 04. 10. : 기본계획 및 지역역량강화사업 용역 착수

◦ 2014. 12. 30. : 2014년 사업 준공(예술인센터 인입수도 등 기반시설)

◦ 2015.  6. ~ 2015. 11. : 예술인센터 및 수산물 저장창고 신축

◦ 2016.  1. ~ 2017. 12. : 수산물 저장창고 1동 및 탐방로 정비

위 치 도

전경사진

17		찾아가고 싶은 섬(백야도) 조성

섬자원개발과 김대성(659-3989)

실태		□ 낙후 도서지역 주민들의 소득증대를 위한 체험 및 숙박등 일자리 창출 필요
추진방향		□ 체험센터 및 직거래장터 등 신축으로 주민 일자리창출 기여
기대효과		□ 일자리 창출로 소득이 증대됨으로써 지역경제 활성화 및 정주여건 개선

사 업 개 요

◦ 위    치 : 화정면 백야리 일원

◦ 사업기간 : 2013. ~ 2016.

◦ 사업규모 : 체험센터 1동(2층, 철근콘크리트), 바지락 체험장 조성
로컬푸드시설 1동, 마을 환경정비

◦ 사 업 비 : 25억원(국비 20 / 도비 2.5 / 시비 2.5)

◦ 공 정 률 : 50%

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2013년 까지	2014년	2015년	2015년이후
계	25	6.25	6.25	6.25	6.25
국 비	20	5	5	5	5
도 비	2.5	0.625	0.625	0.625	0.625
시 비	2.5	0.625	0.625	0.625	0.625
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

◦ 2012. 05. 09. : “찾아가고 싶은 섬” 가꾸기사업 공모 신청

◦ 2012. 06. 27. : 특수상황지역 도서개발사업으로 확정

◦ 2013. 03. 11. : 주민공청회 실시(주민 70명 참석)

◦ 2013. 04. 08. : 기본계획 승인 요청(여수시⇒전남도⇒행자부)

◦ 2013. 06. 25. ~ 2013. 12. 31. : 1차년도 사업 추진

⇒ 바지락체험장 및 로컬푸드 조성

◦ 2014. 05. 27. ~ 2014. 10. 26. : 2차년도 사업 추진

⇒ 체험센터 골조 및 토공

위 치 도

바지락체험장

로컬푸드판매장

체험센터

전경사진